2020.  1.

2020년도

주요업무계획보고

재난안전과

보 고 순 서

□ 2019년 성과와 2020년 목표										1
□ 2020년 주요업무계획										3
【도전과제】
○ 장평 노선지구 재해위험지구 정비사업										4
○ 전남 소방학교 시설확충 부지매입										5
【혁신과제】
○ 찾아가는 군민안전교육										6
○ 노후 민방위 경보시설 교체										7
○ 신규 소하천 정비사업										8
○ 주․정차단속 문자알림 시스템 구축										9
○ 택시사업 안정화 추진(감차보상)										10
○ 영상정보 저장장치(스토리지) 증설										11
【협업과제】
○ 탐진강 테마형 공간조성 아이템 발굴 용역										12
【블루이코노미과제】
○ 전남도 「블루종합안전테마파크」유치										13
○ 도시부 제한속도 낮추기(5030) 사업										14
○ 지방하천 제방도로 안전시설 확충사업										15

【일반(계속)사업】
○ 군민 안전보험 가입						16
○ 안전문화운동 추진						16
○ 교통사고 사망자 절반줄이기 추진						17
○ 주민안전 활동단체 지원						17
○ 의용소방대 사무실 확보 지원						18
○ 민방위 편성운영 및 비상대비태세 확립						18
○ 재난 사전예방을 위한 안전대책 추진						19
○ 국가안전대진단 위험시설물 점검용역						19
○ 용강․반월천 자연재해위험지구 정비사업						20
○ 어곡․거동 소하천 정비사업						21
○ 국가하천 유지관리사업(국비, 군비)						22
○ 지방하천․소하천 유지보수						23
○ 교통안전시설물 확충 및 관리						23
○ 장흥읍 소규모 공영주차장 조성						24
○ 농어촌버스 소외지역 100원택시 운영						24
○ 운수업계 경영안정 지원						25
○ 교통약자 이동지원센터 운영 지원						25
○ 농어촌버스 단일요금제 운영						26
○ 군민 안전지킴이 CCTV 설치						26

2019년 성과와 2020년 목표

2019년 주요업무 성과

○ 재난없는 장흥군 만들기

- 태풍 다나스(7월), 링링(9월), 타파(9월), 미탁(10월) 대응

- 군민안전보험 가입 및 화재 취약계층 소방시설 보급(4,000세대)

- 전남도 스마트 방범용 CCTV 구매사업 선정(40백만원)

- 전 직원 재난상황근무 요원화 시행 : 연중 / 매일 2명

- 24시간 재난안전상황실 운영 : 메시지 1,500건

○ 탐진강유역 공동 관리를 위한 관계기관 협의체 구성

- 탐진강 생태환경보전 및 아름다운 경관조성 등 지속적인 발전방안

공동강구 계기 마련

○ 군민들의 교통복지 실현

- 농어촌버스 단일요금제(1,000원버스) 시행

- 교통약자 이동지원센터 콜택시 운행(5대)

- 장흥읍 시가지 공영주차장 확대 : 8개소(229면) / 공영 3(62면), 임시 5(167면)

○ 예비군 육성지원 및 비상대비태세 확립

- 전라남도 민방위 경진대회 여성부 우수상, 남성부 장려상 수상

- 예비군 육성지원 우수 지자체 선정 육군참모총장 감사패 수상

2020년 추진 목표

모두가 안전한 장흥

다함께 잘 사는 지역만들기

안전정책팀		안전이 일상이 되는 제도․문화 정착 새로운 안보환경에 적합한 국가비상대비태세 확립
사회재난팀		국가재난관리체계 혁신 및 사고유형별 맞춤형 관리 재난사고 위험요소 선제적 관리 및 체계적 재난 예방
자연재난팀		체계적인 자연재난 예방 관리 재난없는 장흥군 만들기 : 예방 → 대응 → 수습․복구
교통행정팀		군민 중심의 선진 대중 교통행정 추진 장흥읍 시가지 공영주차장 조성 총력
통합관제팀		범죄로부터 국민안전 확보 및 치안안전망 확충

2020년 주요 업무계획

도전과제

장평 노선지구 재해위험지구 정비사업

사업기간 : 2020. 1월 ~ 2022. 12월

위    치 : 장평면 보성강 / 노선지구

사 업 량 : 제방 보축 200m, 교량 2개소

사 업 비 : 6,000백만원(국비 3,000, 군비 3,000)

⇒ 20년 150백만원(군비) / 실시설계비

□ 필 요 성

○ 재해발생 우려가 높은 재해위험지구 중기계획 반영 및 지구지정

○ 지역주민들의 활용도가 높은 노후된 교량 및 하천을 정비하여 군민의 안전 확보

□ 추진계획

○ 2021년 재해위험지구 중기계획 신규지구 반영 요청 : 2019. 12월

○ 실시설계용역 발주                            : 2020.  1월

○ 실시설계용역 준공                            : 2020. 10월

○ 2021년 재해위험지구 신규지구 사업 신청       : 2020. 10월

○ 사업 발주                                    : 2021.  1월

□ 기대효과

○ 재해위험이 높은 시설물의 정비를 통해 주민의 생명과 재산보호

○ 하천 내 주변정비를 통한 친수공간 조성 및 하천 재해예방

------------------------------------------------------------------------------------------------

전남도 : 자연재난과장 정종태, 자연재난관리팀장 조선희, 담당자 오대은(061-286-3723)

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 자연재난팀장 김군창, 담당자 황수현(061-860-6191)

도전과제

전남 소방학교 시설확충 부지매입

	시설확충 계획
사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5개년) 사업예산 : 27,779백만원 추진방법 : 연차적 확충(필수시설 → 지원시설 → 선택시설 순) 시설내용 : 본관, 생활관, 종합훈련장, 차고, 공기충전실 등

□ 필 요 성

❍ 최근 소방공무원의 지속적 충원 및 공공기관 종사자, 의용소방대, 학생 등 체험형 안전교육수요가 증가하고 있으나 교육훈련시설의 절대부족

❍ 전라남도의 시설확충계획 수립 및 사업부지 제공요청에 따라 추가부지 매입 제공으로 소방행정 및 소방교육 중심도시 위상

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 9월

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(군비)

❍ 매입면적 : 36,035㎡(10,900평) / 장흥읍 우산리 산56번지 일원

□ 추진일정

❍ 부지매입 협의 및 소유권 이전 : 2020. 1 ~ 6월

❍ 군 관리계획 변경 용역        : 2020. 1 ~ 9월

❍ 무상사용허가 동의 및 승인    : 2020. 10월

------------------------------------------------------------------------------------------------

전남도 : 소방교육과장 최병관, 교육기획팀장 이정현, 담당자 서정채(061-286-0982)

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 안전정책팀장 이경호, 담당자 김미란(061-860-6172)

혁신과제

찾아가는 군민안전교육

사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월(연중)

사 업 비 : 5백만원

교육대상 : 군청 산하공무원, 관내 유관기관 종사자, 주민

교육내용 : 화재대피, 소화기, 응급처치, 재세동기 사용법 등 교육

※ 남도안전학당 전문강사 및 의용소방대원 활용

□ 필 요 성

❍ 생활 속 안전사고, 폭염‧한파, 미세먼지, 보이스피싱, 지진 등 각종 재난사고로 안전 및 안전교육에 관심도 증가

❍ 학생, 어르신들 위주로 안전교육이 실시되고 있으나 직장인, 장애인, 다문화가족 등 안전취약계층에 대한 안전교육 확대

□ 추진일정

❍ 군민안전교육 홍보 및 읍‧면별 수요조사  : 2020. 1월

❍ 안전교육 운영 및 만족도 조사           : 2020. 2월 ~ 12월

□ 기대효과

❍ 재난대비 및 예방의 중요성 재인식 및 고취

❍ 재난상황 발생 시 신속한 조치 및 대응능력 배양으로 인적․물적 피해 최소화

------------------------------------------------------------------------------------------------

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 안전정책팀장 이경호, 담당자 주명현(061-860-6174)

혁신과제

노후 민방위 경보시설 교체

사업기간 : 2020. 1월 ~ 3월(3개월)

위    치 : 2개소(군청, 대덕읍)

사 업 비 : 140백만원(도비 42, 군비 98)

사 업 량 : 노후경보시설 2개소

□ 필 요 성

❍ 민방공 및 재난 사태 발생 시 신속한 경보전파와 최적의 경보전달체계 확립을 위하여 10년이상 된 경보단말기 및 스피커, 부대시설 교체

□ 경보단말기 현황

설치위치	설치일자	취득일자	앰프출력	가청인구
장흥군청	1988.10. 10.	2009. 3. 17.	2.4kw	14,398명
관산읍	〃	2009. 4. 28.	〃	2,403명
대덕읍	〃	〃	〃	3,700명

□ 추진계획

❍ 설계 용역 및 사업 시행 : 2020. 1월 ~ 3월

❍ 경보단말기 운영        : 2020. 4월

□ 기대효과

❍ 각종 재난사태 발생 시 최적의 경보전파체계 구축․발령으로 군민안전도모

------------------------------------------------------------------------------------------------

전남도 : 안전정책과장 박종필, 경보통제팀장 신태권, 담당자 차소신(061-286-3273)

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 안전정책팀장 이경호, 담당자 주명현(061-860-6174)

혁신과제

신규 소하천 정비사업

사업기간 : 2020. 1월 ~ 2022. 12월

위    치 : 대덕 오산소하천, 안양 학송소하천, 장동 양곡소하천

사 업 량 : 오산천정비 0.4km, 학송천정비 0.95km, 양곡천정비 1.6km

사 업 비 : 3,866백만원(균특이양 1,933, 군비 1,933)

※ ‘20년 사업비 : 오산천 600백만원, 학송천 600백만원, 양곡천 600백만원

□ 필 요 성

○ 통수단면 부족으로 매년 소하천 인근 주택 및 농경지 침수피해 발생

○ 노후된 소하천 구조물 보수 및 유수소통에 지장을 초래하는 부적합

시설개선으로 재해위험요소 사전 제거

□ 추진계획

○ 실시설계용역 추진                             : 2020. 1월

○ 주민설명회 및 행정협의                        : 2020. 3월

○ 사전설계검토 및 계약심사, 용역 완료 및 보상협의 : 2020. 5월

○ 1차분 사업 착공                               : 2020. 6월

○ 1차분 사업 완료                               : 2020. 12월

□ 기대효과

○ 재해위험이 높은 시설물의 정비를 통해 주민의 생명과 재산보호

○ 하천 내 주변정비를 통한 친수공간 조성 및 수질 개선으로 쾌적한 환경 조성

------------------------------------------------------------------------------------------------

전남도 : 자연재난과장 정종태, 자연재난대응팀장 임광건, 담당자 정인화(061-286-3731)

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 자연재난팀장 김군창, 담당자 김정식(061-860-6193)

혁신과제

주·정차단속 문자알림 시스템 구축

◤ 주·정차 단속구역에 진입한 차량이 단속상황을 인지할 수 있도록 휴대전화

문자로 알림서비스를 제공하여 자진 이동 유도 및 주정차 위반 예방

□ 필 요 성

❍ 주정차 단속구역임을 인지하지 못해 동일 장소 위반사례 발생 빈번

❍ 주정차단속 시 단속위주에서 계도위주로 전환함으로써 민원발생 최소화, 보행자 및 차량의 원활한 통행 유도

□ 추진계획

❍ 사 업 비 : 54백만원(군비)

❍ 사업대상 : 고정식 CCTV 설치구역 등 주정차 금지구역

❍ 가입대상 : 거주지와 관계없이 우리군을 운행하는 차량운전자

❍ 사업내용 : 주정차 단속 문자알림 서비스 가입 차량에 대해 주정차 위반사항 안내문자 발송

□ 추진일정

❍ 주정차단속 문자알림 서비스 설치 용역     : 2020. 1 ~ 2월

❍ 주정차단속 알림서비스 운영               : 2020. 2월 ~

- 운영시간 : CCTV 단속시간과 동일(계절별 탄력적 운영)

------------------------------------------------------------------------------------------------

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 교통행정팀장 조기우, 담당자 이연인(061-860-6204)

혁신과제

택시사업 안정화 추진(감차보상)

택시현황 : 82대

- 법인택시 9개업체 34대    - 개인택시 장흥읍 30대, 그 외 18대

□ 필 요 성

❍ 택시 이용객의 계속적 감소에 따른 과잉 공급 해소 및 공급량의

적정수준 유지를 통한 택시산업의 안정화를 위해 단계적 감차 추진

□ 추진사항 및 추진계획

❍ 제4차 장흥군 택시총량제 용역실시             : 2019. 5월 ~ 9월

- 용역결과 : 17대 감차 필요(법인 7, 개인 10)

❍ 제4차 장흥군 택시총량제 감차위원회 회의 개최 : 2019. 11월

- 대당 감차 보상금 : 법인 42백만원 / 개인 85백만원(장흥읍),67백만원(장흥읍 외)

❍ 연도별 감차계획

구 분	계	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
계	17	4	4	3	3	3
개인택시	10	4	3	1	1	1
법인택시	7	0	1	2	2	2

※ 2020년 감차보상 사업비 추경 확보 : 168백만원(개인택시 4대)

□ 추진일정

❍ 감차보상비 예산 확보         : 2020. 3월

❍ 감차사업비 지원 건의 및 확보 : 2020. 4월

❍ 감차대상 선정 및 보상        : 2020. 5월

------------------------------------------------------------------------------------------------

국토부 : 도시교통과장 백건수, 도시교통팀장 오송천, 담당자 전철주(044-201-4772)

전남도 : 도로교통과장 이상훈, 교통기획팀장 조문형, 담당자 임홍주(061-286-7424)

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 교통행정팀장 조기우, 담당자 임정웅(061-860-6201)

혁신과제

영상정보 저장장치(스토리지) 증설

◤ 신규 CCTV설치가 증가함에 따라 영상정보를 저장하는 스토리지를

증설하여 통합관제의 효율적인 운영 및 관리

□ 필 요 성

❍ 지속적으로 증가하는 CCTV 영상정보를 안정적으로 저장·관리하기 위함.

- 근거 : 개인정보 보호법 제12조(개인정보 보호지침) 및

개인정보 보호법 제25조(영상정보처리기기의 설치·운영 제한)

표준 개인정보 보호지침 제45조(보관 및 파기) - 30일 보관

□ 추진계획

❍ 사 업 비 : 240백만원

❍ 증설시기 : 2020년 상반기

- 사업 설계 및 발주 : 2020. 1월

- 설치 및 물품검수  : 2020. 1월 ~ 3월

❍ 증설용량 : 980TB (영상정보 보관기간 : 30일)

❍ 사업물량 : 컨트롤러시스템 1대, 익스펜션(디스크확장팩) 2대, 서버 2대

❍ 사업내용

- 현 시스템을 그대로 수용하고 추가 증설이 가능한 컨트롤러시스템 도입

- 관내 15개 초등학교 CCTV 영상정보 통합관제센터에서 저장관리

□ 기대효과

❍ 효율적인 CCTV 영상관리로 상황발생 시 신속한 사건 처리 가능

------------------------------------------------------------------------------------------------

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 통합관제팀장 이병택, 담당자 노석민(061-860-6211)

협업과제

탐진강 테마형 공간조성 아이템 발굴 용역

사업기간 : 2020. 1월 ~ 3월

위    치 : 장흥댐 ~ 탐진강 사인정

사 업 비 : 20백만원(군비)

사 업 량 : 연구개발용역 1식

□ 필 요 성

○ 제1회 탐진강 유역 협의회 안건인 스토리텔링 용역 익산청 추진

○ 우리군의 생태, 문화, 역사를 바탕으로 한 참신한 아이템을 발굴하여 익산청 발주용역에 반영

□ 추진계획

○ 아이템발굴 용역 착수                          : 2020. 1월

○ 아이템발굴 용역 준공                          : 2020. 3월

○ 장흥군만의 스토리텔링 용역의 방향 제시, 아이템 제공 : 2020. 3월

○ 탐진강 유역 스토리텔링 용역 지속적 협력관계 유지 : 2020. 12월

※ 탐진강 유역 스토리텔링 용역 착수(익산청) : 2019. 12월

□ 기대효과

○ 탐진강 내 생태, 문화, 역사, 관광 등에 대한 신규 아이템과 기존 관광자원과 연계하여 탐진강 유역 지역경제 활성화 도모

------------------------------------------------------------------------------------------------

익산청 : 하천공사과           사무관대우 이득재, 담당자 서현주(063-850-9332)

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 자연재난팀장 김군창, 담당자 황수현(061-860-6191)

블루이코노미과제

전남도 「블루종합안전테마파크」유치

	사 업 개 요
사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간) 사 업 비 : 300억원(국비 150, 도비 150) 건립규모 : 4/1층, 부지면적 100,000㎡(30,000평), 연면적 6,000㎡내외 - 육상·해양·기타 재난을 아우르는 종합 안전테마파크

□ 지금까지 추진사항

❍ 전남소방본부장 방문 안전테마파크 조성계획 설명 : 2019. 8. 19.

❍ 장흥군 테마파크 조성부지 무상제공 의견 제출    : 2019. 8. 23.

- 장흥 IC인근 100,000㎡, 우드랜드 인근 100,000㎡ 등

❍「블루종합안전테마파크」건립계획 도지사 방침결재 : 2019. 10. 2.

- 장흥군 부지 무상제공 계획 및 최적지 의견 포함

❍ 소방체험관 건립계획(장흥군 소재) 소방청 제출    : 2019. 12. 23.

- 전남(장흥군) 설치의 필요성, 설치 및 운영계획, 기대효과 등

□ 추진계획

❍ 전남도(장흥군) 선정을 위한 관계부처(소방청) 방문 : 2020. 2월

❍ 수요결정(행정안전부)                           : 2020. 4 ~ 5월

❍ 대상부지 검토 및 매입절차 진행               : 2020. 6월

❍ 소방안전교부세 확정 및 건립 시․도 선정        : 2020. 9 ~ 10월

□ 기대효과

❍ 소방 및 안전에 대한 인적․물적 인프라 구축 중심도시 위상 정립

❍ 정주 및 유동인구 증가로 지역경제 활성화 도모

------------------------------------------------------------------------------------------------

전남도 : 대응예방과장 최형호, 예방안전팀장 박하석, 담당자 박근영(061-286-0833)

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 사회재난팀장 오병일, 담당자 김효석(061-860-6182)

블루이코노미과제

도시부 제한속도 낮추기(5030) 사업

사업기간 : 2019. 1월 ~ 6월(6개월)

위    치 : 장흥읍 등 보행자 및 차량 이동이 많은 지역

사 업 비 : 180백만원(도비 72, 군비 108)

□ 필 요 성

❍ 도시지역(주거지역, 상업지역, 공업지역) 주․간선 도로 속도를 낮추어 교통사고 가능성과 심각도를 줄여 어린이, 노인 등 보행약자 보호

- 일반도로 50km/h, 이면도로 30km/h 속도제한(’19. 4. 법개정, ’21. 4. 시행)

❍ 교통안전 체계를 ‘차량’ 중심에서 ‘보행자’중심으로 전환

- 차량과 보행자 출돌 사망률 : 60km/h시 90% → 50km/h시 50% → 30km/h시 10%

□ 추진일정

❍ 관계기관 협의를 통한 속도제한 구역 설정 : 2020. 1월 ~ 2월

❍ 행정협의 및 주민의견 수렴               : 2020. 3월 ~ 4월

❍ 교통안전시설 심의                       : 2020. 5월

❍ 속도하향 시설개선                       : 2020. 6월

- 속도표지판 정비, 속도저감 및 보행자 안전시설, 신호운영개선 등

□ 기대효과

❍ 어르신, 어린이 등 취약계층에 대한 교통안전서비스 향상

------------------------------------------------------------------------------------------------

전남도 : 안전정책과장 박종필, 안전감찰팀장 진종석, 담당자 강원구(061-286-3224)

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 안전정책팀장 이경호, 담당자 주명현(061-860-6174)

블루이코노미과제

지방하천 제방도로 안전시설 확충사업

사업기간 : 2020. 1월 ~ 12월

위    치 : 관내 지방하천 45개소(부동천 외 44개소)

사 업 비 : 50백만원(도비 25, 군비 25)

사 업 량 : 안전시설 설치 L=1.0km

□ 필 요 성

❍ 안전한 하천 제방도로 환경 조성으로 군민의 생명과 재산보호

❍ 쾌적한 친수공간 조성으로 가족친화 공간확보 및 군민의 삶의 질 향상

□ 추진계획

❍ 지방하천 사업대상지 현황 조사 : 2019. 12월 ~ 2020. 1월

- 전남도 시범사업지구로 선정될 수 있도록 사전준비 철저

❍ 실시설계용역 착수 및 완료     : 2020. 2월

❍ 공사 착공 및 준공             : 2020. 3월 ~ 7월

※ 전남도 행복시책 사업과 연계 추진

□ 기대효과

❍ 군민 이용빈도가 높은 지방하천 제방도로에 안전시설을 확충하여 보행자, 차량 농기계 사고 등 예방

------------------------------------------------------------------------------------------------

전남도 : 자연재난과장 정종태, 하천시설팀장 김영우, 담당자 유홍재(061-286-3071)

장흥군 : 재난안전과장 이영철, 자연재난팀장 김군창, 담당자 김정식(061-860-6193)

일반(계속)사업

	군민 안전보험 가입	【안전정책팀】

1

▪ 예기치 못한 각종 사고와 재난으로부터 주민 안전보장 강화

▪ 재난피해 주민에 대한 실효성 있는 생활 안전회복지원 시스템 구축

□ 추진계획

❍ 가입대상 : 우리군내 주민등록을 둔 모든 군민(등록외국인 포함)

❍ 보장기간 : 가입일로부터 1년(매년 갱신)

❍ 사 업 비 : 22백만원(도비 7, 군비 15)

❍ 보장내역 : 11개 항목(국내 사고발생 시 개별가입 상해보험과 중복보장)

□ 기대효과

❍ 예기치 못한 재난으로부터 주민의 경제적 생활안정 도모

	안전문화운동 추진	【안전정책팀】

2

▪ 2019년 지역안전지수 중 교통사고 4등급 및 범죄 5등급으로 안전의식

향상을 위해 지속적인 캠페인과 홍보활동 전개 필요

□ 사업계획

❍ 안전문화운동 캠페인 및 홍보물 구입 : 48백만원

❍ 안전문화운동 군내버스 외부광고     : 4백만원

❍ 남도안전학당 및 안전보안관 운영    : 13백만원

□ 기대효과

❍ 안전사고 감소, 주민 안전의식 함양 및 안전문화 확산 분위기 조성 등

	교통사고 사망자 절반줄이기 추진	【안전정책팀】

3

□ 사업계획

❍ 고령운전자 운전면허 반납       : 40명 / 4백만원

❍ 도시부 제한속도 낮추기         : 180백만원

❍ 과속운전 단속카메라 설치       : 3개소 / 120백만원

❍ 전방신호등 설치                : 1개소 / 40백만원

❍ 바닥형 보행신호등 설치         : 2개소 / 60백만원

❍ 보행자 안전구역 설치           : 3개소 / 16백만원

❍ 어린이보호구역 노란신호등 설치 : 10개소 / 20백만원

□ 기대효과

❍ 교통안전문화운동과 교통안전시설 개선․보강을 통해 안전한 교통문화정착과 안전한 교통환경 조성

	주민안전 활동단체 지원	【안전정책팀】

4

▪ 자율방범대 현황 : 16대 / 416명(남 11대, 여 5대)

▪ 의용소방대 현황 : 22대 / 540명(일반대 20, 지역대 1, 전문의소대 1)

□ 사업계획

❍ 자율방범대 야식비 및 유류비              : 53백만원

❍ 자율방범대 동절기 활동복 구입            : 50백만원

❍ 자율방범대 한마음 전진대회 및 워크숍     : 8백만원

❍ 의용소방대 기술경연대회 및 재해 출동수당 : 64백만원

□ 기대효과

❍ 의용소방대원과 자율방범대원의 사기양양과 조직의 역량강화

❍ 선진 프로그램 벤치마킹을 통한 민간자율참여단체 지역안전 파수꾼 역할 기대

	의용소방대 사무실 확보 지원	【안전정책팀】

5

▪ 사무실 확보현황

총	보 유	미보유	확보대상
22개소	19개소	3개소	관산, 용산, 회진

□ 사업계획

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2024년(5개년) / 전남소방본부(강진소방서)

❍ 사 업 량 : 3개소(2020년 : 용산, 회진 / 2022년 : 관산)

❍ 사 업 비 : 180백만원(도비) / 개소당 60백만원

❍ 건축규모 : 경량철골조 1충 59.4㎡

□ 지원사항

❍ 의용소방대 사무실 건립 부지 군유지 및 공공용지(회진항) 무상제공

	민방위 편성 운영 및 비상대비태세 확립	【안전정책팀】

6

▪ 민방위 편성현황 : 56개대, 1,578명

▪ 민방위 시설장비 : 비상급수시설(3개소), 비상경보시설(3개소), 대피소(34개소)

▪ 비상대비 업무 : 을지연습, 통합방위지원본부 운영, 예비군 육성지원

□ 사업계획

❍ 민방위 교육․훈련 : 기본․보충․사이버교육, 비상소집

❍ 민방위 경보시설 관리 : 3개소(군청, 관산, 대덕) / 13백만원

❍ 민방위 비상급수시설 관리 : 3개소(장흥, 관산, 대덕) / 분기별 수질검사

❍ 주민대피시설 정비 및 화생방방독면 보급 : 14백만원

□ 기대효과

❍ 민방위 비상 준비태세를 갖추어 재난상황에 신속히 대처

	재난 사전예방을 위한 안전대책 추진	【사회재난팀】

7

□ 사업계획

❍ 재난안전 관리계획 수립 및 현장조치 매뉴얼 정비

- 안전관리계획 수립(2월중) : 유형별(자연 9, 사회 15) 계획수립

- 재난 현장조치 매뉴얼 정비(연중) : 26개 재난매뉴얼(실과소별)

❍ 시설물 안전점검 및 저소득층 재난 예방대책 추진

- 국가안전대진단 : 2 ~ 4월(2개월 간) / 점검대상 230여 개소

- 시특법대상 시설물 정기점검 : 반기 1회 / 43개소(1종 2, 2종 41)

- 저소득층 전기 안전점검 : 4월 / 150가구(안전점검 및 소모품 교체)

- 기타 위험시설 점검 : 수시 / 50개소(놀이시설, 민간건축물, 요양원 등)

❍ 2020년 재난대응 안전한국훈련(유관기관·단체 합동 실제훈련)

- 2020. 10월(5일간) / 대형재난 대응 실제훈련 / 12개 기관단체 합동

□ 기대효과

❍ 재난사전 대비를 통한 군민의 생활안전 안전위험 요인 사전 해소

	국가안전대진단 위험시설물 점검용역	【사회재난팀】

8

□ 추진실적 및 계획

❍ 2019년 추진실적

- 대  상 : 216개소(도로, 교량, 터널, 문화재, 공동주택 등)

- 결  과 : 27개소(보수․보강 대상시설 결정) / 조치완료 10개소

❍ 2020년 추진계획

- 기  간 : 2020. 2 ~ 4월(3개월 간) / 점검대상 230여 개소

- 점검반 : 소방, 전기, 가스, 전문가 및 공무원 합동점검

- 내  용 : 재난 취약 시설물 합동 안전점검 및 위험시설 보수․보강

□ 기대효과

❍ 국가안전 대진단을 통해 안전위험 요인 사전 파악해소

❍ 민간 전문가, 안전 단체 및 군민 참여를 통한 안전문화 정착에 기여

	용강․반월천 자연재해위험개선지구 정비사업	【자연재난팀】

9

▪ 대    상 : 2개소(지방하천 2) / 2018. 1월 ~ 2021. 12월

▪ 사 업 비 : 15,412백만원(국비 8,231, 군비 8,231)

※ ‘20년 9,242백만원(국비 4,621, 군비 4,621)

□ 추진실적

【용강천 자연재해위험개선지구 정비사업】

⇒ 9,870백만원 / L= 0.83km / 공정률 10%

【반월천 자연재해위험개선지구 정비사업】

⇒ 5,542백만원 / L=0.64km / 실시설계중(2020. 2월 준공 예정)

사 업 명	사업량 (L=km)	사업비(군비/백만원)				주요사업 내 용	비 고
		계	기추진	‘20년	향후
계	L=1.47	15,412 (7,706)	5,068 (2,534)	9,242 (4,621)	1,102 (551)	-	-
용강천 자연재해위험 개선지구 정비사업	L=0.83	9,870 (4,935)	4,768 (2,384)	4,000 (2,000)	1,102 (551)	교량 3개소 및 하천정비 펌프장 설치	2021.12. 준공예정
반월천 자연재해위험 개선지구 정비사업	L=0.64	5,542 (2,771)	300 (150)	5,242 (2,621)		교량 5개소 및 하천정비	2021.12. 준공예정

□ 추진계획

❍ 반월천 자연재해위험개선지구 정비사업 사업발주(총괄 및 1차분) : 2020. 2월

❍ 용강천 자연재해위험개선지구 정비사업 준공(1차분)     : 2020. 12월

	어곡․거동 소하천 정비사업	【자연재난팀】

10

▪ 대    상 : 2개소(장평 어곡, 부산 거동)

▪ 사 업 비 : 2,840백만원(균특이양 1,420, 군비 1,420)

※ ‘20년 640백만원(균특이양 320, 군비 320)

□ 추진실적

【장평면 어곡소하천 정비사업】/ 공정률 20%

❍ 실시설계용역 착수                    : 2018. 3월

❍ 사전설계검토 및 계약심사             : 2019. 2월

❍ 총괄 발주                            : 2019. 4월

❍ 토지보상 20필지 완료(43백만원 / 74%)  : 2019. 11월

【부산면 거동소하천 정비사업】

❍ 실시설계용역 착수                    : 2019. 3월

❍ 사전설계검토 및 계약심사 사전협의    : 2019. 12월 ~ 2020. 1월

사 업 명	사업량 (L=km)	사업비(군비/백만원)				주요사업 내 용	비 고
		계	기추진	‘20년	향후
계	L=1.36	2,840 (1,420)	2,200 (1,100)	640 (320)	-	-	-
장평면 어곡소하천 정비사업	L=0.76	2,130 (1,065)	1,828 (914)	302 (151)	-	교량 2개소 및 하천정비	2020. 12. 준공예정
부산면 거동소하천 정비사업	L=0.6	710 (355)	372 (186)	338 (169)	-	교량 3개소 및 하천정비	2021. 12. 준공예정

□ 추진계획

❍ 부산면 거동소하천 정비사업 발주(총괄 및 1차분) : 2020. 2월

❍ 장평면 어곡소하천 정비사업 준공(총괄)          : 2020. 12월

	국가하천 유지관리사업(국비, 군비)	【자연재난팀】

11

▪ 쾌적한 친수공간 조성으로 가족친화 공간확보 및 군민의 삶의 질 향상

▪ 적기 하천시설물 보수로 관광객들에게 깨끗한 탐진강 이미지 제공

□ 추진계획

구분	사 업 내 용	사업비(백만원)	비 고
계	8개사업	1,200
국비	산책로 유지보수(황토포장)	200
	잡목제거 및 풀베기 A=300,000㎡	100	인건비
	석대보 고수부지 시설물 정비	200
군비	제방 보수(정남진산업고~부산교) L=2.3km	250
	탐진강 다목적광장 보수 A=7,800㎡	30	아스콘포장
	탐진강 석대보 고무보 설치	100
	탐진강 진입도로 확장	270
	탐진강 시설물 유지보수	50

❍ 국가하천 유지보수사업 실시설계 용역 발주 : 2020.  1월

❍ 실시설계 준공 및 공사 시행               : 2020.  3월 ~ 7월

❍ 시설물 유지보수                          : 연중추진

	지방하천․소하천 유지보수	【자연재난팀】

12

□ 추진계획

❍ 하천유지보수(지방하천, 소하천) : 100백만원

❍ 소하천 정비사업               : 270백만원

❍ 하천 퇴적토 준설              : 58백만원

❍ 하천 잡목제거                 : 50백만원

❍ 하천개수사업(미불용지) 보상    : 20백만원

□ 기대효과

❍ 시설물 정비 및 통수단면 확보를 통해 사전 재해 및 안전사고 예방

	교통안전시설물 확충 및 관리	【교통행정팀】

13

▪ 교통안전시설물 현황

- 승강장 및 표지판 : 422개소(승강장 290, 표지판 132)

- 교통안전 시설물 : 177개소 (신호등 56, 경보등 75, 경광등 46)

□ 추진계획

❍ 농어촌버스 승강장 신설 및 교체, 보수 : 115백만원(도비 50, 군비 65)

- 신설 및 교체 11개소 100백만원 / 보수 5개소 15백만원

❍ 농어촌버스 표지판 교체 및 보수       : 16백만원

- 교체 10개소 8백만원 / 보수 10개소 8백만원

❍ 교통안전시설물 유지보수              : 248백만원

- 교통신호기 설치, 제어기 및 지주교체, 과속감시장치 설치, 시설물 보수

❍ 사고 위험 횡단보도 안전시설 설치     : 30백만원

- 야간 보행자 교통사고 예방시설(투광등, 경광등, 신호체계 등) : 6개소

	장흥읍 소규모 공영주차장 조성	【교통행정팀】

14

▪ 시가지 교통난 해결을 위해 토지매입이 가능한 주요 교통혼잡지역

부지를 우선 매입하여 지속적인 공영주차장 조성

□ 추진계획

❍ 위    치 : 장흥읍 행정복지센터 뒤편 등 4개소

❍ 사 업 량 : 4,101㎡(1,241평) / 주차대수 120대

❍ 사 업 비 : 1,160백만원

※ 제1회 추경 시 미확보 예산 반영 : 900백만원

□ 추진일정

❍ 대상지 매입협의                  : 2020. 2월 ~ 3월

❍ 추가 예산 확보                   : 2020. 3월

❍ 실시설계 및 주차장 조성          : 2020. 4월 ~ 10월

	농어촌버스 소외지역 100원택시 운영	【교통행정팀】

15

□ 추진계획

❍ 운행대상 : 8개읍면 / 30개마을

- 버스가 운행되지 않는 마을로 마을회관에서 승강장까지 거리가 300m 이상인 마을

❍ 사 업 비 : 160백만원(균특 50, 도비 15, 군비 95)

❍ 추진내용 : 택시이용권 마을인구수 기준으로 배부

- 마을운영위원회 중심으로 주민과 협의 운영 / 이용률 극대화

□ 기대효과

❍ 주민 밀착․맞춤형 교통행정 서비스 제공으로 최소 이동권 보장

	운수업계 경영안정 지원	【교통행정팀】

16

▪ 운수업체 차량보유 현황

- 운영차량 : 407대(농어촌버스 23, 택시 84, 화물 300)

□ 추진계획

❍ 농어촌버스 벽지노선 손실보상금 : 500백만원(군비)

❍ 운수업체 유가보조금           : 1,000백만원

❍ 농어촌버스 재정지원금          : 1,000백만원(도비 166, 군비 834)

- 적자노선 손실지원, 시설개선자금, 비수익노선 손실보상 등

	교통약자 이동지원센터 운영 지원	【교통행정팀】

17

	운 영 현 황
운행차량 : 5대(스타렉스 1, 카니발 4) / 2020년 1대 추가 구입 운영방법 : 위탁 수행 수탁기관 : 사)지체장애인협회 전라남도지부 장흥군지회 수탁기간 : 2019. 4. 16. ~ 2024. 4. 15.(5년간)

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월(연중)

❍ 사 업 비 : 363백만원(도비 18, 군비 345)

❍ 이용대상 : 1,750명(장애의 정도가 심한 장애인 1,500, 대중교통 이용이

어려운 65세이상 노인 200, 기타 50)

※ 근 거 : 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 제5조(장애의 정도가

심한 장애인 150명당 1대)

	농어촌버스 단일요금제(1000원 버스) 운영	【교통행정팀】

18

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월(연중)

❍ 사업대상 : 농어촌버스 전 노선 / 장흥교통과 상호협약

❍ 사 업 량 : 78개 노선, 463km

❍ 사 업 비 : 450백만원(군비)

❍ 사업내용 : 거리요금제를 단일요금제로 변경함으로써 발생하는

손실보상금 지원

	군민 안전지킴이 CCTV 설치	【통합관제팀】

19

▪ CCTV현황 : 254개소 655대

- 방범 등 178개소 474대, 차량번호인식 61개소 62대, 초등학교 15개소 119대

□ 추진실적

❍ 관제요원 실시간 관제대응 처리 : 청소년 비행 등 81건

❍ CCTV 영상정보 제공 : 절도 등 980건(해결 967건) / 범인 검거율 99%

❍ 우수사례(표창장 수상) : 9명 (전남지방경찰청장상 1, 장흥경찰서장상 8)

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 6월

❍ 사 업 비 : 200백만원

❍ 사 업 량 : 17개소, 40대 / ※ 설치장소선정 : 장흥경찰서와 협의선정