정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 1〕

①사업부서	기업지원과	②담당자 (연락처)		기업지원과장 김선재 기업지원담당 김승태 지방시설7급 김선범 (860 - 0788)
③정책사업명	장흥바이오식품산업단지 조성
④선정기준	군정 주요정책사업		⑤사업기간		2009 ~ 2014
⑥주요내용	○ 추진배경 - 장흥의 지역산업 기반구축 및 고용창출, 지역경제 활성화 등 지역균형발전 도모 ○ 사업개요 - 사 업 량 : 2,914천㎡(산업용지 1,216, 공공용지 등 1,698) - 사 업 비 : 2,178억원(국비 713, 전남개발공사 1,465) - 유치업종 : 음․식료품, 화학물질 및 화학제품, 금속가공제품 등 - 분양대상 : 산업용지 1,216천㎡(37만평) / 1단계 406, 2단계 810 - 분양가격 : 3.3㎡당 328천원 ○ 주요 추진상황 - ‘12. 5월 : 1단계 406천㎡ 산업용지 조성 완료 - ‘14. 6월 현재 : 2단계 810천㎡ 산업용지 조성중(공정률 94%) - 분양실적 : 다솔 등 11개업체 169,935㎡ / 전체 14%, 1단계 42% ○ 추진계획 - ‘14. 8월 : 개발계획 변경 / 전남개발공사 ⇒ 유치업종 변경, 묘덕사 제척, 족구장 조성 등 - ‘14. 12월 : 2단계 810천㎡ 단지 준공 - ‘15. 1월 : 확정측량 및 공부정리, 시설물 인계인수

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 2〕

①사업부서	기업지원과	②담당자 (연락처)		기업지원과장 김선재 기업지원담당 김승태 지방시설7급 김선범 (860 - 0788)
③정책사업명	장흥바이오식품산업단지 폐수종말처리시설 설치사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2011 ~ 2013
⑥주요내용	○ 추진배경 - 산단 내 오·폐수 공동처리, 입주업체 폐수처리비용 절감 및 분양활성화 ○ 추진기간 : 2011.4.15. ~ 2013.12.30. ○ 총사업비 : 12,584백만원 - 시설용량 : 2,000㎥/일 ○ 주요내용 - 지하기계시설, 관리동, 처리동, 조경시설 등 설치 - 종합시운전 및 수질 TMS기 설치

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 3〕

①사업부서	기업지원과	②담당자 (연락처)		기업지원과장 김선재 기업지원담당 김승태 지방시설7급 김선범 (860 - 0788)
③정책사업명	장흥농공단지 조성사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2011 ~ 2013
⑥주요내용	○ 추진배경 - 농공단지를 조성후 기업유치를 통해 농가소득 증대와 농촌지역경제 활성화 도모 ○ 추진기간 : 2011.7.18. ~ 2013.1.9. ○ 총사업비 : 11,624백만원 - 단지조성 15블럭 149,891㎡ ○ 주요내용 - 단지조성(공장용지 97,963㎡, 공공용지 29,832㎡, 녹지용지 22,096㎡) - 관리사무소, 상수도 물탱크 등

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 4〕

①사업부서	기업지원과	②담당자 (연락처)		기업지원과장 김선재 기업지원담당 김승태 지방시설7급 김선범 (860 - 0788)
③정책사업명	장흥농공단지 폐수종말처리시설 설치공사
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2012 ~ 2015
⑥주요내용	○ 추진배경 - 장흥농공단지 발생 폐수의 적정 처리로 입주여건 개선 및 공공수역 수질 오염 방지 ○ 사업개요 - 위 치 : 장흥군 부산면 금자리 1164-3 - 시설용량 : 600㎥/일 (1단계 300, 2단계 300) - 사 업 비 : 6,911백만원(1단계 4,811, 2단계 2,100) / 국비 100% ○ 주요 추진상황 - ‘12. 11월 : 기본 및 실시설계 용역 착수 / 205백만원 - ‘13. 9월 : 국비 6,911백만원 확보 - ‘13. 10월 : 기본 및 실시설계용역 완료 - ‘13. 11월 ∙ 처리공법 기술사용 협약(군, 농어촌공사, 코오롱환경서비스) ∙ 세부사업 협약(군, 한국농어촌공사 장흥지사) - ‘13. 12월 : 1단계 300㎥/일 착공(한국농어촌공사 장흥지사) - ‘14. 6월 : 토목공사 추진 중(공정률 20%) ○ 추진계획 - 시설 설치 사업 지도 감독 및 관리

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-5〕

①사업부서	기업지원과	②담당자 (연락처)		기업지원과장 김선재 기업지원담당 김승태 지방전기운영8급 김규표 (860 - 0353)
③정책사업명	장평 제2농공단지 조성사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2012 ~ 2014년
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 쾌적한 농공단지 조성으로 농촌지역 균형발전 및 농외 소득원 개발을 통한 농가소득 증대 도모 ○ 중소기업체에 쾌적하고 저렴한 공장용지 제공으로 도농 지역균형발전을 통한 지역경제 활성화 기여 □ 사업개요 ○ 위 치 : 장평면 봉림1길 일원 / 2012 ~ 2014(3년) ○ 면 적 : 47천㎡(기존 102천㎡ → 149천㎡) - 4,015백만원(광특 995, 도비 80, 군비 2,940) ○ 유치업종 : 비금속광물제품, 전기장비, 기타운송장비 제조업 □ 추진실적 ○ 2012년 신규조성 농공단지 타당성 조사 : ’11. 4. 28. ⇒ 농림수산식품부 / 적합판정(2012년 사업확정) ○ 기본계획 및 실시설계용역 : ’11. 6 ~ ‘12. 9월 ○ 산업(농공)단지계획 심의위원회 심의 : ’12. 6. 27. ○ 농공단지 지정고시 : ’12. 8. 29. ○ 토지 및 지장물 보상(등기이전) : ’12. 8 ~ 12월 ○ 문화재 시굴조사 용역 : ’12. 10 ~ 12월 ○ 문화재 정밀발굴조사 용역 : ’13. 2 ~ 5월 ○ 공사 착공 : ’13. 4. 25. ⇒ 현 공정율 : 89% / 우수공 관로매설 중 □ 향후 추진계획 ○ 관리기본계획 승인 및 산업용지 분양공고 : ’14. 7월 ○ 농공단지 완공 및 분양 : ’14. 8월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-6〕

①사업부서	기업지원과	②담당자 (연락처)		기업지원과장 김선재 통합의료산업담당 박옥란 지방시설7급 김근영(860 - 0387)
③정책사업명	통합의학센터 건립
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2012~2015
⑥주요내용	□ 사업목적 ○ 양․한방, 검증된 보완대체요법 등을 수평적으로 융합한 환자중심의 One-stop의료시설 건립으로 치료율 향상과 국민 의료비 절감 기여 ○ 통합의료서비스 제공과 더불어 통합의학 관련 연구, 임상적 효과검증 등을 통한 정책수립 기초자료 지원 및 통합의료산업 핵심적 역할수행 ○ 국내 최초 지역기반 통합의료 체계 및 통합의료 클러스터 구축을 통한 통합의료 특화인력 양성, 의료관광산업 활성화 도모 □ 사업개요 ○ 위 치 : 장흥군 안양면 로하스타운 內 ○ 사 업 량 : 건축연면적 11,480㎡(지하1층, 지상2층) ○ 내 용 : 통합의학 연구, 교육, 임상적용을 위한 인프라구축 ○ 사 업 비 : 24,594백만원(국 17,356, 도3,619 군 3,619) □ 주요추진사항 ○ 2011. 7월 : 지방재정투융자사업 전라남도 심사 승인 ○ 2012. 1. 4. : 센터 건립사업 확정(10억원) ○ 2012. 3. 6. : 통합의료센터 건립․운영을 위한 업무 협약 체결 - 장흥군, 전남도, 연세대 세브란스병원 간 ○ 2012. 4. 9 ~ 11. 14. : 기본계획수립 용역 추진 ○ 2013. 1 ~ 7월 : 통합의료센터 관련 총사업비 조정 - 공사비16,876/설계비840/감리비1,153/장비비5,217/부대비40/기본계획468 ○ 2013. 7. 25 ~ 7. 30 : 기본 및 실시설계용역 계약심사 (전남도) ○ 2013. 10. 04 : 기본 및 실시설계용역 착수 / 간삼건축사 □ 추진계획 ○ 2014. 6월 : 기본설계 협의에 따른 총사업비 조정(기획재정부) ○ 2014. 6월 : 각종 심의 및 인허가 추진 ○ 2014. 7일 : 실시설계 가격검토(조달청) ○ 2014. 7월 : 실시설계 결과 협의(기획재정부) ○ 2014. 10월 까지 : 운영병원 선정 / 제안서에 의한 공모 추진 ○ 2014. 9월 ~ 2015. 12월 : 공사 착수 및 준공 ○ 2015. 6월 ~ 12월 : 의료장비 및 기자재 구매, 개원준비 등

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 7〕

①사업부서	기업지원과	②담당자 (연락처)		기업지원과장 김선재 통합의료산업담당 박옥란 지방행정7급 김봉열 (860 - 0387)
③정책사업명	2013 대한민국통합의학박람회
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		’13. 3. 1∼ 12. 31
⑥주요내용	◦추진배경 - 생약초․한방특구로의 지정으로 생약초․한방산업을 활발 하게 추진하고 지역의 균형발전과 낙후되어 있는 지역 경제 활성화를 위하여 박람회 추진 - 관내에 도 연구기관인 「천연자원연구원」과 「한방산업 진흥원」이 설립 되면서 각종 기능성 물질과 신약 개발 상품화가 예상됨에 이를 더욱 활성화하기 위해 박람회 추진 ◦행사기간 : 2013. 10. 25(금) ∼ 10. 31(목) / 7일간 ◦장 소 : 장흥군 관산읍 천관산 일원 ◦슬 로 건 : 몸과 마음의 치유, 통합의학 ◦주체/주관 : 전라남도 / 장흥군, 통합의학박람회추진위원회 ◦행사내용 : 12개 주제관, 14개 행사 운영 - 주제관 : 통합의학정보관, 통합의학관, 협회단체관 건강증진관, 의료산업관, 편백치유관, 자연휴양관 재활승마관, 치유체험관, 힐링사진전 등 - 행 사 : 개막식, 심포지엄, 건강콘서트, 청소년힐링페스 티벌, 어린이 건강줄넘기, 국화페스티벌 등 ◦사 업 비 : 1,300백만원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 8〕

①사업부서	기업지원과	②담당자 (연락처)		기업지원과장 김선재 통합의료산업담당 박옥란 지방행정7급 김봉열 (860 - 0387)
③정책사업명	2014 대한민국통합의학박람회
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		’14. 3. 1 ∼ 12. 31
⑥주요내용	◦ 추진배경 - 생약초․한방특구로의 지정으로 생약초․한방산업을 활발 하게 추진하고 지역의 균형발전과 낙후되어 있는 지역 경제 활성화를 위하여 박람회 추진 - 관내에 도 연구기관인 「천연자원연구원」과 「한방산업 진흥원」이 설립 되면서 각종 기능성 물질과 신약 개발 상품화가 예상됨에 이를 더욱 활성화하기 위해 박람회 추진 ◦행사기간 : 2014. 10. 22(수) ∼ 10. 28(화) / 7일간 ◦장 소 : 장흥군 관산읍 천관산 일원 ◦슬 로 건 : 건강을 위한 아름다운동행! 통합의학 ◦주체/주관 : 전라남도 / 장흥군, 통합의학박람회추진위원회 ◦행사내용 - 주제관 : 통합의학정보관, 통합의학관, 협회단체관 건강체험관, 의료산업관, 자연치유관, 약선요리관 학술관, 재활승마장, 특산물전시판매장, 국화축제장 등 - 행 사 : 개막식, 심포지엄, 건강콘서트, 국화페스티벌 등 ◦사 업 비 : 1,400백만원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 9〕

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)		문화관광과장 방해권 관광진흥담당 안병진 지방통신7급 박일표 (860 - 0380)
③정책사업명	제6회 정남진 장흥 물축제
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013. 2. 1 ~ 9. 30
⑥주요내용	◦ 추진배경 - 득량만의 해수, 탐진강의 하천수, 장흥댐의 호수 등 3대수자원과 편백숲 우드랜드의 특화자원을 대표축제로 개발하여 지역 이미지 브랜드 제고 및 지역경제 활성화에 기여 ◦ 추진계획 - 축제기간 : 2013. 7. 27 ~ 8. 1(7일간) - 장 소 : 탐진강 및 편백숲 우드랜드 일원 - 주 제 : 물과 숲 - 休 - 주최․주관 : 장흥군 / 물축제 추진위원회 - 소요예산 : 1,400백만원 - 내 용 : 수상체험프로그램 운영 및 전시․체험 주제관 운영 등 ◦ 추진상황 - 물축제 발전방안 평가보고회 개최 : 2월 - 물축제 기본계획 수립 및 추진위원회 구성 : 3월 - 물축제 아이디어 공모․평가 : 3월 - 물축제 행사 대행사 선정 및 계약(문화공방DKB) : 4월 - 물축제장 기반시설물 설치 계획 수립 : 5월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 10〕

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)		문화관광과장 방해권 관광진흥담당 안병진 지방통신7급 박일표 (860 - 0380)
③정책사업명	제7회 정남진 장흥 물축제
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2014. 2. 1 ~ 9. 30
⑥주요내용	◦추진배경 - 득량만의 해수, 탐진강의 하천수, 장흥댐의 호수 등 3대수자원과 편백숲 우드랜드의 특화자원을 대표축제로 개발하여 지역 이미지 브랜드 제고 및 지역경제 활성화에 기여 ◦추진계획 - 축제기간 : 2014. 8. 1 ~ 8. 7(7일간) - 장 소 : 탐진강 및 편백숲 우드랜드 일원 - 주 제 : 물과 숲 - 休 - 주최․주관 : 장흥군 / 물축제 추진위원회 - 소요예산 : 1,400백만원 - 내 용 : 수상체험프로그램 운영 및 전시․체험 주제관 운영 등 ◦추진상황 - 물축제 발전방안 평가보고회 개최 : 2월 - 물축제 기본계획 수립 및 추진위원회 구성 : 3월 - 물축제 아이디어 공모․평가 : 3월 - 물축제 행사 대행사 선정 및 계약(문화공방DKB) : 4월 - 물축제장 기반시설물 설치 계획 수립 : 5월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 11〕

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)		문화관광과장 방해권 문화예술담당 김백수 지방시설6급 최용산 (860 - 0280)
③정책사업명	장흥 석대들 전적 성역화사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2012. 06. 18 2014. 10. 20
⑥주요내용	○ 목 적 : 동학운동의 사상과 정신을 기리고 체험할 수 있는 산교육장으로 활용코자 함. ○ 기 간 : 2012 ～ 2014(3년간) ○ 장 소 : 장흥읍 남외리 165번지 일원(28,711㎡) ○ 총사업비 : 133.6억원(광특 80.2 / 군비 53.4) ○ 사업내용 : 홍보영상관, 상징조형물, 조경 및 편의시설

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 12〕

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)		문화관광과장 방해권 문화예술담당 김백수 지방행정8급 장모창 (860 - 0228)
③정책사업명	국가지정 문화재 보수사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013. 01 ～ 2013. 12
⑥주요내용	○ 목 적 : 선재적 문화재 보수를 통한 전통문화유산 보존 전승. ○ 기 간 : 2013. 1 ～ 2013. 12 ○ 장 소 : 장흥군 일원 ○ 총사업비 : 13억원(국비 9.1 / 도비 1.17 /군비 2.73) ○ 사업내용 : 보림사 남북삼층석탑 및 석등 주변정비사업외 12건

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 13〕

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)		문화관광과장 방해권 스포츠산업담당 이인흠 (860 - 0254)
③정책사업명	전남체전 경기장 등 시설 확충
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013. 1. 14 2013. 9. 30
⑥주요내용	○ 제52회 전라남도 체육대회 개최 체육시설 확충 - 대회기간 : 2013. 5. 7 ～ 5. 10 (4일간) - 사 업 비 : 2,275백만원 (군비) - 주요 체육시설 정비내역 ․ 장흥 실내체육관 보수공사 ․ 장흥 공설운동장 주변 정비공사 ․ 장흥 용기구장 주변 정비사업 ․ 체육대회 관련 각종 경기시설 보수

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-14〕

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)		문화관광과장 방해권 스포츠산업담당 이인흠 (860 - 0254)
③정책사업명	전남체전 경기장 등 지방체육시설 확충
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013. 1. 16 2013. 5. 30
⑥주요내용	○ 제52회 전라남도 체육대회 개최 지방체육시설 확충 - 대회기간 : 2013. 5. 7 ～ 5. 10 (4일간) - 사 업 비 : 1,200백만원 (도비 850, 군비 350) - 주요 체육시설 정비 내역 ․ 정남진리조트 축구 전용구장 보수공사 ․ 공설운동장 앞 공유지(주차장) 조성사업 ․ 장흥 군민족구장 주변 정비공사 ․ 읍면 게이트볼장 개보수 사업

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-15〕

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)		문화관광과장 방해권 스포츠산업담당 이인흠 (860 - 0254)
③정책사업명	공공체육시설 확충
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013. 1. 4 2013. 6. 24
⑥주요내용	○ 2013 광특 공공체육시설 확충사업 - 기 간 : 2013. 1. 4 ～ 6. 24 - 사업비 : 1,000백만원 (도비 300, 군비 700) - 주요 체육시설 정비 내역 ․ 장흥공설운동장 앞 공유지(주차장) 조성사업 ․ 장흥 군민정구장 조성사업

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-16〕

①사업부서	문화관광과	②담당자 (연락처)		문화관광과장 방해권 문화예술담당 김백수 지방행정8급 장모창 (860 - 0228)
③정책사업명	국가지정 문화재 보수사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2014. 01 ～ 2014. 12
⑥주요내용	○ 목 적 : 선재적 문화재 보수를 통한 전통문화유산 보존 전승. ○ 기 간 : 2014. 1 ～ 2014. 12 ○ 장 소 : 장흥군 일원 ○ 총사업비 : 11억원(국비 7 / 도비 0.9 /군비 2.1) ○ 사업내용 : 보림사 남북삼층석탑 및 석등 주변정비사업외 5건

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-17〕

①사업부서	환경산림과	② 담당자 (연락처)		환경산림과장 백형갑 우드랜드담당 김병수 지방녹지7급 곽광호 (860 - 0422)
③정책사업명	목재전문산업화단지조성사업
④선정기준	군정주요 정책사업		⑤사업기간		2014 ~ 2016
⑥주요내용	○ 사업목적 : 국내 목재의 연구개발, 세계수준의 목제품개발, 판로지원, 창업보육, 등 산업화 추진 ○ 추진배경 : 기존 편백숲 우드랜드, 목공예공방, 전통생활 가구단지와 연계하여 목재산업 직접화 ○ 사업내용 - 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 우산리 8번지 - 규 모 : 부지 9,080㎡, 연면적 2,873㎡ - 사 업 비 : 230억원(국비 115, 지방비 115) - 주요사업 : 목재산업지원센터 2동, 장비 구축, R&D 등 ○ 추진현황 - 국가 재정계획 반영 및 국비 확보 : 2013. 5월 - 기본 및 실시설계 용역 : 2013. 11월 ~ 2014. 5월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-18〕

①사업부서	환경산림과	②담당자 (연락처)		환경산림과장 백형갑 그린환경센터장 유용수 지방환경 7급 백용전 (860 - 0665)
③정책사업명	그린파크 조성사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2011 ~ 2016
⑥주요내용	○ 사업목적 : 환경기초시설 주변 생태공원 조성을 통한 이미지 개선 및 환경교육장 마련 ○ 추진배경 : 폐기물처리시설 등 환경기초시설이 밀집된 지역으로 주민 소외감 해소 ○ 사업내용 - 위 치 : 전남 장흥군 부산면 부춘리 산100번지 일원 - 규 모 : 463,665㎡ - 사 업 비 : 80억원(국비 40, 지방비 40) - 주요사업 : 생태공원 1식 ○ 추진현황 - 기본 및 실시설계 완료 : 2011. 6. 28 - 공사 착공 : 2011. 8. 25

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-19〕

①사업부서	지역경제마케팅과	②담당자 (연락처)		지역경제마케팅과장 노희규 농촌개발담당 김병원 지방시설7급 최채홍 (860 - 0519)
③정책사업명	농촌마을종합개발사업(정남진권역)
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2009~2013
⑥주요내용	○ 추진배경 - 정남진권역의 소득증진 및 “삶의 질” 향상을 위한 지역의 특성에 맞는 실질적이고 구체적인 발전전략과 농촌자원의 보전 및 농촌의 다원적 기능 발굴 ○ 추진기간 : 2009. 4. ~ 2013. 12. ○ 총사업비 : 6,800백만원 (2013년분 1,333) ○ 주요내용 - 정남진 순환로 확,포장 등 4건, 지역역량강화사업 1건 추진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 20〕

①사업부서	지역경제마케팅과	②담당자 (연락처)		지역경제마케팅과장 노희규 농촌개발담당 김병원 지방시설7급 최채홍 (860 - 0519)
③정책사업명	농촌마을종합개발사업(개매기권역)
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2010~2015
⑥주요내용	□ 사업추진 목적 및 배경 ○ 매생이권역의 특성과 주변여건을 정확히 조사ㆍ분석하고, 이를 합리적으로 활용하여 매생이권역의 농촌다움을 유지하고 보전하며, 쾌적함을 동시에 증진하여 매생이권역 주민의 “삶의 질”을 향상코자 추진 □ 사업추진상황 ○ 사업현황 - 사업기간 : 2010년~2015년(6년간) - 총사업비 : 6,080백만원(국비 70%, 지방비 30%) ⇒ 2013년도 : 1,370백만원 - 사 업 량 : 다목적센터, 매생이 공동작업장, 갯벌 체험로 등 7건 ○ 지금까지 추진실적 및 계획 - 2012년도까지 추진실적 : 1,980백만원 ㆍ실시설계용역 완료, 매생이 공동작업장 완료 - 2013년도 추진 : 1,370백만원 ㆍ다목적센터 신축, 지역역량강화사업 1건 추진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 21〕

①사업부서	지역경제마케팅과	②담당자 (연락처)		지역경제마케팅과장 노희규 도시계획담당 박성기 지방시설7급 조영민 (860 - 0431)
③정책사업명	회진면 소재지종합정비사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013~2016
⑥주요내용	□ 추진배경 회진면 중심 시가지 환경정비, 공원조성 등 기초 인프라 구축으로 관광객 및 주민 생활편의 제공 □ 사업내역 ○ 야외공연장 조성(A=1,600㎡) / 2,400백만원 ○ 만남의 광장 조성(A=190㎡) / 242백만원 ○ 주민 어울터 조성(A=106㎡) / 130백만원 ○ 도로 확·포장 L=290m(B=15m) / 1,635백만원 ○ 쌈지공원 조성(2개소) / 320백만원 ○ 상징조형물 설치(1식) / 700백만원 ○ 시가지 가로환경 정비(간판정비 1식) / 640백만원 ○ 용역비 및 지역역량강화 사업비(1식) / 933백만원

장평면 소재지종합정비사업 내역서

〔등록번호 2014-22〕

①사업부서	지역경제마케팅과	②담당자 (연락처)		지역경제마케팅과장 노희규 도시계획담당 박성기 지방시설7급 조영민 (860 - 0431)
③정책사업명	장평면 소재지종합정비사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2014~2017
⑥주요내용	□ 추진배경 JNJ 골프리조트 개장으로 외부관광객이 급증함에 따라 시가지 환경정비, 주차장 등 기초 인프라를 구축하여 관광객 및 주민 생활편의 제공 □ 사업내역 ○ 체육공원 조성(A=4,833㎡) / 1,580백만원 ○ 주차장 조성(A=1200㎡) / 700백만원 ○ 인도설치L=550m(B=3m) / 400백만원 ○ 시가지 도로정비 L=405m(B=9m) / 600백만원 ○ 전통시장 현대화(A=1,307㎡) / 1,200백만원 ○ 시가지 가로환경 정비(간판정비 1식) / 400백만원 ○ 용강천 정비 L=575m(B=12m) / 1,400백만원 ○ 용역비 및 지역역량강화 사업비(1식) / 720백만원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-23〕

①사업부서	지역경제마케팅과	②담당자 (연락처)		지역경제마케팅과장 노희규 지역경제담당 문병길 지방행정7급 위재봉 (860 - 0339)
③정책사업명	대덕읍 전통시장 현대화사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013 ~ 2015
⑥주요내용	□ 필요성 ◦현 시장은 블럭형 구조로 공간 활용이 비효율적이고 시설 노후로 이용객이 많지 않아, 시장 활성화를 위해 정비 필요 □ 시장 현황 ◦위치 : 장흥군 대덕읍 거정2길 10 ◦부지 : 5,894㎡, 건축물 연면적 : 1,096㎡(1985년) ◦상인 : 점포 29, 노점 120여명 ◦정기시장(5일장, 5․10일장), 공설시장 □ 사업 개요 ◦사업기간 : 2013. 3월 ～ 2014. 12월 ◦사 업 량 : 부지 5,894㎡, 건축 1,281.75㎡ ◦사 업 비 : 3,367백만원(광특 70%, 군비 30%) ◦사업내용 : 전통시장 장옥 재건축 및 편의시설 설치 □ 추진사항 ◦설계 용역 : 2013. 3월 ~ 2014. 1월 ◦사업 추진 : 2014. 5월 ~ 2015. 3월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-24〕

①사업부서	지역경제마케팅과	②담당자 (연락처)		지역경제마케팅과장 노희규 도시계획담당 박성기 지방시설7급 조영민 (860 - 0431)
③정책사업명	대덕읍 소재지종합정비사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2012~2015
⑥주요내용	□ 추진배경 농어촌지역의 중심적 역할을 담당하고 있는 읍소재지 쇠퇴 현상을 개선하여 지역주민의 삶의 질 향상 및 지역경제 활 성화 기반 구축 □ 사업내역 ○ 주차장 조성사업(A=2,555㎡) / 793백만원 ○ 게이트볼장 조성사업(A=572㎡) / 265백만원 ○ 도로확포장 L=290m(B=15m) / 1,514백만원 ○ 다목적 복지타운(A=4,071㎡) / 3,100백만원 ○ 전통시장 현대화(A=6,565㎡) / 507백만원(중기청 2,860백만원) ○ 시가지 가로환경정비(전선지중화 1식) / 1,501백만원 ○ 게이트 설치(상징게이트 1식) / 200백만원 ○ 아름다운 상가조성(간판정비 1식) / 990백만원 ○ 용역비 및 지역역량강화 사업비(1식) / 1,530백만원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 25〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 (860 - 0374)
③정책사업명	벼 재배농가 경영안정대책비
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		14.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 사업목적 - 쌀시장 개방과 농자재 원가 상승으로 인한 농가 경영비 부담을 경감하고 경쟁력 제고로 소득 안정 도모 ○ 사업개요 - 대 상 : 장흥군 거주하는 2013년 벼 재배농가 - 규 모(사업량) : 8,585㏊(6,000여 농가) - 사 업 비 : 2,720백만원(도비 40%, 군비 60%) - 주요내용 : 쌀 재배농가의 생산비 절감을 위한 소득보전 직불금 지급 ○ 추진계획 및 실적 - 2013년 벼 재배농가 조사 : 2014. 2. ~ 3 - 벼 재배농가 경영안정대책비 지급 : 2,720백만원 ⇒ 1차지급 : 2,600백만원 5,363농가 5,448ha / 4월 지급완료 ⇒ 2차지급 : 120백만원 / 추경후 지급

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 26〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 (860 - 0374)
③정책사업명	농업인 생산비 절감지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~13.12.31
⑥주요내용	○ 추진배경 화학비료 등 주요 농자재 가격인상에 따른 농업경영비 증가로 어려움을 겪고 있는 농업인 지원, 생산비 절감 및 영농의욕 고취 ○ 추진기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31 ○ 총사업비 : 1,600백만원 ○ 추진실적 ∙ 유기질 비료공급 및 포장재 구입비 지원 : 1,600백만원 (군비) - 유기질 비료공급 : 1,100백만원 / 6월 공급완료 - 생산비절감(포장재)지원사업추진 : 500백만원 / 10월공급

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-27〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 (860 - 0374)
③정책사업명	농업인생산비절감지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		14.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 추진배경 화학비료 등 주요 농자재 가격인상에 따른 농업경영비 증가로 어려움을 겪고 있는 농업인 지원, 생산비 절감 및 영농의욕 고취 ○ 추진기간 : 2014.1.1 ~ 2014.12.31 ○ 총사업비 : 1,300백만원 ○ 사업내용 ∙ 유기질 비료공급 : 1,100백만원 ∙ 포장재 (PP포대) 지원 : 500백만원 ○ 추진실적 ∙ 유기질 비료공급 : 1,100백만원 / 6월 공급완료 ○ 추진계획 ∙ 유기질 비료공급 사업 정산 : ‘14.6월한 ∙ 포장재(PP포대)지원사업 공급계획수립 : ‘14.6월한 -농가별 포대와 톤백 희망량 조사 ∙ 포장재(PP포대)지원사업 공급계약 : ‘14.9월한 ∙ 포장재(PP포대) 농가공급 : ‘14.9월말

정책실명제중점관대상사업사업내역서

〔등록번호 2014- 28〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 농정담당 이옥심 지방농업8급 이정석 (860 - 0371)
③정책사업명	장흥군 기초농산물 최저가격보장지원 특별회계 설치 및 운영조례 제정
④선정기준	다수의 주민과 관련된 조례		⑤사업기간		14.1.1~14.12.31
⑥주요내용	▢ 추진배경 ○ 우리군에서 생산한 농산물 중 수급이 불안정한 품목의 판로확대와 수급조절 및 가격하락에 대응하고 농민의 안정적인 소득보전을 위한 기초 농산물 최저가격 보장지원 운영관리에 필요한 사항을 규정하기 위함 - 민선6기 군수님 공약사항 - ▢ 사업개요 - 운영기금 : 50억원 / 연차적 10억씩 특별회계 전출 - 대상품목 : 8종 / 양배추, 감자, 양파, 고추, 마늘, 쪽파,배추, 콩 등 - 자금용도 : 가격폭락시 기초농산물 최저생산비 보장지원 ▢ 추진계획 및 실적 - 조례(안)방침결정 : 8월중 - 조례안 심사의뢰 및 입법예고 : 9월 - 조례규칙심의위원회 부의 및 조례안 확정 : 10월 - 군 의회 상정 및 공포 : 10월 - 중기지방재정계획 반영 : 11월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-29〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 지방행정7급 임선화 (860 - 0397)
③정책사업명	친환경농업직접지불제
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		14.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 사업목적 - 친환경농업 실천농가에 보조금을 지원하여 친환경농업 육성 및 안전한 농산물 생산 유도 ○ 사업개요 - 위치 (대상) : 친환경농산물 인증을 받은 농업인 - 규 모(사업량) : 3,055 ha - 사 업 비 : 1,344백만원(국비) - 주요내용 : 친환경농업 실천 농업인에게 초기 소득 감소분 및 생산비 차이보존 ○ 추진계획 및 실적 - 사업신청 : 2014. 1 ~ 3월 - 인증기관 이행상황 점검 : 2014. 5 ~ 10월 - 보조금 지급 : 2014. 12월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-30〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김 근 지방행정7급 임선화 (860 - 0397)
③정책사업명	친환경농산물 인증지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~13.12.31
⑥주요내용	○ 추진배경 친환경인증면적 목표설정 확대추진으로 유기 생태농업 실천단지별 규모화, 조직화로 안정적인 친환경농산물 생산체계 구축 ○ 추진기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31 ○ 총사업비 : 1,372백만원 (도비 30%, 군비 70%) ○ 추진실적 - 인증실적 : 4,374㏊(유기농 772, 무농약 3,602) ⇒ 벼 3,743ha, 85.5% / 경지면적의 35.7%, 목표면적의 80% - 인증추진 대책 회의 : 군 4회, 도 7회 - 필지별, 단지별, 작물별 리스트 관리, 인증서류 작성지원 등 - 친환경자재 저비용 기술․현장 교육 : 12회 / 읍면순회

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-31〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 지방행정7급 임선화 (860 - 0397)
③정책사업명	친환경농산물인증지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		14.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 사업목적 - 친환경농업 실천농가 인증비 부담 경감 및 인증면적 확대 - 친환경농업 확대를 통한 친환경농산물 생산기반 구축 ○ 사업개요 - 위 치 (대상) : 친환경농산물 생산 농업인 - 규 모(사업량) : 1,960건 - 사 업 비 : 1,176백만원(도비 353, 군비 823) - 주요내용 : 친환경농산물 인증에 따른 수수료, 토양검정, 수질, 잔류농약검사 등 인증비 지원 ○ 추진계획 및 실적 - 사업계획 수립 및 통보 : 2014. 1 ~ 2월 - 친환경농업 인증추진 : 2014. 1 ~ 12월 - 인증서 확인 및 사업비 지급 : 2014. 12월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-32〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 지방행정7급 임선화 (860 - 0397)
③정책사업명	친환경광역단지 지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~13.12.31
⑥주요내용	○ 추진배경 친환경농업단지 조성에 필요한 미생물 등 친환경농자재 공급 및 친환경농업단지에 품목별․인증단계별 사업비 지원 ○ 추진기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31 ○ 총사업비 : 4,348백만원 (도비 690, 군비 3,658) ○ 추진실적 : 98개단지, 2,494농가 3,909ha - 지원조건(ha) : 유기농산물인증 100만원, 무농약 인증 70만원 - 지원내용 : 병해충 친환경약제, 논두렁 잡초 방지 농자재 - 실천협약, 공동방제, 책임모델구축 등 친환경단지 운영체계 구축

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-33〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 지방행정7급 임선화 (860 - 0397)
③정책사업명	친환경광역단지지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		14.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 사업목적 - 친환경농산물 생산의 단지화를 통한 생산비 절감 ○ 사업개요 - 위치 (대상) : 들녘, 수계단위로 단지화하여 품목별 친환경농업 실천지역 - 규 모(사업량) : 3,000 ha - 사 업 비 : 3,000백만원(도비 800, 군비 2,200) - 주요내용 : 친환경농업단지 조성에 필요한 미생물 등 친환경농자재 공급 및 친환경농업단지에 품목별․인증단계별 사업비 지원 ○ 추진계획 - 세부사업계획 수립 및 단지조성 : 2014. 3월 - 단지별 협약체결 : 2014. 4월 - 사업추진(자재공 및 영농지도) : 2014. 5월 ~ 12월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-34〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 지방농업9급 김세형 (860 - 0375)
③정책사업명	친환경유기질 비료공급
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~13.12.31
⑥주요내용	○ 추진배경 농림축산 부산물의 재활용 자원화를 촉진하고 토양환경을 보전하여 지속가능한 농업 추진 ○ 추진기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31 ○ 총사업비 : 3,602백만원 (도비 50%, 군비 50%) ○ 추진실적 - 사업량 : 35,756톤 공급완료 - 유기질 788톤 98백만원 - 가축분퇴비 34,143톤 3,417백만원 - 일반퇴비 825톤 87백만원 - 영농기 이전 적기 공동 살포 추진 : 수시 / 현장지도 - 유기질비료, 퇴비 생산업체 검사 : 연2회

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-35〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 지방농업9급 김세형 (860 - 0375)
③정책사업명	친환경유기질비료 지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		14.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 사업목적 - 농림축산 부산물의 재활용 자원화를 촉진하고 토양환경을 보전하여 지속가능한 농업 추진 ○ 사업개요 - 위치 (대상) : 10읍면 농업인 - 기 간 : 2014년 ~ 2014년 (1년간) - 규 모(사업량) : 33,260톤 - 사 업 비 : 4,389백만원 (국비 1,755, 군비 1,317, 자담 1,317) - 주요내용 : 농림축산 부산물의 활용 및 토양질 향상을 위한 유기질비료 공급 ○ 추진계획 - 사업계획 수립 및 대상자 선정 : 2014. 1 ~ 2월 - 사업추진(비료공급) : 2014. 2 ~ 12월 - 성과분석 및 사업비 정산 : 2014. 12월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-36〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 지방행정7급 위금주 (860 - 0376)
③정책사업명	쌀소득등보전직불제지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~13.12.31
⑥주요내용	○ 추진배경 쌀소득등보전직불금 지원으로 벼 재배농가 소득안정 및 주식인 쌀의 재배면적 유지 ○ 추진기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31 ○ 총사업비 : 6,975백만원 (국비 100%) ○ 추진실적 - 쌀 고정직불금 : 2013. 12월지급 완료 · 사 업 량 : 5,396농가 8,490ha · 사 업 비 : 6,975백만원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-37〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김근 지방행정7급 위금주 (860 - 0376)
③정책사업명	쌀소득등보전직불제 지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		14.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 사업목적 - 쌀소득등보전직불금 지원으로 벼 재배농가 소득안정 및 주식인 쌀의 재배면적 유지 ○ 사업개요 - 위치 (대상) : ‘98 ~ 11까지 논농업에 이용된 농지 실경작 농업인(법인) - 규 모(사업량) : 8,612ha - 사 업 비 : 7,225백만원 (국비) ○ 추진계획 및 실적 - 직불금 대상자 신청접수 : 2014. 2 ~ 6월 - 신청내용 확인 및 등록증 교부 : 2014. 6 ~ 8월 - 이의신청 및 등록사항 변경 : 2014. 8 ~ 9월 - 이행상황 점검 및 대상자 확정 : 2014. 10 ~ 11월 - 고정직불금 지급 : 2014. 12월 ※ 변동직불금 지급 : 2015. 3월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-38〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 원예특작담당 김성호 지방농업7급 임상록 (860 - 0384)
③정책사업명	시설원예품질개선사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 사업목적 - 원예전문생산시설의 현대화 규모화, 전문화를 지원함으로써 원예농산물의 품질개선 및 안정적인 수출 기반 구축 - 생산비 절감을 통한 생산력 향상으로 농가소득 증대에 기여 ○ 사업개요 - 위 치 : 장평면 청용리 410-1번지외 16필지 - 시설규모 : 3.3ha (파프리카 유리온실) - 사 업 비 : 5,430백만원 (국비 1,086, 도비163, 군비1,466, 자담2,715) ○ 추진실적 - 원예전문단지 지원사업 공모확정 : ‘12.12월 (농식품부) - 지방재정 투융자 심사(전남도 심사) : ‘13. 2월 - 사업대상자 확정통보(청하영농법인) : ‘13. 6월 - 전남도 도시계획위원회 심의의결 : ‘14. 2월 ○ 추진계획 - 유리온실 신축 추진 : ‘14. 6 ~11월 - 작물 육묘 및 식재 : ‘14. 12월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-39〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 원예특작담당 김성호 지방농업7급 임상록 (860 - 0384)
③정책사업명	시설원예에너지 이용 효율화 사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 사업목적 - 신재생에너지 이용기술의 농어업시설 적용 및 확대보급 기반구축으로 친환경 녹색성장을 선도하고, 온실가스 절감 추진 - 국제유가 및 농자재 가격상승으로 인한 농어가의 경영비 부담 경감 ○ 사업개요 - 위 치 : 장평면 청용리 410-1번지외 16필지 - 사업규모 : 지열난방(600kw) - 사 업 비 : 3,622백만원(국비2,173, 도비73, 군비 652, 자담724) ○ 추진실적 - 시설원예 에너지 이용효율화 사업 확정 : ‘13.6월(전남도) - 지열사업 국･도비 예산확보 : ‘13년 1회 추경 - 지열사업 군비 예산확보 : ‘13년 정리 추경 - 지열사업 위탁의뢰 (군→농어촌공사전남본부) : ‘14. 3월 - 지열사업 확정 및 자부담 예치통보 : ’14. 3월 ○ 추진계획 - 용역설계 : ‘14. 6. ~ 8월 - 지열사업 추진 및 준공 : ‘14. 8. ~ 11월

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-40〕

①사업부서

친환경농축산과

②담당자

(연락처)

친환경농축산과장 유영철

한우산업담당 문정걸

지방농업7급 백형균

(860 - 0394)

③정책사업명

공공형승마시설 설치 지원사업

④선정기준

10억원이상 사업

⑤사업기간

14.1.2~16.12.31

⑥주요내용

○ 사업개요

◦ 위  치 : 안양면 기산리 로하스타운 조성지역 내

- 부지 28,907㎡, 시설 3,687㎡(실내승마장 등)

◦ 총사업비 : 4,203백만원

- 예산확보액 : 2,340백만원(국비 650, 도비 130, 군비 1,560)

◦ 주요시설 : 실내․외승마장, 클럽하우스, 마방, 부대시설 등

구 분	사업량(면적)	주 요 내 용	비 고
계	6종
승마장(실내)	2,450㎡(730평)	막구조 승마장, 벽면 오픈
승마장(실외)	4,000㎡(1,210평)	실외마장, 원형마장
클럽하우스	230㎡(70평)	휴게실, 탈의실, 샤워실,화장실
마방(말관리사)	624㎡(120평)	마방 34칸 / 수장실포함
창고, 퇴비사	330㎡(100평)	창고 202㎡, 퇴비사 149㎡
기타(기반공사)	21,717㎡(6,824평)	토목공사

○ 추진실적

◦ 공공형승마장 공모사업 선정 : ‘12. 2. 28. / 농식품부

◦ 지방재정 투융자 심사승인 : ‘13. 3. 28.

◦ 기본 및 실시설계용역 완료 : ‘13. 11. 29.

◦ 전라남도 계약심사 승인 : ‘13. 12. 6. / 전라남도

◦ 공공승마장 공사착수 : ‘14. 1. 2.

- 수목 이식 및 기반조성(부지정리) 60% 완료(‘14.5월)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 41〕

①사업부서

친환경농축산과

②담당자

(연락처)

친환경농축산과장 유영철

한우산업담당 문정걸

지방농업7급 백형균

(860 - 0394)

③정책사업명

FTA 피해보전제도 지원

④선정기준

10억원이상 사업

⑤사업기간

‘14. 1 ~‘14. 12.

⑥주요내용

◦ 사업개요

- 축산법에 따른 축산업 등록을 필한 농가(법인)로 지원대상

품목을 발효일 이전(2012. 3. 14)부터 사육한 자

- 지원대상 : 한우(큰소), 송아지

- 지원내용 : 피해보전직불제, 폐업지원제 구분 지원

◦ 추진실적

- 지원대상 확정 :  2개사업 / 2,325백만원

(단위 : 호, 천원)

구 분	계	피해보전직불제	폐업지원제	비 고
두 수	18,436	16,236	2,200
농가수	3,364	3,193	171
금 액	2,325,770	405,082	1,920,688

• 지원단가

□ 피해보전직불제(두당) : 큰소 13,545원 /송아지 57,343원

□ 폐업지원제(두당) : 암소 899,000원 / 수소 811,000원

- 농가 지급실적(6월) - 직불제 100% 지원

• 지급농가 : 3,242농가(직불제 3,193 / 폐업 49)

• 지 급 액 : 650,428천원(직불제 405,082 / 폐업지원 245,346)

□폐업 신청농가 현지 확인 후 폐업자금 지원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 42〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 한우산업담당 문정걸 지방행정7급 변영숙 (860 - 0395)
③정책사업명	조사료 제조 운송비 지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		‘13. 1 ~‘13. 12.
⑥주요내용	○ 추진배경 : 국산 조사료 생산.이용을 활성화하여 생산비 절감 등 축산업 경쟁력 강화 ○ 추진기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31 ○ 총사업비 : 4,718백만원(기금 30%, 군비 60%) ○ 주요내용 - 동계 조사료 제조운송사업 지원 : 3,572ha / 69,030톤 - 이탈리안라이그라스 : 3,550ha, 청보리 21.9ha ∙ 하계 조사료 제조운송사업 지원 : 112ha / 2,546톤 - 수단 : 57ha, 옥수수 24ha, 기타 31ha

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 43〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 한우산업담당 문정걸 지방행정7급 변영숙 (860 - 0395)
③정책사업명	조사료 제조 운송비 지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		14.1.1~14.12.31
⑥주요내용	○ 사업목적 : 국산 조사료 생산.이용을 활성화하여 생산비 절감 등 축산업 경쟁력 강화 ○ 추진기간 : 2014.1.1 ~ 2014.12.31 ○ 총사업비 : 2,312백만원(기금 30%, 군비 60%) ○ 추진실적 ∙ 조사료생산 동계 제조운송사업 지원 : 2,588ha / 51,756톤 - 이탈리안라이그라스 : 2,555ha, 청보리 32.4ha

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 44〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 친환경농업담당 김 근 지방농업9급 김세형 (860 - 0394)
③정책사업명	토양개량제 지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~13.12.31
⑥주요내용	○ 추진배경 토양 유기물 함량증대를 통한 지력증진과 농업환경 유지보전 화학비료 사용절감을 통한 친환경농업 생산체계 확산 ○ 추진기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31 ○ 총사업비 : 1,025백만원 (국비70%, 도비9%, 군비21%) ○ 추진실적 ∙ 토양개량제 (규산,석회)공급 - 사 업 량 : 7,724톤 - 지원대상 : 장동,장평,유치,부산 / 6월말 완료

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 45〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 한우산업담당 문정걸 지방행정7급 변영숙 (860 - 0395)
③정책사업명	연결체 조사료 생산장비지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~13.12.31
⑥주요내용	○ 추진배경 : 조사료용 기계.장비 등 지원을 통해 양질의 조사료 생산․유통기반 확충 도모 ○ 추진기간 : 2013.1.1 ~ 2013.12.31 ○ 총사업비 : 1,200백만원 (기금 20%, 군비 30%) ○ 주요내용 - 조사료 생산 기계장비 지원 : 8세트 / 베일러, 예초기외

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 46〕

①사업부서	친환경농축산과	②담당자 (연락처)		친환경농축산과장 유영철 한우산업담당 문정걸 지방행정7급 변영숙 (860 - 0395)
③정책사업명	조사료생산전문단지 지원
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		13.1.1~17.12.31
⑥주요내용	○ 추진배경 : 조사료 생산 경쟁력 강화를 위하여 규모화 집단화된 조사료 재배지역을 특구로 선정·육성 ○ 추진기간 : 2013.1.1 ~ 2017.12.31 ○ 총사업비 : 2,066백만원 (기금 50%, 군비 40%) ○ 주요내용 - 제조운송사업 지원 : 500ha / 10,000톤 - 기계장비 지원 : 8조 / 조사료 생산 기계장비 - 종자대 지원 : 360ha - 퇴.액비 지원 : 500ha

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-47〕

①사업부서	해양수산과	②담당자 (연락처)		해양수산과장 신운용 해양시설담당 윤영선 지방시설7급 선병우 (860 - 0408)
③정책사업명	장흥군 연안관리지역계획 수립용역
④선정기준	5천만원이상 연구용역		⑤사업기간		2013. 6. 28 ~ 중지중
⑥주요내용	○ 추진목적 및 배경 : 연안관리법 제2장 제9조(연안 관리지역 계획 수립 등)의 규정에 따라 장흥군 연안의 효율적인 보전 ‧ 이용 및 개발 ○ 추진상황 - 용역비 : 99,668천원 - 용역사 : (주)우빈기술개발건축사사무소 최기선 - 2013. 7 ~ 9 : 관련자료 수집 - 2013. 10. : 연안관리지역계획 현지답사 및 GIS분석 - 2013.11~12. : 자연해안관리 목표제 설정을 위한 장흥연안 지역 현장조사 - 2014.02. : 관련부서 협의 및 중간보고, 지역설명회 ( 계획대상연안, 용도해역 및 해역기능구, 자연해안관리목표 설정 및 관리방안) - 2014.04. : 전라남도 사전 협의 - 2014.05. : 연안관리지역계획 공청회 및 관계기관장 협의 (연안관리에 필요한 세부 추진사항 제시) ○ 추진계획 - 2014.06. : 관계기관장 협의 조치계획 - 2014.07. : 연안관리지역계획 전라남도 지방연안관리심의 - 2014.08. : 연안관리지역계획 해양수산부 중앙연안관리심의회 - 2014.08. : 해양수산부 고시 예정

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-48〕

①사업부서	해양수산과	②담당자 (연락처)		해양수산과장 신운용 해양시설담당 윤영선 지방시설7급 선병우 (860 - 0408)
③정책사업명	소규모어항 시설보강(복합다기능부잔교설치)
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2014. 5. ~ 12.
⑥주요내용	○ 추진목적 및 배경 - 소규모어항 27개소 대다수가 노후 및 갯벌퇴적으로 인한 어선 접안 불편 해소 - 복합다기능 부잔교를 시설하여 어업인의 어업활동 편리 도모 ○ 추진상황 - 실시설계용역 : 2014. 5. 29 ~ 7.27 - 용역비 : 46,958천원 - 용역사 : 동원건설(주) 박장륜 ○ 추진계획 - 실시설계용역 및 행정협의 완료 : 2014. 7월 - 부잔교 설치 및 완료 : 2014. 12월 한.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-49〕

①사업부서	해양수산과	②담당자 (연락처)		해양수산과장 신운용 해양시설담당 윤영선 지방시설7급 선병우(860 - 0408)
③정책사업명	노력도 도서종합개발사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2014. 6.~2015. 5.
⑥주요내용	◉ 2차 도서종합개발사업 ◦ 사업개요 ∙사 업 량 : 연육교 L=452m, 도로개설 L=3.46㎞ (교량입구 3거리 ~ 미역공장 전 커브시점 NO. 69) ∙사 업 비 : 35,008백만원 / 1차분 ~ 8차분 ∙사업기간 : 2000. 1. 26 ~ 2008. 12. 20 ◦ 년도별 추진사항 ∙‘00. 01. 26~’00. 12. 30(1차) : 도로개설 / 1,557백만원 ∙‘01. 04. 12~’02. 02. 11(2차) : 도로개설 / 560백만원 ∙‘02. 05. 24~’04. 04. 23(3차) : 연육교 / 5,891백만원 ∙‘03. 08. 07~’04. 09. 23(4차) : 연육교 / 6,798백만원 ∙‘04. 08. 24~’05. 08. 23(5차) : 연육교 / 3,689백만원 ∙‘05. 05. 06~’06. 11. 05(6차) : 연육교 / 6,900백만원 ∙‘06. 12. 22~’07. 12. 21(7차) : 연육교, 도로개설 / 2,828백만원 ∙‘07. 09. 18~’08. 12. 20(8차) : 도로개설 / 2,557백만원 ◉ 3차 도서종합개발사업 ◦ 사업개요 ∙사 업 량 : 도로개설 L=2.7㎞, 물양장 L=90m, 선양장 L=52m, 방파제 L=160m ※ 도로개설 : 미역공장 전 커브시점 NO. 69 ~ 130) ∙사 업 비 : 20,830백만원(인가액 - 6,935 미 인가액 - 13,895) ∙사업기간 : 2008. 12. 04 ~ 2017. 12. 31 ◦ 년도별 추진사항 ∙‘08. 12. 04~’09. 10. 04( 9차) : 도로개설 / 315백만원 ∙‘09. 02. 10~’10. 02. 10(10차) : 도로개설 / 1,300백만원 ∙‘10. 03. 11~’11. 12. 03(11차) : 도로개설외 2종 / 12,256백만원 ∙‘12. 03. 26~’13. 01. 19(12차) : TTP 594EA 설치외/ 1,045백만원 ∙‘13. 06 ~ 14. 5(13차) : 도로공사 및 보상 추진 / 1,210백만원 ∙‘14. 6 ~ 15. 5(14차) : 발주준비 중 계획 : 도로공사 및 보상 추진 / 1,227백만원 ※ 2014. 4. 2 : 소규모환경영향평가 접수(영산강환경유역청) 협의 중 - 교통량 조사 등 보안자료 작성 중

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-50〕

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)		안전건설과장 김광렬 농업기반담당 김대중 지방시설6급 김선정 (860 - 0485)
③정책사업명	외반지구 지표수보강 개발사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2011. 6. ~ 2015. 6.
⑥주요내용	□ 사업목적 ◦ 농촌용수가 부족한 지역의 수원공 시설을 확장․보강 하여 안정적인 농업용수 확보와 영농 소득증대 기여 □ 사업개요 ○ 위 치 : 장동면 반산리 일원 ○ 수혜면적 : 69.1ha(기설수리답18.8, 개발면적50.3) ○ 사업내용 - 제방보강 364m - 여방수로 240m - 준 설 221천㎥ - 취수시설 130m - 이설도로 256m - 용수로 4.2km ○ 사 업 비 : 7,862백만원(국비 70% 군비 30%) □ 추진상황 (진도 : 72%) ○ 제방보강, 여방수로, 준설, 취수시설 공사 완료 ○ 이설도로 및 용수시설 시공 중 ○ 투자사업비 : 5,621백만원(국비3,935, 군비1,686) □ 추진계획 ○ 2015. 6월 : 사업 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-51〕

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)		안전건설과장 김광렬 농업기반담당 김대중 지방시설6급 김선정 (860 - 0485)
③정책사업명	내저지구 지표수보강 개발사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2014. 7. ~ 2016. 6.
⑥주요내용	□ 사업목적 ◦ 농촌용수가 부족한 지역의 수원공 시설을 확장․보강 하여 안정적인 농업용수 확보와 영농 소득증대 기여 □ 사업개요 ○ 위 치 : 대덕읍 옹암리 일원 ○ 수혜면적 : 12.9ha(기설수리답2.5, 개발면적10.4) ○ 사업내용 - 제방보강 177m - 여방수로 84m - 취수시설 74m - 이설도로 398m - 부대공사 1식 ○ 사 업 비 : 3,163백만원(국비 70%, 군비 30%) □ 추진상황 (진도 : 5%) ○ 기본계획수립 및 실시설계 완료 ○ 행정인허가 절차 이행 중 ○ 투자사업비 : 27백만원(국비19, 군비8) □ 추진계획 ○ 2014. 7월 : 사업 발주

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 52〕

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)		안전건설과장 김광렬 농업기반담당 김대중 지방시설6급 김선정 (860 - 0485)
③정책사업명	산정지구 소규모 용수개발사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2012. 3. ~ 2015. 3.
⑥주요내용	□ 사업목적 ◦ 농촌용수가 부족한 지역의 수원공 시설을 확장․보강 하여 안정적인 농업용수 확보와 영농 소득증대 기여 □ 사업개요 ○ 위 치 : 대덕읍 연정리 일원 ○ 수혜면적 : 48.0ha(기설수리답19.0, 개발면적29.0) ○ 사업내용 - 제방보강 148m - 여방수로 110m - 준 설 221천㎥ - 취수시설 86m - 이설도로 480m - 용수로 967m ○ 사 업 비 : 4,669백만원(국비 70%, 군비 30%) □ 추진상황 (진도 : 70%) ○ 제방보강, 여방수로, 준설, 취수시설 공사 완료 ○ 이설도로 및 용수시설 시공 중 ○ 투자사업비 : 3,881백만원(국비2,717, 군비1,164) □ 추진계획 ○ 2015. 3월 : 사업 준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 53〕

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)		안전건설과장 김광렬 농업기반담당 김대중 지방시설6급 김선정 (860 - 0485)
③정책사업명	조양지구 대구획 경지정리(시설개량)사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2015. 1. ~ 2016. 6.
⑥주요내용	□ 사업목적 ◦ 경지정리지구내 농로포장과 용배수로 구조물화 등 시설 개량을 통한 농경지 침수 예방과 영농여건 개선 □ 사업개요 ○ 위 치 : 장동면 조양, 봉동리 일원 ○ 수혜면적 : 70.0ha ○ 사업내용 - 용수로 4.0km, 배수로 7.0km, 농로포장, 배수시설 1식 등 ○ 사 업 비 : 1,797백만원(국비80%, 도비2%, 군비18%) □ 추진상황 ○ 2014. 3월 : 사업대상지 선정 ○ 2014. 5월 : 2015년 지역발전특별회계 예산 신청 □ 추진계획 ○ 2015. 1월 이후 : 기본 및 실시설계 후 사업 시행

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-54〕

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)		안전건설과장 김광렬 토목담당 길현종 지방시설8급 황수현 (860 - 0488)
③정책사업명	장동 다목적회관 신축사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2014. 6. ~ 2014. 11.
⑥주요내용	□ 사업목적 ◦ 쾌적한 복지환경 제공으로 면민 삶의 질 향상과 건강 증진 도모 □ 사업개요 ○ 위 치 : 장동면 북교리 일원 ○ 사업내용 : 다목적회관 A=148평(철근콘크리트조)신축 ○ 사 업 비 : 1,051백만원(국비70%, 군비30%) □ 추진상황 ○ 공유재산 관리계획 승인 ○ 문화재 표본조사완료 ○ 실시설계 완료 ○ 도 계약심사 진행중 □ 추진계획 ○ 2014. 6월 : 사업 발주

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014- 55〕

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)		안전건설과장 김광렬 재난관리담당 장종화 지방시설7급 김홍전 (860 - 0657)
③정책사업명	배산천 생태하천 조성사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013. 1. ~ 2016. 12.
⑥주요내용	□ 사업목적 ○ 장동면민들의 오랜 숙원사업으로 미개수된 배산천을 정비하여 농경지 및 가옥침수 피해 예방 □ 사업개요 ○ 위 치 : 장동면 배산리 ○ 사업내용 : 하천 정비 L=1.7km ○ 사 업 비 : 총괄7,500백만원 ※ 2014년 : 1,167백만원(국비700, 군비467) □ 추진상황 ○ ’13. 1월 ~ ’14. 1월 : 실시설계 및 기본계획 변경협의(익산청) ○ ’14. 2월 : 총괄사업비 확정(국토교통부 75억) ○ ’14. 3월 ~ 5월 : 비관리청 및 각종행정 협의 □ 추진계획 ○ ’14. 6월 ~ 12월 : 총괄발주 및 1차분 시행

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-56〕

①사업부서	안전건설과	②담당자 (연락처)		안전건설과장 김광렬 재난관리담당 장종화 지방시설7급 김홍전 (860 - 0657)
③정책사업명	평화천 재해위험지구 정비사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013. 1. ~ 2016. 12.
⑥주요내용	□ 사업목적 ◦상류지역 산업단지 조성으로 유역 환경이 변화하고 집중호우시 유입량이 증가하여 하류부 농경지 및 축사 침수피해 빈번 □ 사업개요 ○ 위 치 : 장흥읍 평화리 ○ 사업내용 : 하천정비 L=2.72km ○ 사 업 비 : 총괄9,700백만원 ※ 2014년 : 3,000백만원(국비1,500, 군비1,500) □ 추진상황 ○ ’13. 1월 ~ ’14. 1월 : 실시설계 및 기본계획 변경협의(전라남도) ○ ’14. 1월 ~ ’14. 4월 : L하천기본계획 변경 및 실시설계 완료 ○ ’14. 5월 : 총괄사업비 변경에 따른 방재청 설계검토(40억→97억) □ 추진계획 ○ ’14. 6월 ~ 12월 : 총괄발주 및 1차분 시행

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-57〕

①사업부서

안전건설과

②담당자

(연락처)

안전건설과장 김광렬

재난관리담당 장종화

지방시설7급  김홍전

(860 - 0657)

③정책사업명

소하천 정비사업

④선정기준

10억원이상 사업

⑤사업기간

2013. 3. ~ 2015. 1.

⑥주요내용

□ 사업목적

◦소하천 대부분이 주민 거주지역을 경유하고 있으나 호우시      통수단면 부족으로 침수피해 빈번

□ 사업개요 및 추진상황

사 업 명	위 치	사업량	총괄 사업비	‘14년 사업비	공정율	비고
계	3개소	L=3.0㎞		2,298
부산 양촌소하천 정비사업	부산면 유량리	L=1.4㎞	1,700	280	90%	계속 사업
회진 마장소하천 정비사업	회진면 회진리	L=0.8㎞	1,100	818	40%
관산 신평면천 정비사업	관산읍 부평리	L=0.8㎞	1,200	1,200	30%	신규 사업

□ 추진계획

○ ’14. 6월 ~ 7월 : (계속, 신규) 우수기전 주요공정(교량,보등)완료

○ ’14. 8월 ~ 12월 : 잔여공정 시행 및 사업준공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-58〕

①사업부서	농업기술센터	②담당자 (연락처)		농업기술센터소장 강일성 생활자원담당 구영란 (860 - 0554)
③정책사업명	장흥청태전 자원 산업화 클러스터
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2012 ~ 2014
⑥주요내용	□ 사업기간 : 2012 ~ 2014년 / 3년 □ 총사업비 : 30억(국비 50% 도비 6% 군비 24% 자부담 20%) ○ 2012년 – 6억 / 2013년 – 10억 / 2014년 - 14억 □ 사업내용 : 6개분야 15개 세부사업 ○ H/W분야(50%) : 청태전 생산․가공기반 조성 및 산업화 - 자생차 단지 복원 정비, 청태전 가공시스템 현대화 시스템 구축 - 청태전 전시․체험장 조성 / 장흥읍 행원리 ○ S/W분야(50%) : 사업 역량제고, 명품화 연구개발, 문화컨텐츠 개발, 유통․마케팅 산업화 - 전문인력 양성, 신제품 개발, 티로드 개발 및 홍보 동영상 제작 차문화축제 개최 등 - 발효기술표준화, 응용제품 개발, 성분분석 및 효능평가 등 - 혁신적인 유통․마케팅 등

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-59〕

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)		수도사업소장 김영철 상수도담당 위장일 지방행정7급 안진옥 (860 - 0522)
③정책사업명	상수관망 최적관리시스템 구축사업(광특)
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2010. ~ 2014.
⑥주요내용	○ 추진배경 - 낮은 유수율(57.9%)을 조기에 향상시키고 지방상수도 운영관리에 따른 재정악화 해소(지방상수도 위탁운영) ○ 추진기간 : 2010. ~ 2014. ○ 총사업비 : 8,211백만원(국비 3,686, 군비 4,525) ○ 주요내용 - 유수율 제고사업(블록시스템 구축 및 관망정비 용역) - 수도시설 운영관리(상수도 위탁관리 운영)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-60〕

①사업부서

수도사업소

②담당자

(연락처)

수도사업소장 김영철

상수도담당 위장일

지방시설7급 이명록

(860 - 0521)

③정책사업명

소규모 수도시설 개량사업

④선정기준

10억원이상 사업

⑤사업기간

2012. 1. 11 ~

2015. 1. 9

⑥주요내용

○ 목 적 : 관산읍 해안지역 안정적인 식수공급을 위한

배수관로 및 배수지 신설

○ 사업대상 : 관산읍 방촌마을 외 2개 마을

구 분	공 급 마 을	비 고
관 산 읍	방촌, 어은, 산동	3개마을

○ 사업내용 : 상수관로L=20.7km, 배수지 1개소, 가압장 1개소

○ 총사업비 : 5,161백만원(국비 70%, 군비 30%)

- 2012년(1차분) : 2,776백만원 / 2012. 1. 11 ~ 2013. 5. 11

- 2013년(2차분) : 1,185백만월 / 2013. 3. 04 ~ 2014. 2. 28

- 2014년(2차분) : 1,200백만원 / 2014. 3. 13 ~ 2015. 1. 09

○ 사업기간 : 2012. 1. 11 ~ 2015. 1. 9

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-61〕

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)		수도사업소장 김영철 상수도담당 위장일 지방시설7급 이명록 (860 - 0521)
③정책사업명	안양외 2 농어촌 생활용수 개발사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2010. 1. 27 ~ 2014. 5. 28
⑥주요내용	○ 추진배경 - 지하수 고갈로 인한 마을상수도 수질 및 수량부족에 따른 먹는물 수급불편 해소 ○ 추진기간 : 2010. 1. 27 ~ 2014. 5. 28 ○ 총사업비 : 18,810백만원(국비80%, 도비 5%, 군비 15%) - ‘13년 : 6,225백만원 ○ 주요내용 - 상수관로 L=117.9km, 가압장 9개소

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-62〕

①사업부서

수도사업소

②  담당자

(연락처)

수도사업소장 김영철

상수도담당 위장일

지방시설7급 이명록

(860 - 0521)

③정책사업명

용산지구 농어촌 생활용수 개발사업

④선정기준

10억원이상 사업

⑤사업기간

2013. 8. 19 ~

2015. 8. 18

⑥주요내용

� 목 적 : 지하수 고갈로 인한 마을상수도 수질 및 수량부족에

따른 먹는물 수급불편 해소

□ 사업대상 : 용산면, 안양면 지방상수도 미 급수지역

구 분	공 급 마 을	비 고
용 산 면	월림, 관지, 유동, 정장, 초당, 송전, 상금, 하금, 모산, 계산	10개마을
안 양 면	기산, 동계, 비동, 동촌, 고당, 목단	6개마을

□ 사업내용 : 상수관로 35.0km, 가압장 2개소

□ 총사업비 :  6,000백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

- 2013년(1차분) : 1,500백만원 / 2013. 8. 19 ~ 2014. 3. 30

- 2014년(2차분) : 3,321백만원 / 2014. 4. 21 ~ 2014. 12. 31

□ 사업기간 : 2013. 8. 19 ~ 2015. 8. 18

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-63〕

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)		수도사업소장 김영철 하수도담당 위계륙 지방시설6급 박신주 (860 - 0747)
③정책사업명	안양면단위 하수처리장 설치
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2011. 6. ～ 2014. 12.
⑥주요내용	□ 사업배경 ○ 안양면 소재지의 생활하수의 통합처리로 투자 효율성 증대 및 득량만 수질개선 ○ 주민들의 공중위생 및 생활환경 개선으로 주민편익 제공 □ 추진계획 ○ 사업대상 : 안양면 운흥리 702-5번지 일원 ○ 사업내용 : 처리용량 270톤/일 ○ 총사업비 : 3,105백만원(국비 70%, 도비 4%, 군비 26%) -‘11년 194백만원,‘12년 943백만원,‘13년 1,968백만원 ○ 사업기간 : 2011. 6 ~ 2014. 12 / 4개년

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-64〕

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)		수도사업소장 김영철 하수도담당 위계륙 지방시설6급 박신주 (860 - 0747)
③정책사업명	장흥읍 하수관거 정비사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2013. 6. ～ 2016. 6.
⑥주요내용	□ 사업배경 ○ 하수관거 및 배수설비의 노후화로 인한 불명수 유입 방지로 탐진강 수질개선 효과 기대 □ 추진계획 ○ 사업대상 : 전남 장흥군 장흥읍 건산리 외 9개마을 ○ 사업내용 : 하수관거 L=13.5㎞ - 10개 마을 / 건산1․2․5․6구, 남외1․2구, 교촌, 평화, 향양, 충열 ○ 사 업 비 : 5,913백만원 (국비 70%, 군비 30%) - 2014년 예산 : 4,485백만원(국비 3,140, 군비 1,345) ○ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2016. 6 / 3개년

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-65〕

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)		수도사업소장 김영철 하수도담당 위계륙 지방환경7급 김영미 (860 - 0746)
③정책사업명	하수관거 BTL 임대료(국비)
④선정기준	민간투자 협약사업		⑤사업기간		2011. 3～ 2031. 3
⑥주요내용	□ 사업배경 ○ 열악한 우리군 재정 형편을 감안하여 민간이 선투자하고 우리군이 임대하는 사업으로 단기간 수질개선 및 깨끗한 시가지 환경 조성 □ 추진계획 ○ 사업대상 : 장흥군 장흥, 관산, 대덕, 회진 소재지 일원 ○ 사 업 량 : 관로 L= 76.0㎞ ○ 상환사업비 : 75,273백만원(국비 70%, 군비 30%) / 년간 3,764백만원 ○ 상환기간 : 2011. 3. 19 ~ 2031. 3. 18(20년간) ○ 사업시행자 : (주)장흥친환경

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-66〕

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)		수도사업소장 김영철 하수도담당 위계륙 지방환경7급 김영미 (860 - 0746)
③정책사업명	하수관거 및 하수종말처리장(BTO) 위탁운영
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2011. 3. ～ 2031. 3.
⑥주요내용	□ 사업배경 ○ 민간의 전문기술로 하수처리장 및 하수관거시설을 관리 하여 하천 수질개선 및 깨끗한 시가지 조성 □ 추진계획 ○ 대상시설 : 4개소(장흥, 관산, 대덕, 회진) ○ 시설용량 : 6,400톤/일(장흥 4,400, 관산 600, 대덕 800, 회진 600) ○ 운 영 비 : 연간 2,213백만원(군비) / 하수관거 282, 처리장 1,931 (총운영비 44,245백만원 / 하수관거 5,632 , 처리장 38,613) ○ 위탁기간 : 2011. 3. 19. ～ 2031. 3. 18. / 20년간 ○ 운영업체 : (주)장흥친환경 / 전문운영사 (주)한미엔텍

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-67〕

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)		수도사업소장 김영철 하수도담당 위계륙 지방시설6급 박신주 (860 - 0747)
③정책사업명	안양면 하수관거 정비사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2014.6.～2017.6.
⑥주요내용	□ 사업배경 ○ 안양 면단위 하수처리장과 연계되는 하수관거 정비 사업으로 생활하수의 통합처리로 투자 효율성 증대 및 득량만 수질개선 ○ 주민들의 공중위생 및 생활환경 개선으로 주민편익 제공 □ 추진계획 ○ 사업대상 : 전남 장흥군 안양면 기산리 외 14개 마을 ○ 사업내용 : 하수관거 L=21.3㎞, 배수설비 617가구 - 15개마을: 기산,동계,비동,등촌,월암,여암,주교,수양,고당,청송,운정,모령,풍암,싱운,요곡 ○ 총사업비 : 6,400백만원(국비 4,480 지방비 1,920) - 2014년 : 1,137백만원(국비 796, 군비 341) ○ 사업기간 : 2014. 6. ~ 2017. 6. / 3개년

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-68〕

①사업부서	수도사업소	②담당자 (연락처)		수도사업소장 김영철 위생환경담당 위계륙 지방기계6급 위성호 (860 - 0451)
③정책사업명	분뇨처리 노후시설 개량사업
④선정기준	10억원이상 사업		⑤사업기간		2014.04.24 ~ 2014.12.23
⑥주요내용	○ 추진배경 : 분뇨처리시설의 노후화로 적정분뇨처리 애로 ○ 추진상황 - 총사업비 : 1,520백만원 - 2012.02 : 추진계획 수립 - 2012.12 : 실시설계비 확보(36백만원) - 2013.06 : 실시설계 완료 - 2013.12 : 사업비확보(1,484백만원) - 2014.02 : 재원협의 완료(영산강유역환경청) - 2014.04 : 전남도 계약심사 완료 - 2014.04 : 공사입찰 (남영건설) - 2014.4.24 : 착공계 제출 - 2014.04 : 관급자재 계약의뢰(675백만원)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-69〕

①사업부서	로하스타운조성사업소	②담당자 (연락처)		로하스타운조성사업소장 박광규 로하스조성담당 김안곤 지방시설7급 김군창 (860 - 0535)
③정책사업명	정남진 로하스타운 조성
④선정기준	민관투자 협약사업		⑤사업기간		2010~2019
⑥주요내용	◦추진배경 - 자연환경속에서 전원생활로 건강한 삶을 추구하는 은퇴자, 귀농․귀촌자 등을 대상으로 친환경 생태휴양도시 조성 ◦사업현황 - 위 치 : 장흥군 안양면 기산리, 비동리 일원 - 조성규모 : A = 233만㎡ / 유입인구 3,000명 (1,500세대) - 사 업 비 : 3,600억원 ⇒ 민․관 공동개발방식 - 주요시설 : 주택(목조, 한옥 등), 의료․ 교육시설, 생활 편의시설 등 ◦추진사항 - ‘11. 12월 : 개발촉진지구 지정 변경 승인(국토해양부) - ’12. 3. 21. : 개발촉진지구 개발계획 변경 승인(전라남도) - ‘13. 7. 22. : 민간사업자 평가 및 선정 - ‘13. 9. 12. : 투자협약체결 ⇒ 전라남도, 장흥군, 랜드러버스코리아(주), 대우산업개발(주), (주)대명기술개발 - ’13. 12. 19. : 정남진 로하스타운 기공식 개최 - ’14. 2월~5월 : 1단계지구 실시설계, 시범지구 분양 홍보 모델하우스․홍보관 건립 - ’14. 7월 : 시범지구(43세대) 토목공사 착공 ◦추진계획 - 시범지구(43세대) ⇒ ’14. 10월 건축공사 착공 / ’14. 12월 입주 예정 ※ 모델하우스(37평) 및 홍보관(58평) 건립 운영중 - 1단계지구(116세대) ⇒ 실시설계 및 행정 인·허가 협의(지구단위계획, 환경, 산지, 농지 전용 등) ⇒ ’14. 11월 착공 및 사업추진 (’15. 10월 입주예정) ※ ’15년 이후 매년 200~250세대 추진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

〔등록번호 2014-70〕

①사업부서	로하스타운조성사업소	②담당자 (연락처)		로하스타운조성사업소장 박광규 로하스조성담당 김안곤 지방시설7급 김군창 (860 - 0535)
③정책사업명	로하스타운 단지도로 개설공사
④선정기준	총사업비 10억원 이상 사업		⑤사업기간		2014~2016
⑥주요내용	◦추진배경 - 정남진 로하스타운 지구의 원활한 교통소통과 효율적인 개발 사업 추진을 위한 주도로 및 1단계지구 진입도로 개설 ◦사업현황 - 위 치 : 장흥군 안양면 기산리, 비동리 일원 - 사업개요 : 주도로 : L=1,950m(B=23.2m) / 2,250? 1단계지구 진입도로 : L=300m(B=12.0m) - 사 업 비 : 2,700백만원 (군비100%) ◦추진사항 - ‘14. 2. 6. : 실시설계 용역 시행 - ’14. 2. 24. : 실시설계 용역 착공 - ‘14. 5. 7. : 소규모 환경영향평가, 사전재해영향성 검토용역 시행 - ‘14. 6월 : 소규모 환경영향평가, 사전재해영향성 검토용역 관련부서 협의(영산강유역환경청, 안전건설과) - ‘14. 8월 : 주도로 및 1단계지구 진입도로 실시설계 및 환경영향평가 용역 완료 ◦추진계획 - ‘14. 9월 : 단지도로 개설공사 시행