정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-01	담당부서 작 성 자	(장흥군 기획감사실) (진승현 / 061-860-0215)
정 책 명	군 청사부지 무상양여 추진 (완료)
사업개요	❏ 추진배경 ◦ 군 본청 및 의회동 청사부지 국유지로 2011. 12. 28이후부터 매년 대부료 납부 등 열악한 군 재정 부담 초래 ◦ 기획재정부 소관의 국유지인 군 본청 청사부지 무상양여 ❏ 부지현황 : 장흥읍 건산리 715-11 등 3필지 / 대지 / 6,648㎡ ❏ 추진기간 : ’14. 12. ~ ’15. 6. ❏ 주요내용 ◦ 군 청사부지 52년만에 무상으로 돌려 받음 ◦ 본청 부지 1필지와 의회동 부지 2필지 포함한 6,648㎡ 무상양여 ◦ 실거래가 기준 83억원 매입비용 절감(매년 임대료 66백만원)
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14. 12. 4. : 무상양여 협의를 위한 TF팀 구성 및 자료수집 - 관련자 : 기획감사실 담당자 최용담, 기획담당 김장용, 기획감사실장 이재희, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’15. 4. 23. : 본청 청사부지 무상양여 신청(군→기획재정부) - 관련자 : 기획감사실 담당자 최용담, 기획담당 김장용, 기획감사실장 이재희, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’15. 5. 7. : 본청 청사부지 무상양여 승인(기획재정부→군) - 관련자 : 기획감사실 담당자 최용담, 기획담당 김장용, 기획감사실장 이재희, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’15. 5. 11. : 본청 청사부지 등기이전 완료 - 관련자 : 재무과 재산관리담당 백창선, 재무과장 이순임 ◦ ’15. 5. 20. : 의회동 청사부지 무상양여 신청(군→기획재정부) - 관련자 : 기획감사실 담당자 최용담, 기획담당 김장용, 기획감사실장 이재희, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’15. 6. 2. : 의회동 청사부지 무상양여 승인(기획재정부→군) - 관련자 : 기획감사실 담당자 최용담, 기획담당 김장용, 기획감사실장 이재희, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’15. 6. 11. : 의회동 청사부지 등기이전 완료 - 관련자 : 재무과 재산관리담당 백창선, 재무과장 이순임

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-02	담당부서 작 성 자	(장흥군 기업지원과) (김광민 / 061-860-0387)
정 책 명	통합의학센터 건립(완료)
사업개요	❏ 추진배경 ◦ 통합의료의 정책적, 제도적인 제약으로 인해 양․한방 보완대체요법의 통합모델이 부재한 상황에서 ◦ 통합의료 진료서비스 제공, 교육, 연구기능을 유기적으로 수행하는 대한민국 최초의 통합의료 전문 시설을 건립 ❏ 추진기간 : 2012 ~ 2016년 ❏ 총사업비 : 25,184백만원 ❏ 주요내용 : 통합의학 연구, 교육, 임상적용을 위한 인프라구축
추진경과 및 사업 관련자	❏ 추진경과 ◦ ’12. 1. 4. : 통합의료센터 건립 사업 확정 및 국비 확보(보건복지부) - 보건복지부 주무관 김성훈, 서기관 정은영, 보건산업정책과장 정호원 - 전남도 보건한방과 주무관 노향미, 의약관리담당 강영구, 보건한방과장 이해구 - 장흥군 기업지원과 주무관 하현옥, 통합의료산업담당 박옥란, 기업지원과장 김선재 ◦ ’12. 3. 6. : 통합의료센터 건립‧운영 관련 업무 협약 - 전남도 보건한방과 주무관 용승민, 의약관리담당 강영구, 보건한방과장 이해구, 보건복지여성국장 배양자, 도지사 박준영 - 장흥군 기업지원과 주무관 하현옥, 통합의료산업담당 박옥란, 기업지원과장 김선재, 장흥군수 이명흠 - 연세대세브란스병원 교수 이덕철, 기획관리실장 이은직, 의료원장 이철 ◦ ’12. 4. 13. : 기본계획수립 용역 최초보고회 - 장흥군 기업지원과 주무관 하현옥, 통합의료산업담당 박옥란, 기업지원과장 김선재, 장흥군수 이명흠 - 전남도 보건한방과 주무관 용승민, 의약관리담당 강영구, 보건한방과장 이해구 - 한국보건산업진흥원 의료산업정책단장 좌용권, 병원경영 연구팀장 오종희, 연구원 박영철, 연구원 이지선

추진경과 및 사업 관련자

◦ ’12. 1. 4. : 통합의료센터 건립 사업 확정 및 국비 확보(보건복지부)

- 보건복지부 김성훈 주무관, 정은영 서기관, 정호원 과장

- 전남도 보건한방과 노향미 주무관, 강영구 의약관리담당, 이해구 과장

- 장흥군 기업지원과 하현옥 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장

◦ ’12. 3. 6. : 통합의료센터 건립‧운영 관련 업무 협약

- 전남도 보건한방과 용승민 주무관, 강영구 의약관리담당, 이해구 과장,

배양자 국장 , 박준영 도지사

- 장흥군 기업지원과 하현옥 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장, 이명흠 군수

- 연세대세브란스병원 이덕철 교수, 이은직 기획관리실장, 이철 의료원장

◦ ’12. 4. 13. : 기본계획수립 용역 최초보고회

- 장흥군 기업지원과 하현옥 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장, 이명흠 군수

- 전남도 보건한방과 용승민 주무관, 의약관리담당 강영구, 이해구 과장

- 한국보건산업진흥원 좌용권 의료산업정책단장, 오종희 병원경영연구팀장,

박영철 연구원, 이지선 연구원

◦ ’13. 1. ~ 7. : 센터 기능 확대 및 총사업비 조정

- 장흥군 기업지원과 김근형 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장

- 전남도 보건한방과 용승민 주무관, 강영구 통합의료담당, 이해구 과장

- 보건복지부 보건산업정책과 윤휘순 주무관, 전은정 사무관

◦ ’13.  8. : 기본‧실시설계용역 PQ 추진(조달청)

- 장흥군 기업지원과 김근형 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장

- 전남도 보건한방과 용승민 주무관, 박원홍 통합의료담당, 장문성 과장

◦ ’13.  8. : 기본‧실시설계용역 PQ 추진(조달청)

- 장흥군 기업지원과 김근형 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장

- 전남도 보건한방과 용승민 주무관, 박원홍 통합의료담당, 장문성 과장

◦ ’13. 10. : 기본‧실시설계용역 착수

- 장흥군 기업지원과 김근형 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장

- 간삼건축사 이태민 본부장, 김태집 대표이사

◦ ’13. 11. : 경제성 검토(VE) 용역 착수

- 장흥군 기업지원과 김근형 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장

- 유탑엔지니어링 김학주 차장, 양병범 대표이사

추진경과 및 사업 관련자	◦ ’13. 12. : 소규모 환경영향평가 용역 착수 - 장흥군 기업지원과 김근형 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장 - ㈜다솔 고준일 이사, 최영태 대표이사 ◦ ’14. 2. 26. : 기본실시설계 계획설계 보고 - 장흥군 기업지원과 김근형 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장, 윤승중 부군수, 이명흠 군수 - 전남도 보건한방과 오세정 주무관, 강미정 통합의료담당, 강영구 과장 - 간삼건축사 김영민 실장, 이태민 본부장 ◦ ’14. 3. ~7. : 기본설계 관련 총사업비 조정 협의 - 장흥군 기업지원과 김근형 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장 - 전남도 보건한방과 오세정 주무관, 강미정 통합의료담당, 강영구 과장 - 보건복지부 보건산업정책과 안진모 주무관, 장만기 주무관, 최신광 사무관, 신꽃시계 과장 - 간삼건축사 김영민 실장, 이태민 본부장 ◦ ’14. 7. 4. : 도 공공디자인 심의 - 장흥군 기업지원과 김근형 주무관, 박옥란 통합의료산업담당, 김선재 과장 - 전남도 보건한방과 오세정 주무관, 강미정 통합의료담당, 강영구 과장 - 간삼건축사 김영민 실장, 이태민 본부장 ◦ ’14. 11. 4. : 중앙부처(기획재정부, 보건복지부) 방문 - 통합의학센터 건립 관련 총사업비 조정 ◦ ’14. 11. 20. : 통합의학센터 건립공사 인허가 신청 - 군 열린민원과 제출(’15. 1. 18일 허가 완료) ◦ ’14. 11. ~ ’15. 3. : 조례 제정 - 장흥군 통합의학센터 설치 및 운영에 관한 조례 제정 ◦ ’14. 11. ~ 12. : 통합의학센터 건립 발주 협의 - 기본계획 및 실시설계 적정성 검토(대전 조달청) - 조달청 협의 완료 후 보건복지부에 총사업비 조정(3회)

추진경과 및 사업 관련자	◦ ’14. 12. 15. : 통합의학센터 건립공사 총괄계약 의뢰 - 분야별(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등) 의뢰 ◦ ’14. 12. 19. : 통합의학센터 건립공사 관련 협의 - 녹색건축인증 신청(한국생산성본부 인증원) - 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청((재)한국장애인개발원) ◦ ’15. 1. ~ 2. : 통합의학센터 민간위탁 관련 관심병원 방문 ◦ ’15. 1. 20. : 통합의료센터 기본 및 실시설계용역 준공 ◦ ’15. 2. : 통합의학센터 건립공사 건설사업관리용역 협의 - 건설사업관리용역 도 계약심사 : ’15. 2. 11. ~ 2. 26. - 건설사업관리용역 일상감사 : ’15. 2. 23. ~ 2. 27. ◦ ’15. 3. : 통합의학센터 건립공사 추진 - 통합의학센터 분야별(건축, 전기, 통신, 소방) 계약체결 : ’15. 3. 3. ◦ ’16. 3. 22. : 통합의학센터 건립 및 위탁운영 추진상황 협의(도) 출장결과보고 ◦ ’16. 5. 17. : 통합의학센터 건립공사 총사업비 자율조정 협의(보건복지부) 출장 ◦ ’16. 6. 15. : 통합의학센터 총사업비 자율조정 한도액 및 낙찰차액 증빙자료 제출 ◦ ’16. 6. 16. : 통합의학센터 총사업비 낙찰차액 변경사항 서류 제출 ◦ ’16. 7. 6. : 통합의학센터 건립 공사기간 연장 계획(안) ◦ ’16. 7. 8. : 통합의학센터 건립 지원사업비 자율조정 검토의견 제출 ◦ ’16. 7. 9. : 통합의학센터 건립 지원사업비 자율조정 검토의견 제출 ◦ ’16. 7. 11. : 통합의학센터 건립공사 자율조정 협의 (보건복지부) 출장 ◦ ’16. 7. 18. : 통합의학센터 건립 총사업비 자율조정 보완자료 제출 ◦ ’16. 7. 21. : 통합의학센터 건립 총사업비 자율조정 수정 및 추가자료 제출

추진경과 및 사업 관련자	◦ ’16. 7. 26. : 통합의학센터 건립공사 자율조정 협의 (보건복지부) 출장 ◦ ’16. 7. 28. : 통합의학센터 건립 총사업비 자율조정 보완자료 제출 ◦ ’16. 7. 29. : 통합의학센터 건립공사 자율조정 협의 (보건복지부) 출장 ◦ ’16. 8. 10. : 통합의학센터 건립공사 자율조정 협의 (기재부, 보건복지부) 출장 ◦ ’16. 8. 11. ∼ 12. : 통합의학센터 건립공사 자율조정 (변경설계 검토의견)협의 (조달청-김재상주무관)출장 ◦ ’16. 8. 19. : 통합의학센터 건립공사 자율조정 (변경설계 검토의견) 협의 (조달청-이종태주무관) 출장 ◦ ’16. 8. 23. : 통합의학센터 건립공사 설계변경 검토의견 회신 협조요청 (조달청-이종태주무관) ◦ ’16. 8. 29. : 통합의학센터 건립공사 설계변경 검토의견 회신 (조달청→장흥군) ◦ ’16. 8. 30. : 통합의학센터 건립공사 설계변경(총사업비 자율조정) 승인 요청 (장흥군→전라남도) ◦ ’16. 9. 20. : 통합의학센터 건립공사 설계변경 협의 (기재부, 보건복지부) 출장 ◦ ’16. 9. 22. : 통합의학센터 건립공사 설계변경 검토 협의 (조달청-이종태주무관) 출장 ◦ ’16. 9. 26. : 총사업비 자율조정(설계변경) 세부현황 메일 송부→(주)간삼건축 ◦ ’16. 10. 4. : 설계사(4명) 실정보고서 검토(현장사무실) ◦ ’16. 10. 7. : 설계사 설계변경 실정보고서 검토의견(답변) 메일 회신 ◦ ’16. 10. 11. : 설계사 설계변경(자율조정)에 따른 검토 의견서 회신(1차) - 설계변경 실정보고 검토 및 현지 확인(2주 소요) ◦ ’16. 10. 24. : 설계사 설계변경(자율조정)에 따른 검토의견서 회신(2차) ◦ ’16. 10. 26. : 통합의학센터 건립 설계변경(총사업비 자율조정) 요청 검토 결과 알림

추진경과 및 사업 관련자	◦ ’16. 10. 26. : 통합의학센터 건립공사 설계변경(자율조정) 최종 승인 요청 ◦ ’16. 11. 7. : 통합의학센터 건립공사 설계변경(자율조정) 메일 송부 ◦ ’16. 11. 11 : 통합의학센터 건립공사 설계변경(자율조정-암반) 승인 요청 ◦ ’16. 11. 14 : 통합의학센터 건립공사 설계변경(자율조정-암반) 메일 송부 ◦ ’16. 11. 21 : 통합의학센터 건립공사 설계변경(자율조정-암반) 협의 출장 ◦ ’16. 11. 7. : 통합의학센터 건립공사 설계변경(자율조정) 최종 검토의견서 자료 메일 송부 - 보건복지부 재정운영담당관실 심재덕, 기재부 총사업비관리과 최두한 ◦ ’16. 12. 6. : 통합의학센터 건립공사 설계변경(자율조정) 승인 ◦ ’16. 12. 12. : 설계변경(최종) ◦ ’16. 12. 20. : 공사준공 ◦ 건설사업관리용역 추진 - 건설사업관리용역 공고 : ’15. 3. 3. / 3. 18.(마감일) - 건설사업관리용역 서면질의 및 회신 : ’15. 3. 9. ~ 3. 10. - 건설사업관리용역 참가등록 : ’15. 3. 12. - 건설사업관리용역 사업수행평가 기술자 면접 : ’15. 3. 24. - 사업수행평가 기술자 중첩도 평가 : ’15. 3. 25. ~ 3. 31. - 건설사업관리용역 계약 의뢰 : ’15. 4. 6. - 건설사업관리용역 계약 : ’15. 4. 22. - 건설사업관리용역 착수 : ’15. 4. 27. - 건설사업관리용역 완료 : ’16. 12. 31.

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 기업지원과장 김선재

- 최종 결재자 : 기업지원과장 이승주

◦ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과 장	이승주	5급	’15. 3. 16. ~	업무총괄
담 당	고문희	6급	’14. 11. 3. ~	업무담당
담당자	김민성	7급	’14. 11. 3. ~	업무담당자
〃	김광민	7급	’16. 1. 1. ~	〃

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 기업지원과

- 기업지원과장     : 지방행정사무관 이승주

- 통합의료산업담당 : 지방간호주사   고문희

- 담 당 자         : 지방시설주사보 김광민

◦ 설 계 자 : (주)간삼건축종합건축사사무소 김태집

◦ 시 공 자

- 건축공사 : 대도종합건설(주) 김영태

- 전기공사 : (주)에스에이치개발 박성훈

- 통신공사 : (주)에스포스텔레콤 이상수

- 소방공사 : (주)21세기엔지니어링 김영식

◦ 감리자

- 건축(기계, 토목, 조경), ㈜선진엔지니어링 김동수 / ㈜우영엔지니어링 손상미

- 통신 : ㈜조인테크 박진범

- 소방 : 정도엔지니어링 이승호

추진실적	◦ ’13. 10 . 1. ~ ’15. 1. 20. : 통합의료센터 기본 및 실시설계용역 추진 ◦ ’14. 12. 15. : 통합의학센터 건립공사 총괄계약 의뢰 - 분야별(건축, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방 등) 의뢰 ◦ ’14. 12. 19. : 통합의학센터 건립공사 관련 협의 - 녹색건축인증 신청(한국생산성본부 인증원) - 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청((재)한국장애인개발원) ◦ ’15. 1. ~ 2. : 통합의학센터 민간위탁 관련 관심병원 방문 ◦ ’15. 2. : 통합의학센터 건립공사 건설사업관리용역 협의 - 건설사업관리용역 도 계약심사 : ’15. 2. 11. ~ 2. 26. - 건설사업관리용역 일상감사 : ’15. 2. 23. ~ 2. 27. ◦ ’15. 3. : 통합의학센터 건립공사 추진 - 통합의학센터 분야별(건축, 전기, 통신, 소방) 계약체결 : ’15. 3. 3. - 공사기간 : ’15. 3. 10. ~ ’16. 12. 20. ◦ 건설사업관리용역 추진 - 건설사업관리용역 공고 : ’15. 3. 3. / 3. 18.(마감일) - 건설사업관리용역 서면질의 및 회신 : ’15. 3. 9. ~ 3. 10. - 건설사업관리용역 참가등록 : ’15. 3. 12. - 건설사업관리용역 사업수행평가 기술자 면접 : ’15. 3. 24. - 사업수행평가 기술자 중첩도 평가 : ’15. 3. 25. ~ 3. 31. - 건설사업관리용역 계약 의뢰 : ’15. 4. 6. - 용역기간 : ’15. 4. 27 ~ ’16. 12. 31.

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-03	담당부서 작 성 자	(장흥군 기업지원과) (김광민 / 061-860-0387)
정 책 명	장평농공단지 폐수종말처리시설 설치사업(완료)
사업개요	❏ 추진배경 ◦ 장흥의 지역산업 기반구축 및 고용창출, 지역경제 활성화 등 지역균형발전 도모 ◦ 농공단지내 입주업체의 폐수를 공동으로 처리함으로써 장평천 수질오염 방지 및 주민 민원 해소로 신뢰행정 구현 ❏ 추진기간 : ’14. ~ ’16. ❏ 총사업비 : 4,758백만원 ❏ 주요내용 : 폐수종말처리시설 설치(300㎥/일)
추진경과	❏ 추진경과 ◦ 장평농공단지 폐수종말처리시설 기본계획 승인 : ’13. 6. ◦ 실시설계 용역 착수 : ’14. 7. ◦ 처리시설공법 제안 공고 및 제출 : ’14. 9. ◦ 공법선정위원회개최 및 공법선정(선회와류식공법) : ’14. 10. ◦ 폐수종말처리시설 국비 추가 확보 : ’14. 12. (총4,758백만원 / ’14년 500백만원, ’15년 4,258백만원) ◦ 영산강유역환경청 협의요청(설계자문 및 기술검토) : ’15. 3. ◦ 영산강유역 환경청 협의완료 : ’15. 7. ◦ 실시설계용역 준공 : ’15. 8. ◦ 전라남도 계약심사 : ’15. 8. ~ 9. ◦ 장평폐수종말처리시설 설치사업(분야별) 공사 계약체결 : ’15. 10. ◦ 건설사업관리용역(구 전면책임감리) 도 계약심사 완료 : ’15. 10. ◦ 건설사업관리용역 사업수행평가 공고 및 선정 : ’15. 11. ~ 12. ◦ 건설사업관리용역 계약체결 완료(신오엔지니어링) : ’15. 12. ◦ 장평폐수종말처리시설 설치사업(분야별) 공사 착공 : ’15. 10. 20. ◦ 장평폐수종말처리시설 낙찰차액 사용승인 신청 : ’16. 9. 29. ◦ 장평폐수종말처리시설 낙찰차액 사용승인 : ’16. 10. 13. ◦ 장평폐수종말처리시설 설치사업(분야별) 설계 변경 : ’16. 10. 18. ◦ 장평폐수종말처리시설 설치사업(분야별) 공사 준공 : ’16. 11. 2. ◦ 건설사업관리용역 착수 : ’15. 12. 10. ◦ 건설사업관리용역 완료 : ’16. 10. 24.

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

◦ 최초 입안자 및 최종 결재자

- 최초 입안자 : 기업지원과장 김선재

- 최종 결재자 : 기업지원과장 이승주

◦ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과 장	이승주	5급	’15. 3. 16. ~	업무총괄
담 당	고문희	6급	’14. 11. 3. ~	업무담당
담당자	김민성	7급	’14. 11. 3. ~	업무담당자
〃	김광민	7급	’16. 1. 1. ~	〃

다른기관 또는

민간인 관련자

◦ 기업지원과

- 기업지원과장     : 지방행정사무관 이승주

- 통합의료산업담당 : 지방간호주사   고문희

- 담당자           : 지방시설주사보 김광민

◦ 설 계 자 : (주)건화 최진상

◦ 감 리 사 : ㈜신오엔지니어링 정병연 / ㈜경호엔지니어링 조영수

◦ 시 공 사

- 건축공사       : 백산건설(주) 백도인

- 전기공사       : ㈜신지전력 강효중

- 통신공사       : (합)에이시에스 김재호

- 소방공사       : (합)대선소방설비산업 박선영

- 폐기물처리용역 : 오광개발(주) 김완석

추진실적	◦ 장평농공단지 폐수종말처리시설 기본계획 승인 : ’13. 6. ◦ 실시설계 용역 착수 : ’14. 7. ◦ 공법제안 공고 : ’14. 9. ◦ 공법 선정 완료(선회와류식공법) : ’14. 10. ◦ 폐수종말처리시설 국비 추가 확보 : ’14. 12. (총4,916백만원 / ’14년 500백만원, ’15년 4,416백만원) ◦ 영산강유역환경청 협의요청(설계자문 및 기술검토) : ’15. 3. ◦ 영산강유역 환경청 협의완료 : ’15. 7. ◦ 실시설계용역 준공 : ’15. 8. ◦ 전라남도 계약심사 : ’15. 8. ∼ 9. ◦ 장평폐수종말처리시설 설치사업(분야별) 공사 계약체결 : ’15. 10. - 공사기간 : ’15. 12. 10. ~ ’16. 11. 2. ◦ 건설사업관리용역(구 전면책임감리) 도 계약심사 완료 : ’15. 10. ◦ 건설사업관리용역 사업수행평가 공고 및 선정 : ’15. 11. ~ 12. ◦ 건설사업관리용역 계약체결 완료(신오엔지니어링) : ’15. 12. - 용역기간 : ’15. 10. 20. ~ ’16. 10. 24.

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-04	담당부서 작 성 자	(장흥군 기업지원과) (김경희 / 061-860-0788)
정 책 명	장흥바이오식품산업단지 조성(완료)
사업개요	◦ 추진배경 - 장흥의 지역산업 기반구축 및 고용창출, 지역경제 활성화 등 지역균형발전 도모 ◦ 사업개요 - 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 해당리 일원 - 면 적 : 2,892,051㎡ - 사업기간 : ’08. 1. 16. ~ ’15. 12. 31. - 사업시행자 : 전남개발공사 / 국제건설산업, 신한종합건설 - 사 업 비 : 164,406백만원 - 유치업종 : 음․식료품, 화학물질 및 화학제품, 금속가공제품 등 - 분양가격 : 3.3㎡당 328천원
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’08. 12 : 일반산업단지 지정고시 및 개발계획 승인고시 - 관련자 : 기업지원과 산단조성담당(사무분장 : 2008. 2. 15) 담당자 시설8급 한만형, 행정6급 강신대, 행정5급 이재희 ◦ ‘09. 05 : 일반산업단지 실시계획 승인고시 - 관련자 : 기업지원과 산단조성담당(사무분장 : 2009. 1. 2) 담당자 시설7급 정종훈, 행정6급 강신대, 행정5급 이재희 ◦ ‘12. 05 : 장흥바이오식품산업단지 1단계 준공 - 관련자 : 녹색전략개발사업소 산단개발담당 담당자 시설7급 김선범, 행정6급 김형채, 시설5급 박광규

추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14. 11. : 장흥 바이오식품산업단지 2단계 공사준공 - 관련자 : 기업지원과 투자유치계(사무분장 : 2014. 7. 1) 담당자 시설7급 김선범, 행정6급 정봉식, 행정5급 김선재 - 관련자 : 기업지원과 투자유치계(사무분장 : 2014. 11. 3) 담당자 시설7급 김광민, 행정6급 김안곤, 행정5급 김선재 ◦ ’15. 6 : 장흥 바이오식품산업단지 2단계 사업준공 신청 - 관련자 : 기업지원과 투자유치계(사무분장 : 2015. 3. 16) 담당자 시설7급 김광민, 행정6급 김안곤, 행정5급 이승주 ◦ ’16. 03. 17 : 장흥 바이오식품산업단지 2단계 준공인가 승인 - 관련자 : 기업지원과 투자유치계(사무분장 : ’16. 1. 1) 담당자 시설9급 장희수, 행정6급 선보언, 행정5급 이승주

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-05	담당부서 작 성 자	(장흥군 기업지원과) (김광민 / 061-860-0387)
정 책 명	장흥농공단지 페수종말처리시설 설치공사(완료)
사업개요	❏ 추진배경 - 장흥농공단지 발생 폐수의 적정 처리로 입주여건 개선 및 공공수역 수질 오염 방지 ❏ 추진기간 : ’12. 12. 2. ~ ’15. 12. 31. ❏ 총사업비 : 5,061백만원 ❏ 주요내용 - 장흥농공단지 오폐수처리시설 설치 - 시설용량 : 600㎥/일 (1단계 300, 2단계 300)
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’12. 11. : 기본 및 실시설계 용역 착수 - 관련자 : 녹색전략개발사업소 사무관 박광규 소장, 담당자 김선범 ◦ ’13. 11. : 처리공법 기술사용 및 세부사업 시행 협약 - 관련자 : 녹색전략개발사업소 사무관 박광규 소장, 담당자 김선범 ◦ ’13. 12. : 폐수종말처리시설 설치공사 착공 - 관련자 : 녹색전략개발사업소 사무관 박광규 소장, 담당자 김선범 ◦ ’15. 12. : 폐수종말처리시설 설치공사 준공 - 관련자 : 기업지원과 사무관 이승주 과장, 담당자 김광민

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-06	담당부서 작성자	기업지원과 기업지원담 (김봉열 / 061-860-0352)
정 책 명	장흥 장평 제2농공단지 조성사업
사업개요	◦ 추진배경 - 장평농공단지 공장면적 협소 및 집적화․규모화 등 지역경제활성화의 근간이 되는 기업유치 및 지역균형발전을 위한 농공단지 확대로 고용창출과 지역경제회생을 위한 재도약 발판 마련 ◦ 추진기간 : 2012. ~ 2014. 8. 14 ◦ 총사업비 : 3,611백만원 ◦ 면 적 : 46,752㎡ ◦ 주요내용 - 유치업종 : 비금속광물 제품제조업, 전기장비제조업, 기타운송장비 제조업
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’10. 5. 3. : 타당성 검토용역 / (사)지역경제발전연구원 - 관련자 : 기업지원과 이광님, 기업지원담당 김한석, 기업지원과장 이재희 ◦ ’11. 6. 2 : 문화재 지표조사 용역 / (재)전남문화재연구원 - 관련자 : 기업지원과 선승규, 기업지원담당 이재천, 기업지원과장 이재희 ◦ ’11. 6.16: 지구단위계획 수립용역 / 금광기업(주) - 관련자 : 기업지원과 선승규, 기업지원담당 이재천, 기업지원과장 이재희 ◦ ’11.11.11 : 실시설계용역 - 관련자 : 기업지원과 선승규, 기업지원담당 이재천, 기업지원과장 이재희

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-07	담당부서 작 성 자	주민복지과 / 노인복지관운영담당 송민주 / 860-7801
정 책 명	장흥군 노인복지관 건립사업
사업개요	◦ 추진배경 : 고령화시대를 맞이하여 어르신 노후복지 제고 ◦ 추진기간 : ’15. 12. ~ ’16. 12. ◦ 총사업비 : 4,863백만원(국 378, 도 280, 군 4,205) ◦ 사 업 량 : 지하 1층, 지상 2층(연면적 1,846㎡, 부지2,631㎡) ◦ 위 치 : 장흥읍 동교1길 57 ◦ 주요시설 : 프로그램실, 경로식당, 대강당, 사무실 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14.08.18. : 장흥군노인복지관 건립 추진계획 수립 - 장흥군 주민복지과 담당자 하현옥, 담당 추상이, 과장 안규자 ◦ ’14.12. : 부지매입 - 장흥군 주민복지과 담당자 하현옥, 담당 송남신, 과장 이재천 ◦ ’15.09.21. : 전라남도 경관디자인 심의 완료 - 장흥군 주민복지과 담당자 하현옥, 담당 송남신, 과장 이재천 ◦ ’15.10.13. : 기본 및 실시설계 완료 - 장흥군 주민복지과 담당자 하현옥, 담당 송남신, 과장 이재천 ◦ ’15.11.20. : 전라남도 계약심사 완료 - 장흥군 주민복지과 담당자 하현옥, 담당 송남신, 과장 이재천 ◦ ’15.12.29. : 장흥군 노인복지관 착공 - 주민복지과 담당자 하현옥, 담당 송남신, 과장 이재천 ◦ ’16.11.26. : 장흥군 노인복지관 준공 - 주민복지과 담당자 김애숙, 담당 이인흠, 과장 이재천 ◦ ’17.01.17. : 장흥군노인복지관 개관식 - 장흥군 주민복지과 담당 김금옥, 과장 이재천

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-08	담당부서 작 성 자	(장흥군 문화관광과) (조성삼 / 061-860-0527)
정 책 명	작은영화관「정남진시네마」건립운영(완료)
사업개요	❏ 추진배경 : 농어촌지역 주민의 영상문화 향유기회 확대 및 삶의 질 향상 도모 ❏ 추진기간 : ’14. 1. ~ ’15. 10. ❏ 총사업비 : 1,300백만원(국 500, 도 150, 군 650) ❏ 주요내용 - 상영관 2개관 99석(1관 60, 2관 39) 설치 - 매점, 휴게실 등 설치
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14. 1. 24. : 작은영화관 건립사업 문체부 선정 - 관련자 : 문화관광과 담당 김백수, 과장 방해권, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’14. 9. 3. : 작은영화관「정남진시네마」건립 실시설계 - 관련자 : 문화관광과 담당 김백수, 과장 방해권, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’15. 3. 31. : 작은영화관「정남진시네마」건립공사 착공 - 관련자 : 문화관광과 담당 김백수, 과장 김성계, 부군수 서은수, 군수 김성 ◦ ’15. 9. 17. : 작은영화관「정남진시네마」건립공사 준공 - 관련자 : 문화관광과 담당 김영윤, 과장 김성계, 부군수 서은수, 군수 김성 ◦ ’15. 10. 19. : 작은영화관「정남진시네마」건립공사 개관 - 관련자 : 문화관광과 담당 김영윤, 과장 김성계, 부군수 서은수, 군수 김성

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-09	담당부서 작 성 자	(장흥군 문화관광과) (안성용 / 061-860-0228)
정 책 명	동학기념관~토요시장 역사문화 테마거리 조성사업(완료)
사업개요	❏ 추진배경 - 장흥 석대들 사적지 주변마을(남외, 교촌, 충열)의 다양한 자연·문화· 관광자원을 활용하여 창의적이고 특색있는 테마거리를 조성하기 위함 ❏ 추진기간 : ’15. 6. 12. ~ ’15. 8. 18. ❏ 총사업비 : 500백만원(국비 334 군비 143) ❏ 주요내용 - 쾌적한 경관창출을 통한 지역이미지 개성 · 현재 훼손이 심한 보호수 주변, 골목 등을 정비 · 집에 문패 설치, 화훼길 조성, 안내판 설치 - 주민이 안전한 마을 만들기 · CCTV 추가설치로 치안 강화 · 체육시설의 설치 - 지역역량강화를 통한 자생력 강한 마을만들기 · 교촌주민 교육, 선진지 견학 등 지역역량강화 추진
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’15. 3. 13. : “동학기념관~토요시장 역사문화 테마거리계획" 수립 용역시행 - 관련자 : 문화관광과 주무관 최용산, 문화예술담당 김백수, 과장 김성계 ◦ ’15. 4. 23. : '전남농촌활성화지원센터 농촌현장포럼(1차)` - 관련자 : 각마을의 추진위원회 및 마을주민 40여명 ◦ ’15. 7. 8. : 동학기념관~토요시장 역사문화 테마거리 조성사업 계획수립 연장 - 관련자 : 문화관광과 주무관 최용산, 문화예술담당 김영윤, 과장 김성계 ◦ ’15. 8. 21 : 동학기념관~토요시장 역사문화 테마거리 계획수립 완료 - 관련자 : 문화관광과 주무관 최용산, 문화예술담당 김영윤, 과장 김성계

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2015-10

담당부서

작성자

(장흥군 문화관광과)

(전희석/061-860-0380)

정 책 명

제8회 정남진 장흥 물축제(완료)

사업개요

❏ 추진배경

◦ 득량만의 해수, 탐진강의 하천수, 장흥댐의 호수 등 장흥군

특화자원을 대표축제로 개발하여 지역 이미지 브랜드 제고 및

지역경제 활성화에 기여

❏ 추진기간 : 2015. 7. 31.~ 8. 6.(7일간)

❏ 총사업비 : 1,360백만원

❏ 주요내용 : 수상체험프로그램 운영 및 전시․체험 주제관 운영 등

추진경과 및

사업 관련자

❏ 추진경과

◦ 물축제 발전방안 평가보고회 개최                 : 2월

◦ 물축제 기본계획 수립 및 추진위원회 구성         : 3월

◦ 물축제 아이디어 공모․평가                      : 3월

◦ 물축제 행사 대행사 선정 및 계약(문화공방DKB)   : 4월

◦ 물축제장 기반시설물 설치 계획 수립              : 5월

◦ 물축제 행사 개최                                : 7월

❏ 최초 입안자 및 최종 결재자

◦ 최초 입안자 : 지방행정6급  김현순

◦ 최종 결재자 :  군    수     김   성

❏ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
군 수	김 성	-	‘15. 01.～ ’15. 12.	기획안 검토․결정
부군수	서은수	4급	‘15. 01.～ ’15. 12.	기획안 검토․결정
과 장	김성계	5급	‘15. 01.～ ’15. 12.	기획안 검토․결정
담 당	추상이	6급	‘15. 01.～ ’15. 12.	물축제 기획․실행
담당자	김현순	6급	‘15. 01.～ ’15. 12.	물축제 기획․실행

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-11	담당부서 작 성 자	(장흥군 / 문화관광과) (이명록 / 061-860-0229)
정 책 명	탐진강 생태체험장 조성사업(완료)
사업개요	❏ 추진배경 ◦ 지역주민과 관광객들에게 자연생태 환경의 중요성 고취 ◦ 장흥댐 공원의 기반시설과 이용 편의시설 부족하여 보완하고 탐진강의 자연자원을 활용하여 관광활성화에 기여하고자 함 ❏ 추진기간 ◦ 당초 : 2015년 ~ 2016년 / 2년 ◦ 변경 : 2015년 / 1년 ❏ 총사업비 ◦ 당초 : 1,900백만원(국고1,140 지방비 760) ◦ 변경 : 833백만원(국고 500, 지방비 333) ❏ 주요내용 ◦ 당초 : 민물고기 생태체험장, 인공수초, 탐방로, 관찰선, 기반시설, 공동편의시설, 캠핑장테크 ◦ 변경 : 어류생태원, 생태관찰데크, 수목 및 야생화단지, 생태야영장, 설계비 등 기타
추진경과 및 사업 관련자	❏ 문화체육관광부 사업계획 변경 불승인 ◦ 문체부의 사업계획 불승인에 대해 보완 승인을 수차례 요청하였으나, 일부 관광개발 사업의 국비 반환과 관련 정산 처리(국비 반납) 후 승인한다는 문체부의 최종 답변 ◦ 탐진강 생태체험공원조성사업이 불승인으로 처리됨에 따라 2017년 신규사업으로 장흥댐 심천공원 관광자원화 사업 추진 - 사업기간 : ’17년 ~ ’18년 / 2년 - 사 업 비 : 1,000백만원(국비 600, 군비 400) ․ 2017년 333백만원 (국비 200, 군비 133) ◦ 사업내용 : 열매수원 3,864㎡, 놀이마당 조합놀이대 350㎡ 토굴야영장 1식, 관광데크 120m

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-12	담당부서 작성자	문화관광과 문화예술담당 장모창/061-860-0228
정 책 명	장흥 석대들 전적 성역화사업
사업개요	◦ 추진배경 : 동학농민혁명의 사상과 정신을 기리고 체험할 수 있는 산 교육의장으로 활용코자 함 ◦ 추진기간 : 2012 ~ 2015(4년간) ◦ 총사업비 : 13,360백만원(국비 8,020 / 군비 5,340) ◦ 주요내용 : 홍보영상관, 상징조형물, 조경 및 편의시설
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’13. 10. 30 : 성역화사업 1차분 준공 - 관련자 : 문화관광과 과장 방해권, 팀장 이경현, 담당자 : 최용산 ◦ ’14. 10. 26 : 성역화사업 2차분 준공 - 관련자 : 문화관광과 과장 방해권, 팀장 김백수, 담당자 : 최용산 ◦ ’15. 01. 31 : 성역화사업 전시공사 완료 - 관련자 : 문화관광과 과장 김성계, 팀장 김백수, 담당자 : 장모창 ◦ ’15. 04. 26 : 장흥 동학농민혁명기념관 개관 및 운영 - 관련자 : 문화관광과 과장 김성계, 팀장 김백수, 담당자 : 장모창

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-13	담당부서 작성자	문화관광과 문화예술담당 장모창/061-860-0228
정 책 명	국가지정 문화재 보수사업
사업개요	◦ 추진배경 : 선재적 문화재 보수를 통한 전통문화유산 보존 전승 ◦ 추진기간 : 2013 ~ 2014(2년간) ◦ 총사업비 : 1,300백만원(국비 910 / 도비 117 / 군비 273) ◦ 주요내용 : 보림사 남북삼층석탑 및 석등 주변정비사업외 12건
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’13. 05. : 실시설계 완료 - 관련자 : 문화관광과 과장 방해권, 팀장 이경현, 담당자 : 장모창 ◦ ’13. 06. : 현상변경 허가 - 관련자 : 문화관광과 과장 방해권, 팀장 이경현, 담당자 : 장모창 ◦ ’14. 10. : 문화재 보수공사 완료 - 관련자 : 문화관광과 과장 방해권, 팀장 김백수, 담당자 : 장모창

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-14	담당부서 작성자	우든밸리관리사업소장 김백수 목재산업지원담당 이병모 지방행정 8급 정수연 (061-860-0404)
정 책 명	목재전문산업화단지조성사업
사업개요	◦ 추진배경 : 기존 편백숲 우드랜드, 목공예공방등과 연계하여 목재산업 집적화 ◦ 추진기간 : 2013.~2016. (4년간) ◦ 총사업비 : 8,000백만 원 / 국비 50%, 지방비 50% ◦ 주요내용 - 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 우드랜드길 133 - 규 모 : 부지9,080㎡, 연면적 2,873㎡ - 시설물현황 : 홍보전시실, 갤러리카페, 제품제작실, 창업보육실, 세미나실, 연구실, 사무실 등 - 운영방식 : 군 직영 운영 - 주요사업 : 목공예기능인양성, 창업보육, 목제품생산 판매 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14.02.07. : 전문산업화단지 기본 및 실시설계 용역 보고회 개최 - 관련자 : 환경산림과 주무관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 환경산림과장 백형갑 ◦ ’14.04.02. : 목재전문산업화단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역 문제점 및 대책보고 - 관련자 : 환경산림과 주문관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 환경산림과장 백형갑, 경리담당 김주호, 재무과장 김이문, 부군수 윤승중, 군수 이명흠 ◦ ’14.04.03. : 목재전문산업화단지조성사업 기본 및 실시설계 용역 변경 계약 의뢰(사업기간변경 : 증30일) - 관련자 : 환경산림과 주무관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 환경산림과장 백형갑 ◦ ’14.05.21. : 목재전문산업화단지 조성사업 기본 및 실시설계 용역 준공검사 결과 통보 - 관련자 : 환경산림과 주무관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 환경산림과장 백형갑 ◦ 14.06.09. ~ 11. : 목재전문산업화단지 조성사업 전기공사 계약심사 및 결과통보 - 관련자 : 환경산림과 주무관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 환경산림과장 백형갑 ◦ ’14.07.29. : 목재전문산업화단지 조성사업 건축, 전기, 통신, 소방, 지열공사 집행 - 관련자 : 환경산림과 주무관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 환경산림과장 백형갑, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ 14. 7. 31. : 목재전문산업화단지 조성사업 건축, 전기, 통신, 소방,지열공사 계약의뢰 - 관련자 : 환경산림과 주무관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 환경산림과장 백형갑, 주무관 최광석(건축), 건축담당 이영철, 주무관 박일표(통신), 주무관 위성호(기계) ◦ ’14.09.05. : 목재전문산업화단지 조성사업 건축, 전기, 통신, 소방, 지열공사 감리용역 집행 - 관련자 : 환경산림과 주무관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 부군수 윤승중, 주무관 이석배, 주무관 박일표, 주무관 위성호, 주무관 최광석, 환경산림과장 백형갑, 경리담당 김주호, 재무과장 김이문 ◦ ’14.09.11. : 목재전문산업화단지 조성사업 건축, 전기, 통신, 소방, 지열공사 감리용역 계약의뢰 - 관련자 : 환경산림과 주무관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 환경산림과장 백형갑 ◦ ’14.10.24. : 목재전문화산업단지 조성사업 공사추진상황 보고 - 관련자 : 환경산림과 주무관 곽광호, 우드랜드담당 김병수, 환경산림과장 백형갑, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’15.02.09. : 목재전문산업화단지 조성사업 설계변경 검토 및 추진사항 보고 - 관련자 : 환경산림과 주무관 백용전, 우드랜드담당 문봉대, 환경산림과장 백형갑, 주무관 최광석(건축) 부군수 서은수, 군수 김성 ◦ ’15.11.23. : 목재전문산업화단지 조성사업 설계변경 의뢰 - 관련자 : 환경산림과 주무관 백용전, 우드랜드담당 문봉대, 환경산림과장 문재춘 ◦ ’16.05.12. : 공용건축물 건축공사 완료 통보(목재전문산업화단지) - 관련자 : 환경산림과 주무관 박상현, 우드랜드관리담당 문봉대, 환경산림과장 문재춘 ◦ ’17.05.12. : 목재전문산업화단지 조성사업 지적공부 정리 의뢰 - 관련자 : 우드랜드관리사업소 주무관 김광욱, 목재산업담당 이병모, 우든밸리관리사업소장 마영오

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-15		담당부서 작 성 자	(장흥군 환경산림과) (조문호 / 061-860-0666)
정 책 명	자연환경보전이용시설사업(장흥 정남진 생태공원 조성사업)(완료)
사업개요	❏ 추진배경 - 장흥군 생활폐기물 처리시설로서 폐기물 처리시설의 부정적 이미지를 상쇄시키고 시설주변의 환경정화 및 보전을 도모하고 인근지역 주민의 쾌적한 생활환경을 조성하고자 국비 공모사업으로 추진함. ❏ 추진기간 : 2010. 6. 18. ~ 2015. 4. 30 ❏ 총사업비 : 8,000백만원 ❏ 주요내용 : 근린공원 1개소 조성 / 463,665㎡ - 생태하천 1개소, 연못 1개소, 산책로, 쉼터(정자) 2개소, 화장실 1개소
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업추진경과 및 관련자 현황
	2008.08.06 2009.03.03 2009.03.16 2009.12.17 2010.06.18 2011.03.31 2011.04.08 2010.10.27 2010.11.19 2011.06.28 2011.11.21 2011.08.19 2015.04.30	타당성조사 및 기본계획 수립 공유재산 취득 승인 전남도 지방재정투융자 심사 군관리계획 변경결정 입안요청 설계용역 착수 도시계획시설사업 실시계획 인가 신청 관계부서 협의 － 사전재해영향성(04.22), 산지(05.04), 사전환경성검토(06.03) 농업진흥지역 해제(09.09, 도고시 제2011-14호), 농지(11.14) 전라남도 군관리계획 변경결정 고시 공원조성계획 및 지형도면 군 고시 설계용역 준공 실시계획 인가 공사 계약체결 / (주)세운건설 대표 강성찬 준공

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-16	담당부서 작성자	경제정책과 일자리창출담당 (박학균 / 061-860-0328)
정 책 명	정남진 장흥토요시장 시설현대화
사업개요	◦ 추진배경 - 전통시장, 상점가 또는 상권 활성화 구역의 고객․매출증대 및 상권 활성화 - 개장 10년으로 시설의 노후화로 상인 및 관광객 안전도모 ◦ 추진기간 : 2015. ~ 2016. ◦ 총사업비 : 1,667백만 원 ◦ 주요내용 : 아케이트 보수 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’15. 01. : 전남도(2015년 지역발전특별회계 시도자율편성) - 관련자 : 경제과학국 주무관 이병국, 과장 박종필, 국장 김신남 ◦ ’15. 01. : 정남진 장흥토요시장 시설현대화사업 시행 - 관련자 : 경제정책과 주무관 이창옥, 계장 문병길, 과장 노희규 ◦ ’16. 12. : 정남진 장흥토요시장 시설현대화사업 준공 - 관련자 : 경제정책과 주무관 이창옥, 계장 문병길, 과장 노희규

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-17	담당부서 작성자	경제정책과 일자리창출담당 (김남희 / 061-860-0339)
정 책 명	대덕읍 전통시장현대화
사업개요	◦ 추진배경 : 대덕 전통시장 활성화를 위한 시장 재건축사업 및 노후시설 환경개선 ◦ 추진기간 : ’13. 03. ~ ’15. 12. ◦ 총사업비 : 4,216백만 원 ◦ 주요내용 : 재건축 1식 및 아케이드 설치 1식
추진경과 및 사업 관련자	❏ 추진경과 ◦ ’13.~’15. : 전통시장 시설현대화사업 선정 - ’13.∼’14. : 재건축 1식 / 2,930백만원 - ’15. : 막구조 1식 / 1,286백만원 ◦ ’14.05∼’15.12. : 재건축 및 막구조 시설 착공 및 준공 - 위 치 : 대덕읍 거정2길 10(신월리 111번지) - 부지면적 : 5,894㎡ / 연면적 1,292.58㎡ / 점포 24개소 - 막구조물 면적 : 2,604㎡ ❏ 사업관련자 현황 ◦ ’13.03. : 대덕읍 전통시장 현대화사업 실시설계 시행 - 관련자 : 경제정책과 주무관 문선화, 계장 위화선, 과장 박해영 ◦ ’14.04. : 대덕읍 전통시장 현대화사업 총괄 및 1차분 시행 - 관련자 : 경제정책과 주무관 문선화, 계장 문병길, 과장 박해영 ◦ ’15.02. : 대덕읍 전통시장 현대화사업 2차분 시행 - 관련자 : 경제정책과 주무관 김욱, 계장 문병길, 과장 노희규

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-18	담당부서 작성자	경제정책과 도시계획담당 (이지혜 / 061-860-0431)
정 책 명	회진면 소재지종합정비사업
사업개요	◦ 추진배경 - 2013년도 농림수산식품부 주관 일반농산어촌 공모사업에 선정되어 농어촌지역의 거점기능과 쇠퇴해진 면소재지 기능을 회복시켜 지역역제 활성화 기여 및 지역일자리 창출 목적 ◦ 추진기간 : ’13. ~ ’18. (6년간) ◦ 총사업비 : 7,000백만 원(국비 4,900 지방비 2,100) ◦ 주요내용 - 기초생활기반확충 : 버스승강장, 야외공연장, 다목적실내공연장, 회진삼거리, 선창길도로정비, 우회도로개설 - 지역경관개선 : 공원조성(2개소), 시가지간판정비, 만남의광장 조성 - 지역역량강화 : 교육, 컨설팅, 홍보마케팅, 정보화 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’13.~’16. : 1,695백만 원 / 기본계획수립, 세부설계, 버스승강장조성, 회진삼거리 정비, 만남의 광장 조성, 용지매수, 역량강화 - ’13. 관련자 : 주무관 조영민, 계장 김백수, 과장 박혜영 - ’14. 관련자 : 주무관 조영민, 계장 이경현 과장 박혜영,노희규 - ’15 관련자 : 주무관 김군창, 계장 박성기 과장 노희규 - ’16. 관련자 : 주무관 김선범, 계장 박성기, 과장 노희규 ◦ ’17. : 2,183백만 원 / 야외공연장, 다목적실내공연장, 임시주차장, 우회도로개설, 공원조성 - ’17. 관련자 : 주무관 김선범, 계장 박성기, 정익주 과장 김장용 ◦ 시행자 : 한국농어촌공사 장흥지사 위탁 시행

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-19	담당부서 작성자	경제정책과 도시계획담당 (이지혜 / 061-860-0431)
정 책 명	장평면 소재지종합정비사업
사업개요	◦ 추진배경 - 2014년도 농림수산식품부 주관 일반농산어촌 공모사업에 선정되어 농어촌지역의 거점기능과 쇠퇴해진 면소재지 기능을 회복시켜 지역역제 활성화 기여 및 지역일자리 창출 목적 ◦ 추진기간 : ’14. 01. ~ ’18. 12.(5년간) ◦ 총사업비 : 7,000백만 원(국비 4,494, 군비 2,506) ◦ 주요내용 : 기초생활기반확충, 지역경관개선, 지역역량강화 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14.02.05 : 일괄 위(수)탁 계약(장흥군↔한국농어촌공사 장흥지사) - ’14. 관련자 : 주무관 조영민, 계장 이병표, 박성기 과장 노희규 ◦ ’15.12.21 : 소재지 종합정비사업 시행계획 승인 - ’15 관련자 : 주무관 김군창, 계장 박성기 과장 노희규 ◦ ’16.04.05 : 소재지 종합정비사업 착공 ◦ ’16.12.30 : 중심도로 옹벽(109m)설치 및 주차장(48면) 정비 완료 - ’16. 관련자 : 주무관 김선범, 계장 박성기, 과장 노희규 ◦ ’17.12.20. : 중심도로(843m) 및 외관정비(14개소) 완료 - ’17. 관련자 : 주무관 김선범, 계장 박성기, 정익주 과장 김장용

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-20	담당부서 작성자	경제정책과 도시계획담당 (이지혜 / 061-860-0431)
정 책 명	대덕읍 소재지종합정비사업
사업개요	◦ 추진배경 - 2012년도 농림수산식품부 주관 일반농산어촌 공모사업에 선정되어 농어촌지역의 거점기능과 쇠퇴해진 읍소재지 기능을 회복시켜 지역경제 활성화 기여 및 지역 일자리 창출 목적 ◦ 추진기간 : ’12. 01. ~ ’17. 06. / 농촌공사 위탁 ◦ 총사업비 : 10,400백만 원(국비 7,000 , 군비 3,400) ◦ 주요내용 - 다목적종합복지타운 : 지상2층 970.51㎡ - 다목적 창고 : 지상1층 216.00㎡ - 시가지가로환경정비 L=605m - 도로개설 L=200m - 아름다운상가조성(벽면정비 42개소, 간판정비 36개소) - 구)복지회관 리모델링 : 1식(지상2층 567.47㎡) - 부대공사 1식 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’12. 09.~11. : 기본계획 및 시행계획 승인(전남도) - ’12. 관련자 : 주무관 조영민, 계장 김백수, 과장 이광수 ◦ ’13.05.23 : 한국농어촌공사 장흥지사 위수탁계약 - ’13. 관련자 : 주무관 조영민, 계장 김백수, 과장 박혜영 ◦ ’14. 01. : 대덕읍 소재지 종합정비사업 착수 - ’14. 관련자 : 주무관 조영민, 계장 이경현 과장 박혜영, 노희규 ◦ ’17. 06. : 대덕읍 소재지 종합정비사업 준공 - ’15 관련자 : 주무관 김군창, 계장 박성기 과장 노희규 - ’16. 관련자 : 주무관 김선범, 계장 박성기, 과장 노희규 ◦ ’17. 07. : 대덕읍 소재지 종합정비사업 인계인수 - ’17. 관련자 : 주무관 김선범, 계장 박성기, 정익주 과장 김장용

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-21	담당부서 작성자	경제정책과 도시계획담당 (김양우 / 061-860-0432)
정 책 명	장흥군 관리계획 재정비
사업개요	◦ 사업목적(배경) - 2015 장흥 군관리계획 재정비 완료에 따른 재정비 기간도래 - 국토계획법 개정에 따른 지자체 후속조치 대응 - 지역개발여건의 변화에 대응 ◦ 추진기간 : ’15. 01. 29 ~ ’18. 01. 05. ◦ 총사업비 : 1,451백만 원 ◦ 주요내용 - 장흥군관리계획, 교통성검토, 환경성검토, 사전재해영향성검토, 재해취약성 분석, 수치지형도제작, 단계별집행계획, 토지적성평가, 지형도면 고시, 공원 조성계획 수립, 유원지 조성계획 수립
추진경과 및 사업 관련자	❏ 추진경과 ◦ ’16.12.27.~’17.1.20. : 주민열람공고 실시, 읍면별 공청회 및 주민설명회 개최 ※ 의견내용 : 총 11건 중 4건 반영, 7건 미반영 - 관련자 : 경제정책과 담당자 김양우, 담당 박성기, 과장 노희규 ◦ ’17.03.03. : 장흥군 의회 의견청취 - 원안가결 - 관련자 : 경제정책과 담당자 김양우, 담당 박성기, 과장 김장용 ◦ ’17.06.16. : 장흥군계획위원회 자문 - 원안가결 - 관련자 : 경제정책과 담당자 김양우, 담당 박성기, 과장 김장용 ◦ ’17.10.16.~’18.01.31. : 관계기관 및 부서 협의 - 총 16개소(부서 11, 기관 5) ※ 의견내용 : 총94건 중 반영 84건, 일부반영 5건, 미반영 5건 - 관련자 : 경제정책과 담당자 김양우, 담당 정익주, 과장 김장용

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-22	담당부서 작성자	경제정책과 도시계획담당 (이지혜 / 061-860-0431)
정 책 명	창조적마을만들기
사업개요	◦ 위 치 : 장흥읍 기양리, 건산리, 유치면 봉덕리 일원 ◦ 사업기간 : ’15. ~ ’17. ◦ 총사업비 : 2,000백만 원(국비 1,300, 군비 700) ◦ 사업내용 : 복지센터, 소공원, 생태주차장, 명품가로수길 조성 ◦ 사업시행청 : 장흥군, 한국농어촌공사
추진경과 및 사업 관련자	❏ 추진경과 ◦ ’16.10.08. : 창조적마을만들기 기본계획 용역 완료/㈜이지 ◦ ’17.01.~06. 실시설계 완료 및 공사 시행 - 기 양 골 : 복지센터건립 29㎡,건물철거 및 소공원조성 - 다릿거리 : 친환경주차장 조성 1,989㎡ - 새터마을 : 명품가로수길 조성 1.8km, 마을안길담장조성 L=97m - ’17. 관련자 : 주무관 김선범, 계장 박성기, 정익주 과장 김장용 ◦ ’17.12. : 준공 및 시설물 인계인수 - 복지센터, 생태주차장, 명품가로수길 등 - ’17. 관련자 : 주무관 김선범, 계장 박성기, 정익주 과장 김장용

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-23	담당부서 작성자	경제정책과 마을공동체담당 (김현호 / 061-860-0520)
정 책 명	매생이권역 농촌마을 종합개발사업
사업개요	◦ 선정년도 : 2010년 ◦ 대상마을 : 6개 마을(동신, 서신, 이신, 옹암, 내저, 분토) ◦ 총사업비 : 6,080백만 원(국비 4,214, 도비 90, 군비 1,716, 자담 60) ◦ 사업기간 : ’10.~’15.(6년간) ◦ 사업내용 : 다목적센터, 매생이공동작업장, 마을안길정비 외 9건
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’11.2.12. : 개매기권역 기본계획 확정 고시 - 관련자 : 주무관 최준희, 농촌개발담당 이순임, 과장 이광수 ◦ ’11.03 ~ 12. : H/W사업 실시설계 용역 완료 - 관련자 : 주무관 백남일, 농촌개발담당 위계륙, 과장 김이문 ◦ ’12.05.16 : H/W부문 총괄 위수탁 협약(한국농어촌공사) - 관련자 : 주무관 최채홍, 농촌개발담당 김병원, 과장 이광수 ◦ ’16.12.30. : 매생이권역 인수계를 위한 시설물 합동점검 - 관련자 : 주무관 박학균 농촌개발담당 김군창 과장 노희규 - 농어촌공사 : 건축 한재욱, 토목 김종, 전기 김재완, 기계 김종석 - 장흥군 : 건축 김대준, 토목 김선범, 전기 이석배, 기계 박학균

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-24	담당부서 작성자	친환경농산과장 조국선 원예특작담당 이정우 지방농업 7급 문인주 (860-0384)
정 책 명	시설원예품질개선사업
사업개요	◦ 추진배경 - 원예전문생산시설의 현대화 규모화, 전문화를 지원함으로써 원예농산물의 품질개선 및 안정적인 수출 기반 구축 - 생산비 절감을 통한 생산력 향상으로 농가소득 증대에 기여 ◦ 추진기간 : 2013. 01. 01. ~ 2015. 02. 28. ◦ 총사업비 : 5,423백만 원 - 국비 1,085, 도비 163, 군비 1,464, 자담 2,711 ◦ 주요내용 - 위 치 : 장평면 청용리 410-1번지외 16필지 - 시설규모 : 3.3ha (파프리카 유리온실)
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’13.09.04. : 시설원예 품질개선사업 확정 통보 - 관련자 : 농업축산과 담당자 김옥현, 원예특작담당 김성호, 농업축산과장 유영철 ◦ ’14.07.14 : 시설원예 품질개선사업 유리온실 신축 계약 체결 - 관련자 : 농업축산과 담당자 임상록, 원예특작담당 김성호, 농업축산과장 유영철 ◦ ’14.07.15 : 시설원예 품질개선사업 유리온실 신축 공사착수 - 관련자 : 농업축산과 담당자 임상록, 원예특작담당 김성호, 농업축산과장 유영철 ◦ ’15.01.13 : 시설원예 품질개선사업 유리온실 신축 준공 - 관련자 : 농업축산과 담당자 임상록, 원예특작담당 위장일,\ 농업축산과장 김전환

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제

등록번호

2015-25

담당부서

작성자

축산사업소

이정석 / 061-860-6716

정 책 명

장흥군 공공형 승마장(승마체육공원) 조성사업

사업개요

◦ 추진배경 : 군민의 체력증진 및 건전한 여가문화 조성에 이바지

◦ 추진기간 : 2012.2.28 ~ 2018.8.14

◦ 총사업비 : 4,482백만 원

◦ 주요내용 : 실내․외승마장, 클럽하우스, 마방, 부대시설 등

구 분	사업량(면적)	주 요 내 용	비 고
계	6종
승마장(실내)	2,450㎡(741평)	막구조 승마장, 벽면 오픈
승마장(실외)	4,383㎡(1,325평)	실외마장, 원형마장
클럽하우스	281㎡(85평)	휴게실, 탈의실, 샤워실, 화장실
마방(말관리사)	605㎡(183평)	마방 34칸
창고, 퇴비사	351㎡(106평)	창고 202㎡, 퇴비사 149㎡
기타(기반공사)	21,717㎡(6,569평)	토목공사

추진경과 및

사업 관련자

❏ 사업관련자 현황

◦ ’14.01.02 : 공공승마장 공사착수

- 관련자 : 주무관 백형균, 계장 김성호, 과장 유영철

◦ ’15.01.10 : 실내승마장 및 실외승마장 설치완료

- 관련자 : 주무관 백형균, 계장 김성호, 과장 김전환

◦ ’15.08.19. ~ ’16.05. : 공사 일시정지

- 공사일시중지 : 2015. 8. 19.

(중지사유 : 예산미확보 및 로하스타운 개발계획 변경승인)

- 관련자 : 주무관 김세형, 계장 김성호, 과장 김전환

◦ ’16. 12. : 공사 및 관급자재 계약체결(공정율 10%)

- 관련자 : 주무관 장선영, 계장 김성호, 과장 김전환

◦ ’17.12.31 : 2단계 공사추진(공정율 85%)

- 관련자 : 주무관 임상록, 계장 이정우, 과장 김전환

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-27	담당부서 작성자	해양수산과 (김효근 / 860-0414)
정 책 명	생태순환 복합양식 시설사업
사업개요	◦ 추진배경 : 연안 어장에 복합 양식이 가능하게 됨에 따라 입체적인 어장이용을 위해 활용하지 못하고 있는 저층 양식어장 개발 필요 ◦ 추진기간 : 2014.01.21. ~ 2015.10.01. ◦ 총사업비 : 1,131백만 원 ◦ 주요내용 : 자정능력을 갖춘 입체적 친자연형 양식어장 개발
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14.01.20. : 생태순환복합양식시설 사업 수요조사 - 관련자 : 전라남도 수산자원과 주무관 이준 친환경수산담당 황통성, 수산자원과장 박상욱 ◦ ’14.08.11. : 생태순환복합양식시설 사업 신청(1개소, 1,333,400천원) - 관련자 : 장흥군청 해양수산과 주무관 김국진, 어업생산담당 정창태 ◦ ’14.09.17. : 생태순환복합양식시설 사업 보조금 교부 신청 - 관련자 : 장흥군청 해양수산과 주무관 김국진, 어업생산담당 정창태 해양수산과장 신운용 ◦ ’14.10.07. : 사업확정 통보(내저어촌계, 복합양식 5ha) - 관련자 : 장흥군청 해양수산과 주무관 선승규, 어업생산담당 정창태 해양수산과장 신운용 ◦ ’15.06.11. : 사업 포기서 제출 ◦ ’15.06.16. : 사업 신청(조의*) - 관련자 : 장흥군청 해양수산과 주무관 선승규, 어업생산담당 정창태 해양수산과장 신운용 ◦ ’15.07.29. : 사업성 검토 의뢰 - 관련자 : 장흥군청 해양수산과 주무관 김효근, 어업생산담당 양권식 해양수산과장 신운용 ◦ ’15.08.10. : 사업대상자 변경 승인 요청(내저어촌계→조의*) - 관련자 : 장흥군청 해양수산과 주무관 김효근, 어업생산담당 양권식 해양수산과장 신운용 ◦ ’15.08.12. : 사업자 변경 승인(내저어촌계→조의*) - 관련자 : 전라남도 수산자원과 주무관 정명수, 양식어업담당 오광남, 수산자원과장 최연수 ◦ ’15.10. 2. : 포기서 제출(조의*) - 관련자 : 장흥군청 해양수산과 주무관 김효근, 어업생산담당 양권식 해양수산과장 신운용

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-28	담당부서 작성자	해양수산과 (최채홍/860-0408)
정 책 명	장흥군 연안관리지역계획 수립 용역
사업개요	◦ 추진배경 : 연안관리법 제2장 제9조(연안관리지역계획수립 등)의 규정에 따라 장흥군 연안의 효율적인 보전, 이용 및 개발 ◦ 추진기간 : ’13. 06.~ ’15. 02. ◦ 총사업비 : 99백만 원 ◦ 주요내용 : 연안용도해역, 연안해역기능구, 자연해안관리목표 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’13.06.28. : 용역 착수 - 관련자 : 담당자 선병우, 해양시설담당 정종훈, 해양수산과장 송금섭, 부군수 윤승중, 군수 이명흠 ◦ ’13.07.22. : 연안관리지역계획 수립에 따른 자료요청 - 관련자 : 담당자 선병우, 해양시설담당 윤영선, 해양수산과장 송금섭 ※ 요청기관 : 국립해양수산조사원 요청내용 : 해안선조사자료(자연해안가, 인공해안가, 자연해안가 길이) ◦ ’13.08.26. : 연안관리지역계획 수립에 따른 자료요청 회신 - 관련자 : 국립해양수산조사원 수로측량과 주무관 이희원, 과장 서기석 ◦ ’14.03.21. : 연안관리지역계획 수립 용역 중간보고회 - 관련자 : 해양수산과장 이병준, 해양시설담당 윤영선, 담당자 선병우 ◦ ’15.01.12. : 제2차 장흥군 연안관리지역계획 결정 고시 - 관련자 : 해양수산과장 신운용, 해양시설담당 윤영선, 담당자 선병우 ◦ ’15.01.19. : 용역 준공 - 관련자 : 해양수산과장 신운용, 해양시설담당 박신주, 담당자 선병우 - 용역회사 : ㈜우빈기술개발건축사무소

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-29	담당부서 작성자	해양수산과 (선병우/860-0408)
정 책 명	소규모어항 시설보강(복합다기능부잔교설치)
사업개요	◦ 추진배경 : 소규모어항 27개소 대다수 노후 및 갯벌퇴적으로 인한 어선접안이 불리하여 부잔교를 설치함으로 조업시간 확보 및 어업 소득 증대 ◦ 추진기간 : 2014.05. ~ 2015.12. ◦ 총사업비 : 1,000백만 원 ◦ 주요내용 : 복합다기능 부잔교 10개소 설치
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14.05.29. : 복합다기능 부잔교설치공사 실시설계 용역 착수 - 관련자 : 군수 이명흠, 부군수 윤승중, 해양수산과장 이병준, 해양시설담당 윤영선, 담당자 선병우 ◦ ’14.07.29. : 복합다기능 부잔교설치공사 실시설계 용역 완료 - 관련자 : 담당자 선병우, 해양시설담당 윤영선, 해양수산과장 이병준, 부군수 윤승중, 군수 이명흠 ◦ ’15.01.20. : 복합다기능 부잔교 설치공사 시행 - 해양수산과장 신운용, 해양시설담당 박신주, 담당자 선병우 ◦ ’15.12.04. : 복합다기능 부잔교 설치공사 준공 - 관련자 : 담당자 선병우, 해양시설담당 박신주, 해양수산과장 신운용

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-30	담당부서 작성자	해양수산과 (최채홍/860-0408)
정 책 명	노력도 도서종합개발사업(15차분)
사업개요	◦ 추진배경 - 양식장 진출입로 확보로 어민들의 어업활동 편의제공 및 소득증대로 낙후된 도서민의 정주여건 개선과 노력항을 이용하는 관광객의 접근 편의성 제공과 안전사고 예방 ◦ 추진기간 : ’15. 03. ~ 12. ◦ 총사업비 : 661백만 원 ◦ 주요내용 : 도로 개설 L=200m
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’15.03.20. : 공사 착공 - 관련자 : 군수 김성, 부군수 서은수, 해양수산과장 신운용, 해양시설담당 박신주, 담당자 선병우 ◦ ’15.12.28. : 공사 준공 - 관련자 : 해양수산과장 신운용, 해양시설담당 박신주, 담당자 선병우

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-31	담당부서 작성자	(안전건설과 / 도로담당) (김홍전/860-0487)
정 책 명	농어촌도로 확포장 공사 (용산 척산～석동간 농어촌도로 확포장･공사)
사업개요	◦ 추진배경 : 농촌지역의 도로환경 개선과 지역주민의 삶의 질 향상 등 원활한 차량통행으로 교통편의 제공 및 안전사고 예방. ◦ 추진기간 : ’15. 03. ~ ’16. 01. ◦ 총사업비 : 1,461백만 원 ◦ 주요내용 :「용산 척산~ 석동간 농어촌도로 확포장･공사」 - 토 공 : 터파기1,640㎥, 흙깍기3,758㎥, 흙쌓기(노상,노체) 2,013㎥ - 배 수 공 : 배수관(D=500~1,200mm) L=456m 집수정(0.9 x 0.9 x 1.4) 2조, 집수정(1.2 x 1.2 x 2.1) 4조 - 구조물공 : L형측구 L=890m, L형옹벽측구 L=557m, U형개거 L=611m - 석 축 공 : 보강토옹벽블럭쌓기 660㎡ - 포 장 공 : 아스콘포장(표층) 13,352㎡, (기층) 10,722㎡, 보조기층 1,628㎥ - 교 량 공 : 교량 (L=19m, B=8m) 1개소 - 부 대 공 : 차선도색(융착식) L=709㎡ / 가드레일 144경간(L=576m)
추진경과 및 사업 관련자	❏ 추진경과 ◦ ’14.11.26. : 기본 및 실시설계 용역 추진 - 관련자 : 주무관 김동호, 도로담당 김대중, 안전건설과장 박광규 ◦ ’15.03.10. : 공사시행 및 계약의뢰 ◦ ’15.03.31. : 공사 착공(추진) - 관련자 : 주무관 김종일, 도로담당 김대중, 안전건설과장 박광규 ◦ ’15.04.13. : 공사 편입토지 기공승낙서 징구 ◦ ’15.04. ~ : 공사 편입토지(114필지) 분할측량 및 보상 ◦ ’16.01.15. : 공사 준공 - 관련자 : 주무관 김종일, 도로담당 김대중, 안전건설과장 박광규

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-32	담당부서 작성자	(안전건설과 / 농업기반담당) (조영민/860-0485)
정 책 명	외반지구 지표수보강 개발사업
사업개요	◦ 추진배경 : 농촌용수가 부족한 지역의 수원공 시설의 확장 ㆍ보강으로 안정적인 영농생산기반 조성 ◦ 추진기간 : ’11. 06 ~ ’15. 06. ◦ 총사업비 : 8,022백만 원 ◦ 주요내용 : 제당숭상, 제당보강, 여방수로 정비, 취수시설 정비, 이설도로 설치 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’10.01.11 : 기본 및 실시설계 용역 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 김군창, 농업기반담당 김영철, 건설과장 김문호 ◦ ’11.01.03 : 전남도 기본계획 수립 통보 - 관련자 : 도 농업정책과 농업기반담당 남창규, 농업정책과장 전종화 ◦ ’11.06.17 : 전남도 시행계획 승인 - 관련자 : 도 농업정책과 농업기반담당 남창규, 농업정책과장 주순선 ◦ ’11.06.27 : 기본 및 실시설계 용역 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 위용관, 농업기반담당 심우성, 건설과장 김문호 ◦ ’11.06.29 : 총괄 및 1차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 위용관, 농업기반담당 심우성, 건설과장 김문호 ◦ ’12.03.28 : 2차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 길현종, 건설과장 김광렬 ◦ ’12.06.27 : 1차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 길현종, 건설과장 김광렬 ◦ ’13.01.11 : 3차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ ’13.01.25 : 2차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ ’13.11.27 : 3차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ ’14.1.10 : 4차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ ’15.01.15 : 4차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’15.06.18 : 총괄 및 5차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-33	담당부서 작성자	안전건설과 농업기반담당 (조영민 / 860-0485)
정 책 명	내저지구지표수보강사업
사업개요	◦ 추진배경 : 농업용수가 부족한 지역의 수원공 시설의 확장․ 보강으로 안정적인 영농생산기반 조성 ◦ 추진기간 : 2014. 10. ~ 2018. 01. 예정 ◦ 총사업비 : 3,345백만원 ◦ 주요내용 : 제당숭상, 제당보강, 여방수로 정비, 취수시설 정비, 이설도로 설치 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’12.03.13. : 기본 및 실시설계 용역(1차) 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 길현종, 건설과장 김광렬 ◦ ’13.10.18. : 기본 및 실시설계 용역(1차) 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광열 ◦ ’14.11.06. : 기본 및 실시설계 용역(2차) 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광열 ◦ ’14.06.05. : 전남도 기본계획 수립 통보 - 관련자 : 도 농업정책과 농업기반담당 위인환, 농업정책과장 조용익 ◦ ’14.09.01. : 전남도 시행계획 승인 - 관련자 : 도 농업정책과 농업기반담당 위인환, 농업정책과장 조용익 ◦ ’14.10.29. : 총괄 및 1차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 박광규 ◦ ’14.11.06. : 기본 및 실시설계 용역(2차) 준공 ◦ ’15.02.17. : 1차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’15.03.18. : 2차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’15.03.18. : 2차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’16.02.24. : 3차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 김형근, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’16.03.23. : 2차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 김형근, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’17.01.09. : 3차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 김경석, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’17.02.20 : 4차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 김홍전, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’18.01.31 : 총괄 및 4차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 조영민, 농업기반담당 김병원, 건설과장 김기정

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-34	담당부서 작 성 자	(장흥군 안전건설과) (김홍전 / 061-860-0485)
정 책 명	산정지구 소규모 용수개발사업(완료)
사업개요	❏ 추진배경 : 농촌용수가 부족한 지역의 수원공 시설의 확장ㆍ보강으로 안정적인 영농생산기반 조성 ❏ 추진기간 : 2012. 3 ~ 2015. 5 ❏ 총사업비 : 4,669백만원 ❏ 주요내용 : 제당숭상, 제당보강, 여방수로 정비, 취수시설 정비, 이설도로 설치 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’11. 1. 28. : 기본 및 실시설계 용역 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 위용관, 농업기반담당 심우성, 건설과장 김문호 ◦ ’12. 1. 31. : 사업계획 승인신청(전라남도) - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 길현종, 건설과장 김광렬, 부군수 황기연 ◦ ’12. 2. 2. : 전남도 시행계획 승인 - 관련자 : 도 농업정책과 농업기반담당 변재홍, 농업정책과장 손영호 ◦ ’12. 2. 10. : 기본 및 실시설계 용역 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 길현종, 건설과장 김광렬 ◦ ’12. 3. 5. : 총괄 및 1차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 길현종, 건설과장 김광렬 ◦ ’13. 1. 15. : 2차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ ’13. 1. 28. : 1차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 박신주, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ ’13. 12. 27. : 2차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ 14.1.17 : 3차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ ’15. 3. 24 : 4차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’15. 3. 27. : 3차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’15. 6. 1. : 총괄 및 4차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-35	담당부서 작성자	(안전건설과 / 농업기반담당) (조영민/860-0485)
정 책 명	장동 조양지구 대구획경지정리사업(시설개량)
사업개요	◦ 추진배경 : 과거 경지정리를 하였으나 농로, 용·배수로 시설이 취약한 평야부 우량농지를 재정비하여 농업생산성 향상과 농촌 환경 개선 도모 ◦ 추진기간 : ’15. 01. ~ ’16. 06. ◦ 총사업비 : 1,797백만 원 ◦ 주요내용 : 농로포장, 용ㆍ배수로 정비 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14.04.01. : 2015년 가을착수 대구획 경지정리사업(조양지구) 확정 - 관련자 : 도 농업정책과 농업기반담당 위인환, 농업정책과장 조용익 ◦ ’14.11.07. : 기본 및 실시설계 용역 추진 - 관련자 : 주무관 김제영, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규, 부군수 윤승중 ◦ ’15.06.09. : 조양지구 대구획경지정리(시설개량)사업 시행계획서 제출(전라남도) - 관련자 : 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’15.06.12. : 조양지구 대구획경지정리(시설개량)사업 시행계획 승인 - 관련자 : 도 농업정책과 농업기반담당 이화종, 농업정책과장 조순선 ◦ ’15.06.22. : 기본 및 실시설계 용역 준공 - 관련자 : 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’15.06.17. : 총괄 및 1차분 추진 - 관련자 : 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규, 부군수 서은수, 군수 김성 ◦ ’15.12.21. : 1차분 준공 - 관련자 : 주무관 조영민, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’16.01.11. : 2차분 추진 - 관련자 : 주무관 김형근, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 부군수 서은수, 군수 김성 ◦ ’16.06.22. : 총괄 및 2차분 준공 - 관련자 : 주무관 김형근, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-36	담당부서 작성자	(안전건설과 / 농업기반담당) (이환재/860-0485)
정 책 명	관산 고마ㆍ산서지구 밭기반 정비사업
사업개요	◦ 추진배경 : 집단화된 밭을 대상으로 용수개발, 농로개설 등 생산기반을 구축하여 밭작물 생산성 향상, 품질 개선으로 주민 소득증대 기여 ◦ 추진기간 : ’14. 07. ~ ’15. 07. ◦ 총사업비 : 1,159백만 원 ◦ 주요내용 : 농로포장, 용ㆍ배수로 정비 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14.01.09. : 기본 및 실시설계 용역 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬, 부군수 윤승중 ◦ ’14.04.01. : 밭기반 정비사업 대상지 확정 - 관련자 : 도 농업정책과 농업기반담당 위인환, 농업정책과장 조용익 ◦ ’14.06.02. : 밭기반 정비사업 시행계획서 제출(전라남도) - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ ’14.06.11. : 밭기반 정비사업 시행계획 승인 - 관련자 : 도 농업정책과 농업기반담당 위인환, 농업정책과장 조용익 ◦ ’14.06.27. : 기본 및 실시설계 용역 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 ◦ ’14.07.08. : 총괄 및 1차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 김선정, 농업기반담당 김대중, 건설과장 김광렬 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’15.01.14. : 1차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 ◦ ’15.01.27. : 2차분 추진 - 관련자 : 건설과 주무관 임희춘, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규 부군수 서은수, 군수 김성 ◦ ’15.09.18. : 총괄 및 2차분 준공 - 관련자 : 건설과 주무관 조영민, 농업기반담당 문영백, 건설과장 박광규

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-37	담당부서 작성자	(장흥군농업기술센터/ 농촌지원과/농기계운영) (김형래/860-0558)
정 책 명	농업기계 임대사업
사업개요	◦ 추진배경 - 농촌인구 감소 및 노령화로 노동력 감소, 한중 FTA등 시장 개방에 따른 농업인 경쟁력 강화 필요 - 지역 실정에 맞는 차별화된 농업기계 임대사업 활성화로 농업인 농업기계 구입비 경감 및 이용률 제고, 적기영농을 통한 고소득 창출 ◦ 추진기간 : ’15.01.02. ~ 12.31. ◦ 총사업비 : 1,215백만원(국비 373, 도비112.5, 군비 729.5) ◦ 주요내용 - 농업기계 신규 사업소 신축 : 보관창고(654㎡) 및 부대시설 - 임대 농업기계 및 관리장비 구입 : 48종 143대
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’15.01.12 : 2015 농업기계 임대사업 운영 계획 수립 - 관련자 : 농촌지원과 농촌지도사 김호중, 농촌지도사 이장환 ◦ ’15.03.10 : 2015 농업기계 임대사업용 구입 계획 수립 - 관련자 : 농촌지원과 농촌지도사 김호중, 농촌지도사 이장환 ◦ ’15.03.30 : 임대사업소 설치를 위한 장흥군계획시설 변경 검토의뢰 - 관련자 : 농촌지원과 농촌지도사 김호중, 농촌지도사 이장환 ◦ ’15.04.21 : 임대사업소 신축공사에 따른 건축 협의 요청 - 관련자 : 농촌지원과 농촌지도사 김호중, 농촌지도사 이장환 ◦ ’15.05.07 : 임대사업소 신축공사 계약심사 의뢰 - 관련자 : 농촌지원과 농촌지도사 김호중, 농촌지도사 이장환 ◦ ’15.07.09 : 임대사업소 신축 소방, 통신,전기공사 시행 - 관련자 : 농촌지원과 농촌지도사 김호중, 농촌지도사 이장환 ◦ ’15.12.24 : 임대사업소 신축공사 준공금 지급 - 관련자 : 농촌지원과 농촌지도사 김호중, 농촌지도사 이장환

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-38	담당부서 작성자	농업기술센터/생활자원담당 (구영란/061.860.0554)
정 책 명	장흥청태전 산업화 클러스터
사업개요	◦ 추진배경 - 장흥 전통 향토자원인 청태전과 약용자원을 향토산업으로 육성, 장흥군을 미래산업인 발효산업의 메카로 성장시키기 위함 - 명품 청태전 도시육성-청태전을 융복합화 산업으로 육성, 지역경제 활성화 도모 ◦ 추진기간 : 2012.1.1. ~ 2014.12.30. ◦ 총사업비 : 3,000백만원 ◦ 주요내용 - 청태전 생산․가공기반 조성 및 산업화 - 청태전 명품화 신제품 개발 및 응용제품 개발 - 조직화․전문 역량강화, 혁신적인 유통마케팅 - 청태전 문화컨텐츠 개발 활용 등
추진경과 및 사업 관련자	❏ 추진경과 ◦ '11.7.28. : 향토산업육성『청태전산업화클러스터』사업 선정 ◦ '11.12.15. : 업무이관/친환경농축산과→농업기술센터 ◦ '12.1.20. : 청태전산업육성사업단 창립 ◦ '12.1.~'12.12.30. : 1년차(사업비 : 600백만원) - H/W분야(245백만원) : 원료생산, 제조․가공시설 분야의 투자 - S/W분야(355백만원) : 사업 역량제고, 유통․마케팅 산업화 ◦ '13.1.~'13.12.30. : 2년차(사업비 : 1,000백만원) - H/W분야(490백만원) : 청태전홍보관 구축, 자생차단지 복원 등 - S/W분야(510백만원) : 혁신적인 디자인개발, 유통․마케팅 등 ◦ '14.1.~'14.12.30. : 3년차(사업비 : 1,400백만원) - H/W분야(667백만원) : 청태전발효실 구축, 자생차 티로드 개발 - S/W분야(733백만원) : 국내외 박람회참가, 기획홍보 등

정책수행자

(관련자 및

업무분담 내용)

◦ 사업 관련자

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
부군수	윤상복	부군수	'11.7~'12.1	업무총괄
과장	유영철	지방농업사무관	'11.7~'12.1	업무담당
담당	김근	지방농업주사	'11.7~'12.1	업무담당자
소장	이영민	지방농촌지도관	'12.1~'13.7	업무총괄
소장	강일성	지방농촌지도관	'13.8~'14.12	압무총괄
과장	제해신	지방농촌지도관	'12.1~'13.7	업무담당
과장	문상흠	지방농촌지도관	'13.7~'14.12	업무담당
담당	구영란	지방농촌지도사	'12.1~'14.12	업무담당자

추진실적

◦ '11.07.28. : 향토산업육성『청태전산업화클러스터』사업 선정

◦ '11.12.15. : 업무이관/친환경농축산과→농업기술센터

◦ '12.01.20. : 청태전산업육성사업단 창립

◦ '12.1.~'12.12.30. : 1년차(사업비 : 600백만원)

- 장흥청태전 CI, BI 개발, 청태전 스토리북․홍보동영상 제작

- 품질고급화 연구개발 용역 : 3건 (특허2건, 상표출원 1건, 패키지 개발 13종)

- 청태전가공기반 조성 : 공동가공시스템 구축, 자생차 단지 복원 1식

◦ '13.1. ~ '13.12.30. : 2년차(사업비 : 1,000백만원)

- 품질고급화․다양화 및 응용제품 개발 : 발효기술표준화,

우수균주 확보 등(특허출원 2건, 상표출원 2)

- 문화컨텐츠개발 : 청태전차문화축제(11월), 품평대회(9월)

- 국내․외 판매망 확대 및 수출마케팅 홍보활동 : 40회

- 청태전홍보․전시관 조성(243㎡) : 장흥 행원

- 청태전 전문가 양성 : 50명

- 청태전 “맛의 방주” 등재(8월)

◦ '14.1. ~ '14.12.30. : 3년차(사업비 : 1,400백만원)

- 품질고급화․다양화 및 응용제품 개발 : 특허 6건

- 자생차 티로드 복원 : 가지산 보림사

- 국내․외 홍보활동 강화

․전문가초청 팸투어(5월, 12월), 국제차문화대전 등

차전문 홍보박람회 참여, 청태전 도슨트교육 실시(12월)

- 청태전 홍보․전시관 증축 : 생산․가공․체험․홍보시설

- 청태전 “프레시디아” 선정(5월)

- 2014 세계녹차컨테스트 『최고금상』 수상(8월)

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-39	담당부서 작성자	수도사업소 이기준 / 860-0523
정 책 명	녹원지구 농어촌 지방상수도 개설사업
사업개요	◦ 추진배경 : 지하수 고갈 및 염수유입으로 인한 먹는물 수급불편 해소 및 깨끗한 물 안정적 공급 ◦ 추진기간 : 2015.07.08 ~ 2018.07.06 ◦ 총사업비 : 7,500백만 원 ◦ 주요내용 : 상수관로 매설 53.3km, 가압장 2개소
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’15.05.26. : 장흥군(녹원지구) 일반수도사업 인가 추진 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김문호, 상수도담당 이경현, 주무관 위용관 ◦ ’15.06.19. : 총괄 및 1차분 사업 발주 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김문호, 상수도담당 이경현, 주무관 위용관 ◦ ’16.07.14 : 1차분 사업 준공 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래 ◦ ’16.03.04. : 2차분 사업 발주 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래 ◦ ’17.03.23. : 2차분 사업 준공 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래 ◦ ’17.04.20. : 3차분 사업 발주 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-40	담당부서 작성자	수도사업소 이기준 / 860-0523
정 책 명	용산지구 농어촌 지방상수도 개설공사
사업개요	◦ 추진배경 : 지하수 고갈 및 수질악화로 생활용수 수급에 불편을 겪고 있는 소외된 지역에 안정적인 수돗물 공급 ◦ 추진기간 : ’13. 08. 19. ~ ’16. 09. 09. ◦ 총사업비 : 6,000백만 원 ◦ 주요내용 : 상수관로 매설 42km, 연지정수장 폐지 및 광역 전환
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’13.08.19. : 총괄 및 1차분 사업 발주 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김영철, 상수도담당 위장일, 주무관 이명록 ◦ ’14.03.30. : 1차분 사업 준공 및 2차분 사업 추진 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김영철, 상수도담당 위장일, 주무관 이명록 ◦ ’14.04.14. : 2차분 사업 발주 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김영철, 상수도담당 위장일, 주무관 이명록 ◦ ’15.03.02. : 2차분 사업 준공 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김문호, 상수도담당 김한석, 주무관 위용관 ◦ ’15.03.16. : 3차분 사업 시행 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김문호, 상수도담당 이경현, 주무관 위용관 ◦ ’15.08.28. : 총괄 및 3차분 사업 준공 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김문호, 상수도담당 이경현, 주무관 위용관 ◦ ’15.06.15. : 대덕 연지정수장 광역전환사업 발주 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김문호, 상수도담당 이경현, 주무관 위용관 ◦ ’16.09.09. : 사업 최종 준공 / 연지정수장 폐지 및 광역 전환 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-41	담당부서 작성자	수도사업소 이기준 / 860-0523
정 책 명	장동지구 농어촌 지방상수도 개설공사
사업개요	◦ 추진배경 : 상수원 부족과 지하수 고갈에 따른 갈수기 먹는 물 수급 불편해소로 주민들에게 안정적이고 깨끗한 물 공급 ◦ 추진기간 : 2016.02.29. ~ 2019.02.28. ◦ 총사업비 : 6,100백만 원 ◦ 주요내용 : 상수관로 매설 28.3km, 가압장 3개소
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’15.12.23 : 장흥 장동지구 일반수도사업 인가 신청 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래 ◦ ’16.02.01. : 총괄 및 1차분 사업 발주 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래 ◦ ’17.03.09 : 1차분 사업 준공 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래 ◦ ’17.03.06. : 2차분 사업 발주 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래 ◦ ’18.03.26. : 2차분 사업 준공 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 문영백, 상수도담당 양회광, 주무관 이기준 ◦ ’18.04.09.: 3차분 사업 시행 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 김영래

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-42	담당부서 작성자	수도사업소 이기준 / 860-0523
정 책 명	지방상수도 운영효율화사업
사업개요	◦ 추진배경 : 낮은 유수율(57.9%)을 조기에 향상시키고 지방상수도 운영관리에 따른 재정악화 해소(지방상수도 위탁운영) ◦ 추진기간 : 2013.01.01.~ 2032.12.31. ◦ 총사업비 : 57,515백만 원 ◦ 주요내용 : 장흥군 상수도 위탁관리 운영
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’12.12.18. : 실시협약 체결 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김영철, 상수도담당 위장일, 주무관 김봉열 ◦ ’13.05.31. : 지방상수도 위탁운영 실시 - 관련자 : 수도사업소장 사무관 김영철, 상수도담당 위장일, 주무관 김봉열 ◦ ’17.02.15. : 변경 실시협약 체결(1차) - 관련자 : 수도사업소장 사무관 길현종, 상수도담당 최용길, 주무관 변화순

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-43	담당부서 작 성 자	(장흥군 수도사업소) (장희수 / 061-860-0747)
정 책 명	장흥읍 하수관거 정비사업(완료)
사업개요	❏ 추진배경 : 하수관거 및 배수설비의 노후화로 인한 불명수 유입 방지로 탐진강 수질개선 효과 기대 ❏ 추진기간 : 2013. 6. ~ 2016. 6 ❏ 총사업비 : 6,513백만원 (국비 4,560 군비 1,953) ❏ 주요내용 : 하수관거 L=13.5km
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’11. 5. 12～’13. 3. 11 : 기본 및 실시설계 용역 - 관련자 : 수도사업소 주무관 이명록, 하수도담당 위계륙, 소장 김기정 ◦ ’13. 5. 3 : 전남도기술자문 및 영산강청 재원협의 - 관련자 : 영산강유역환경청 수질총량관리과 주무관 김진희 수질총량관리과장 사무관 박남진 영산강유역환경청장 정회색 ◦ ’13. 6. ～ ’16. 08. : 사업시행 - 관련자 : 수도사업소 주무관 이명록, 하수도담당 위계륙, 소장 위장일

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-44	담당부서 작성자	수도사업소 (장희수 / 061-860-0747)
정 책 명	안양면 하수관거 정비사업
사업개요	◦ 추진배경 : 안양 면단위 하수처리장과 연계되는 하수관거 정비사업을 통해 생활하수의 통합처리로 투자 효율성 증대 및 득량만 수질개선 - 주민들의 공중위생 및 생활환경 개선으로 주민편익 제공 ◦ 추진기간 : 2013. 01. ~ 2017. 06. ◦ 총사업비 : 8,084백만 원 ◦ 주요내용 : 하수관거 L=21.3㎞, 배수설비 589가구
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’13.07. : 기본 및 실시설계 용역 완료 - 관련자 : 담당자 위용관, 담당 위계륙, 수도사업소장 김영철 ◦ ’15.04. : 1차분 사업준공 - 관련자 : 담당자 이명록, 담당 심우성, 수도사업소장 김문호 ◦ ’15.12. : 2차분 사업준공 - 관련자 : 담당자 이명록, 담당 심우성, 수도사업소장 김문호 ◦ ’17.06. : 3차분 사업준공 - 관련자 : 담당자 장희수, 담당 김도형, 수도사업소장 길현종

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-45	담당부서 작성자	수도사업소 (장희수 / 061-860-0747)
정 책 명	장평면 하수처리시설 및 하수관거 정비사업
사업개요	◦ 추진배경 - 장평면□장동면 일원 10개 마을의 수질오염 및 악취발생 등의 환경저해 요소의 개선을 위한 사업으로 정화조 설치 및 분뇨처리 비용 등 주민부담 경감 도움 - 주민들의 공중위생 및 생활환경 개선으로 주민편익 제공 ◦ 사업대상 : 장평면, 장동면 일원(10개마을) - 탑동, 용강1.2구, 등촌, 양촌, 장택, 배산3구, 북교1.2.4구 ◦ 사업내용 : 210톤/일, L=14.3km, 배수설비 479가구 ◦ 사업기간 : 2014. ~ 2018. / 5개년 ◦ 사 업 비 : 9,546백만원(국비70% 군비30%)
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14.12. : 기본 및 실시설계 용역 완료 - 관련자 : 담당자 이명록, 담당 심우성, 수도사업소장 김문호 ◦ ’16.04. : 1차분 사업준공 - 관련자 : 담당자 이명록, 담당 심우성, 수도사업소장 김문호

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-46	담당부서 작성자	수도사업소 (장희수 / 061-860-0747)
정 책 명	용산 용인 농어촌마을 하수도 정비사업
사업개요	◦ 추진배경 - 1996년도 시공된 하수처리장 및 하수관거의 노후로개량이 필요한 지역으로 1일 85톤을 처리할수 있는 하수처리시설로 개량하여 방류지역인 남상천 하류지역의 수질환경 개선 - 주민들의 공중위생 및 생활환경 개선으로 주민편익 제공 ◦ 사업내용 : 40톤/일, L=4.2km ◦ 사업기간 : 2015. ~ 2018. / 4개년 ◦ 사 업 비 : 2,800백만원 / 국비 70%, 군비30%
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’16.12. : 기본 및 실시설계 용역 완료 - 관련자 : 담당자 황수현, 담당 김도형, 수도사업소장 길현종

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-47	담당부서 작성자	수도사업소 (조문호 / 061-860-0747)
정 책 명	하수관거 BTL 임대료(국비)
사업개요	◦ 추진배경 : 열악한 우리군 재정 형편을 감안하여 민간이 선투자하고 우리군이 임대하는 사업으로 단기간 수질개선 및 깨끗한 시가지 환경 조성 ◦ 사업대상 : 장흥군 장흥, 관산, 대덕, 회진 소재지 일원 ◦ 사 업 량 : 관로 L= 76.0㎞ ◦ 상환사업비 : 75,273백만원(국비 70%, 군비 30%) / 년간 3,216백만원 ◦ 상환기간 : 2011. 3. 19 ~ 2031. 3. 18(20년간) ◦ 사업시행자 : ㈜장흥친환경 / 전문운영사 ㈜한미엔텍
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’06.09.29. : 시설사업 기본계획 고시 - 사업관련자 : 담당자 박신주, 정종훈, 담당 김기정, 소장 위창환 ◦ ’07.09.19. : 실시협약체결(장흥군 ↔ 장흥친환경) - 사업관련자 : 담당자 박신주, 정종훈, 담당 김기정, 소장 위창환 ◦ ’08.04.14. : 실시계획 승인 및 고시 - 사업관련자 : 담당자 박신주, 정종훈, 담당 김기정, 소장 위창환 ◦ ’08.04.30. : 공사 착공 - 사업관련자 : 담당자 박신주, 정종훈, 담당 김기정, 소장 위창환 ◦ ’09.07.02. : 건축협의 완료(장흥, 관산, 대덕 처리시설) - 사업관련자 : 담당자 김근형, 담당 김병원, 소장 김광렬 ◦ ’10.05.07. : 시험가동 - 사업관련자 : 담당자 김근형, 담당 김병원, 소장 김광렬 ◦ ’11.03.18. : 공사 준공 - 사업관련자 : 담당자 김근형, 담당 김병원, 소장 김광렬 ◦ ’11.03.18. 이후 : 하수관거 임대 개시 - 사업관련자 : 담당자 김근형, 담당 김병원, 소장 김광렬 - 사업관련자 : 담당자 위용관, 담당 위계륙, 소장 김기정 - 사업관련자 : 담당자 강지회, 담당 심우성, 소장 김문호 - 사업관련자 : 담당자 변화순, 담당 심우성, 소장 김문호 - 사업관련자 : 담당자 조형석, 담당 김도형, 소장 길현종 - 사업관련자 : 담당자 조문호, 담당 김도형, 소장 길현종 - 사업관련자 : 담당자 조문호, 담당 김선정, 소장 문영백

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-48	담당부서 작성자	수도사업소 (조문호 / 061-860-074)
정 책 명	하수관거 및 하수종말처리장 위탁운영
사업개요	◦ 추진배경 : 군재정대비 대규모 사업비가 투자되는 사업으로서 민간자본을 유치하여 선투자후 군에서 임대 사용하는 형태의 사업으로서 단기간 수질개선을 통한 환경보호 도모 ◦ 사업대상 : 장흥 관산 대덕 회진 소재지 일원 ◦ 사 업 량 : 하수관로 76km, 하수처리시설 4개소 ◦ 임대기간 : 2011. 3. 19. ∼ 2031. 3. 18. ◦사업시행자 : ㈜장흥친환경 / 전문운영사 ㈜한미엔텍
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’06.09.29. : 시설사업 기본계획 고시 - 사업관련자 : 담당자 박신주, 정종훈, 담당 김기정, 소장 위창환 ◦ ’07.09.19. : 실시협약체결(장흥군 ↔ 장흥친환경) - 사업관련자 : 담당자 박신주, 정종훈, 담당 김기정, 소장 위창환 ◦ ’08.04.14. : 실시계획 승인 및 고시 - 사업관련자 : 담당자 박신주, 정종훈, 담당 김기정, 소장 위창환 ◦ ’08.04.30. : 공사 착공 - 사업관련자 : 담당자 박신주, 정종훈, 담당 김기정, 소장 위창환 ◦ ’09.07.02. : 건축협의 완료(장흥, 관산, 대덕 처리시설) - 사업관련자 : 담당자 김근형, 담당 김병원, 소장 김광렬 ◦ ’10.05.07. : 시험가동 - 사업관련자 : 담당자 김근형, 담당 김병원, 소장 김광렬 ◦ ’11.03.18. : 공사 준공 - 사업관련자 : 담당자 김근형, 담당 김병원, 소장 김광렬 ◦ ’11.03.18. 이후 : 하수처리시설 및 하수관거 임대 개시 - 사업관련자 : 담당자 김근형, 담당 김병원, 소장 김광렬 - 사업관련자 : 담당자 위용관, 담당 위계륙, 소장 김기정 - 사업관련자 : 담당자 강지회, 담당 심우성, 소장 김문호 - 사업관련자 : 담당자 변화순, 담당 심우성, 소장 김문호 - 사업관련자 : 담당자 조형석, 담당 김도형, 소장 길현종 - 사업관련자 : 담당자 조문호, 담당 김도형, 소장 길현종 - 사업관련자 : 담당자 조문호, 담당 김선정, 소장 문영백

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-49	담당부서 작성자	(안전건설과 / 로하스조성) (문종수 / 860-0535)
정 책 명	정남진 로하스타운 조성
사업개요	◦ 추진배경 : 새로운 정주도시 조성으로 인구유입 유도 및 신영농사업, 관광사업 및 신산업 등을 발굴하여 낙후된 지역 경제 활성화 기여 ◦ 추진기간 : 2010. ~ 2019. ◦ 총사업비 : 3,857억원(민자 80%, 국비 9% 도비 3% 군비 7% 기타 1%) ◦ 시 행 자 : 랜드러버스코리아외2, (재)장흥국제통합의학박람회, 장흥군 ◦ 주요내용 : 친환경 생태 휴양도시 조성 A=2,296,070㎡
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’16.04.21. : 로하스타운 개발계획 변경(안) 협의결과 - 관련자 : 로하스타운조성사업소 주무관 김경로, 담당 정종훈, 소장 김기정, 부군수서은수, 군수 김성 ◦ ’17.01.22 : 로하스타운 개발계획변경 추진계획 - 관련자 : 로하스타운조성사업소 주무관 김경로 , 담당 정종훈, 소장 김기정, 부군수 위삼섭, 군수 김성

정책실명 공개과제 사업관리이력서

정책실명제 등록번호	2015-50	담당부서 작 성 자	(장흥군 로하스타운조성사업소) (이기준 / 061-860-0535)
정 책 명	로하스타운 주도로 및 1단계지구 진입로 개설(완료)
사업개요	❏ 추진배경 : 로하스타운 입주민의 교통편의 및 안전 확보 ❏ 추진기간 : ’15. 01. 07. ~ ’16. 12. 20. ❏ 총사업비 : 4,781백만원 ❏ 주요내용 ◦ 주도로 개설 L=1,936m, B=23.2m / 진입도로 개설 L= 300m, B=12.9m ❏ 시 공 사 : (주)에이스종합건설 대표 명재정
추진경과 및 사업 관련자	❏ 사업관련자 현황 ◦ ’14. 2. 6. : 주도로 및 1단계지구 진입로 개설공사 실시설계용역 시행 - 관련자 : 로하스조성사업소 김군창, 로하스조성담당 김안곤, 소장 박광규 ◦ ’14. 8. 18. : 주도로 및 1단계지구 진입로 개설공사 실시설계용역 준공 - 관련자 : 로하스조성사업소 김군창, 로하스조성담당 김안곤, 소장 박광규 ◦ ’14. 11. 28. : 주도로 및 1단계지구 진입로 개설공사 계약심사 - 관련자 : 로하스조성사업소 김군창, 로하스조성담당 김안곤, 소장 박광규 전라남도 회계과 김순종, 계약심사담당 백창환, 회계과장 장역식 ◦ ’14. 12. 24. : 주도로 및 1단계지구 진입로 개설공사 실시계획 승인 - 관련자 : 로하스조성사업소 김근형, 로하스조성담당 정봉식, 소장 김기정, 부군수 윤승중, 군수 김성 ◦ ’15. 1. 12. : 주도로 및 1단계지구 진입로 개설공사 계약 및 착공 - 관련자 : 로하스조성사업소 김근형, 로하스조성담당 정봉식, 소장 김기정 재무과 정화영, 경리담당 임용현, 재무과장 이순임 ◦ 16. 12. 20. : 주도로 및 1단계지구 진입로 개설공사 준공 - 관련자 : 로하스조성사업소 김경로, 로하스조성담당 정종훈, 소장 김기정