109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 장흥군에서 ‘17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
도시가스 공급	10,787	7,610	3,127	50	2019	2014	95%
정남진권 푸른숲 조성사업	5,000	3,108	1,387	1,505	2018	2015	100
탐진강 관광명소화	8,000	-	5,350	2,650	2019	2015	65
도로 및 지하시설물 전산화 사업	1,920	233	300	1,387	2019	2016	40
공예태후 어머니 테마공원조성 사업	3,000	-	1,000	2,000	2019	2016	45
블루투어 수문랜드 조성사업	5,000	1,000	1,000	3,000	2019		20
향토산업육성사업 (장흥한우융복합산업화)	3,000	700	1,206	1,094	2019	2015	70
장흥군 공공형 승마장 조성사업	4,482	2,082	1,812	588	2018	2013	95
제26회 한국임업후계자 전국대회	230		230		2017	2017	100
제10회 정남진 장흥 물축제	2,000		2,000				100
제1회 회령포 문화축제	115	-	115	-	2017	-	100
대한민국 통합의학 박람회	1,006		1,006	1,000		2017	50

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2017년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

도시가스 공급

담당자

기업지원과 이지원(☎860-0354)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민에게 친환경 도시가스를 공급하여 연료비 경감 등 지역주민의

생활 편익 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. 1. ~ 2019. 12. 31. / 5년간

○ 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍

○ 규 모 : 배관공사 25.1km, 지구정압 1기, 지역정압 4기

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,787백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	10,787	7,610	3,127	50	-
국 비
시 도 비	400	250	100	50
시군구비	4,638	3,400	1,238
지 방 채
민간자본	5,749	3,960	1,789
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 장흥읍 27.5km 배관공사 완료                          : 2015 ~ 2017

○ 장흥읍내 소구간 공사, 바이오식품산단 배관공사 추진중  : 2018 ~

□ 향후계획

○ 미공급 중인 공급 희망지역에 대하여 도시가스 추가공급

○ 바이오식품산단 배관공사로 입주기업 운영편익 도모

사업명

정남진권 푸른숲 조성사업

담당자

환경산림과 곽광호(☎860-0403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 사유림 경영의 선도자인 임업후계자와 가족이 한마음 한뜻으로 뭉치는

자리로 산림 경영에 대한 정보교류의 장으로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년

○ 위 치 : 장흥군 탐진강둔치 수변공원

○ 규 모 : 1식(7,000명 참석)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,000	3,108	1,387	1,505
국 비		1,554	694	753
시 도 비		466	208	226
시군구비		1,088	485	526
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 방풍림 및 경관 숲 조성 : 2015년 ~ 2018년

○ 태풍 피해지 보완 : 2018. 8월 ~ 9월

□ 향후계획

○ 시비 및 가지치기 : 2019년 ~ 2020년

○ 고사목 제거 및 보식 : 2019. 2월 ~ 6월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

탐진강 관광명소화 사업

담당자

문화관광과 이명록(☎860-0229)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관광자원인 탐진강을 정남진 토요시장, 편백숲 우드랜드, 장흥댐, 물축제와

연계하여 힐링 및 즐길 수 있는 지속가능한 관광자원으로 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 장흥읍 탐진강 일원

○ 규 모 : 다목적 물놀이장(3,948㎡), 바닥분수(1,665㎡), 음악분수(157㎡),

징검다리(993㎡), 편의시설 및 기타(2,586㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	8,000	2,850	2,500	1,660	990
국 비	4,800	1,710	1,500	996	594
시 도 비
시군구비	3,200	1,140	1,000	664	396
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 기본 및 실시설계 용역 수립            : 2015. 2. ~ 2016. 12.

○ 행정협의 추진                         : 2017. 4. ~ 2018. 3.

- 익산지방국토관리청 하천점용 완료

○ 1차분 사업 추진                       : 2017. 6. ~ 2018. 12.

- 징검다리, 음악분수 등

○ 2차분 사업 추진                       : 2018. 1. ~ 2019. 6.

- 다목적물놀이장, 바닥분수, 편의시설 등

□ 향후계획

○ 사업준공                              : 2018. 12.

○ 다목적물놀이장 등 운영                : 2019. 6. ~

사업명

어머니 테마공원 조성사업

담당자

문화관광과 이명록(☎860-0229)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천관산 도립공원의 자연, 문화, 역사와 조화를 이룰수 있는 친환경적인

자연공원 조성으로 천관산 도립공원을 찾는 방문객들에게 다양한 볼거리

및 체험거리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2019년

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 관산읍 옥당리 147번지 일원

○ 규 모 : 어머니 테마공원 조성(9,957㎡), 엄마가 생각나는 길(2.3km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000		1,000	934	1,066
국 비	1,800	-	600	560	640
시 도 비		-
시군구비	1,200	-	400	374	426
지 방 채		-
민간자본		-
기 타		-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 기본 및 실시설계용역                  : 2017. 1. ~ 2018. 6.

○ 사업 총괄계약 및 1차분 시행           : 2017. 11. ~ 2018. 3.

- 토공사, 배수공사 등

○ 2차분 시행                            : 2018. 4. ~ 2018. 12.

- 중앙광장, 연못 등 시설물 및 조경수 식재

□ 향후계획

○ 3차분 사업추진                        : 2019. 1. ~ 2019. 11.

- 무대설치, 조형물, 산책로 조성 등

○ 관리 및 운영                          : 2019. 11. ~

- 천관산 도립공원과 연계한 다양한 볼거리 제공

사업명

도로 및 지하시설물전산화사업

담당자

열린민원과 김대홍(☎860-0262)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 및 상․하수도에 대해 측량․조사하여 전산화함으로써 지하시설물의

정확한 위치 파악이 가능하며, 무분별한 굴착 공사 방지 및 각종 재난

사고를 미연에 방지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019

○ 위 치 : 장흥읍 시가지 일원

○ 규 모 : 259.26㎞, 13.6㎢

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,920백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,920	233.34	300	216.67	1,169.99
국 비	1,152	140	180	130	702
시 도 비
시군구비	768	93.34	120	86.67	467.99
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3차, 40%)

○ 1차 - 32.13㎞, 1.71㎢ 완료(도로 10.74 상수도

○ 2차 - 41.52㎞, 2.12㎢ 완료,

○ 3차 - 29.4㎞,  1.47㎢ 조사/측량 완료 후 성과심사 준비 중

□ 향후계획(2019)

○ 사업비 : 1,170백만원(국비 702백만원, 군비 468백만원)

○ 사업량 : 156.2㎞(도로 53.33㎞, 상수 36.48㎞, 하수 66.4㎞)

- 기준점 설치 : 2급(35점), 4급(97점)

- 도로시설물 조사 및 측량, 상수도․하수도 조사/탐사

- 정위치편집, 구조화편집, 시설물 도면제작 편집 등

사업명

블루투어 수문랜드 조성사업

담당자

해양수산과 최채홍(☎860-0408)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연자원을 최대한 보존하면서 휴양․레저 등 체류형 관광기반여건 조성으로       지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 2.~ 2019. 12.

○ 위 치 : 장흥군 안양면 수문리 일원

○ 규 모 : 캠핑장, 산책로, 진입도로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,000	1,000	1,000	1,000	2,000
국 비	2,500	500	500	500	1,000
시 도 비
시군구비	2,500	500	500	500	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2017. 12. : 공사계약 체결(총괄 및 1차분)

○ 2018.  1. : 공사 착공(1차분)

○ 2018.  4. : 공사 착공(2차분)

□ 향후계획

○ 2019. 1. : 공사 발주(3차분)

○ 2019. 2.~ 12. : 공사 추진 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

향토산업육성사업

담당자

축산사업소 이영주(☎860-6707)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥군 대표 한우자원을 활용하여 융복합화를 통한 지역경쟁력 강화

○ 다양한 소비자 기호를 충족하여 토요시장 제2의 도약 ‘

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2019년

○ 위 치 : 장흥군 일원

○ 규 모 : 사업단 운영, 연구개발 홍보 마케팅, 공동이용시설, 육가공시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,000	700	1,206	874	220
국 비	1,500	350	656	294	200
시 도 비	150	42	66	42
시군구비	600	168	264	168
지 방 채
민간자본	750	140	220	370	20
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 사업단 발족 및 사무국장 선임

○ 선진지 견학 추진

○ 장흥한우 소비촉진 시식회 및 홍보 개최 2회

○ 한우 레시피 개발 용역 추진

○ 토요시장 간판 정비 사업 추진

□ 향후계획

○ 가공식품 및 숙성제품 연구 개발

○ 육가공시설 및 체험홍보 시설

○ 육질개선(사육환경 및 사양방법 개선)

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

장흥군 공공형승마장 조성사업

담당자

축산사업소 이정석(☎860-6716)

□ 사업목적 및 필요성

○ 승마장 조성에 따른 승마 사업의 지속적, 체계적인 발전

○ 로하스타운 지구 조성, 우드랜드 운영 등과 연계한 승마인의 저변 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2018년

○ 위 치 : 장흥군 안양면 기산리 로하스타운 조성 지역

○ 규 모 : 부지 28,907㎡, 시설 3,687㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,482백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,482	2,082	1,812	588
국 비	1,850	650	906	294
시 도 비	130	130
시군구비	2,502	1,302	906	294
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 1단계 기반 공사 21,717㎡

○ 승마장(실내) 2,450㎡, 승마장(실외) 4,383㎡

○ 클럽하우스 281㎡, 축사(마방) 605㎡, 부대시설 351㎡

□ 향후계획

○ 기타 마감공사

□ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명

제26회 한국임업후계자 전국대회

담당자

환경산림과 곽광호(☎860-0403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정남진 전망대 주변의 황폐해진 산림과 마을 주변에 푸른숲을 조성하여

자연경관 차별화와 방품림, 생활권 녹색공간 확충

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 장흥군 관산읍 삼산방조제, 정남진 전망대 일원

○ 규 모 : 300ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	230		230
국 비
시 도 비			100
시군구비			100
지 방 채
민간자본			30
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 전국대회 개최 : 2017. 8. 7. ~ 8. 9.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

제10회 정남진 장흥 물축제

담당자

문화관광과 전희석(☎860-0380)

□ 사업목적 및 필요성

○ 호수(장흥댐), 강(탐진강), 바다(득량만)이 분포되어 있는 지역의 이점을

활용하여 특색있고, 차별화 된 대표축제 개발 필요성이 대두되어

◦ 군민의 오랜 숙원 및 여론에 따라 물을 주제로 하는 군의 대표축제로

육성개발 관광자원화 및 지역경제 활성화 도모

◦ 우리나라 여름 대표 축제로 자리 잡았으며 올해로 10회째를 맞이하면서 3년 연속 문화관관광 유망축제와 2년 연속 문화관광 우수축제에 선정되는 등 우리군의 이미지와 브랜드가치 제고는 물론 지역경제 활성화에 크게 기여함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 7. 28. ~ 8. 3.

○ 위 치 : 장흥읍 탐진강 및 편백숲 우드랜드 일원

○ 규 모 : 물축제 운영 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계
국 비			100
시 도 비
시군구비			1,900
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 제10회 정남진 장흥 물축제 개최

- 관광객 수 : 449,340명

- 직접경제효과 : 27,291백만원

□ 향후계획

○ 축제 지속 개최 및 물 관련 산업 유치

사업명

제1회 회령포문화축제

담당자

문화관광과 이상석(☎860-0228)

□ 사업목적 및 필요성

○ 회령포 역사성 찾기, 명량대첩 기포지 홍보, 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년

○ 장 소 : 전라남도 장흥군 장흥읍 탐진강 일원

○ 내 용 : 삼군수군통제사 입성식 시가 행렬, 12척 해상 퍼레이드,

회령포 세미나, 판옥선 체험, 풍물패 길놀이 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 115백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	115		115
국 비
시 도 비
시군구비	105		105
지 방 채	10		10
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017 회령포 문화축제           : 2017. 10. 13. ~ 2017. 10. 15.

사업명

2017 대한민국통합의학박람회

담당자

기업지원과

이은하(☎061-860-0874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 통합의학 선점 및 통합의료서비스, 연구, 제약, 의료관광 활성화 등 연관 산업

육성을 통한 지역발전 도모

○ 양․한의학적 의료지식과 검증된 대체의학의 치료기법이 융합하여 환자 중심의

의료서비스인 통합의학에 대한 정보교류 및 의료 관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 10. 20. ~ 10. 26.

○ 위 치 : 안양면 국제통합의학박람회장

○ 규 모 : 122개 기관 참가(국제 2개국)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :        백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,006		1,006	1,000
국 비	922		422	500
시 도 비				-
시군구비	1,084		584	500
지 방 채				-
민간자본				-
기 타				-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 박람회 개최 : 10. 20. ~ 10. 26.(7일간)

○ 참가기관 단체 : 122개소

- 국내 양방‧한방 의료기관 : 26개소

- 대학‧협회‧단체 : 21개소(대학 6, 협회‧단체 등 15)

- 기타 : 75개소(보건소 22, 의료산업관 20, 건강음식관 3 무대행사 등 30)

○ 총관람객수 : 15만명 / 검진체험자 59천명

□ 향후계획

○ 통합의학박람회를 통한 지역 의료산업 발전모델 구축

10-2. 지방채 발행사업

해당없음

10-3. 민간투자사업

우리 장흥군에서 ‘17년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’16년까지 부담액	’17년 부담액	’18년 이후 부담 예정액
BTL	장흥군 하수관거시설	장흥 친환경(주)	71,404	23,168	3,446	44,790	’11.3.~ ’31.3.
BTO	장흥군 하수종말처리장	장흥 친환경(주)	30,626	9,292	2,102	19,232	’11.3.~ ’31.3.

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2017년까지는 집행액(결산기준), 2018년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

장흥군 하수관거시설(BTL) 민간투자사업

담당자

수도사업소 조문호

(☎860-0746)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임대형 민자사업(BTL)을 통하여 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관       거시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수․       방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 국민의       삶의 질을 향상

□ 사업개요

○ 위탁기간 : 2011. 3. 19. ~ 2031. 3. 18(20년간)

○ 대상시설 : 4개소(장흥, 관산, 대덕, 회진 시가지 일원)

○ 운영업체 : 장흥친환경(주) / 전문운영사 : (주)한미엔텍

○ 총사업비 : 71,404백만원

○ 사업규모 : L=73.1㎞, 처리구역 439.98㏊

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	71,404	23,168	3,446	3,446	41,344
국 비	48,555	15,754	2,343	2,343	28,114
시 도 비
시군구비	22,849	7,414	1,103	1,103	13,230
기 타

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 분기별 지급계획에 따라 임대료 및 운영비 지급

사업명

장흥군 하수관거시설(BTO) 민간투자사업

담당자

수도사업소 조문호

(☎860-0746)

□ 사업목적 및 필요성

○ 임대형 민자사업(BTO)을 통하여 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수종말처리시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수․방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리효율 제고 등을 도모하여 국민의 삶의 질을 향상

□ 사업개요

○ 위탁기간 : 2011. 3. 19. ~ 2031. 3. 18(20년간)

○ 대상시설 : 4개소(장흥, 관산, 대덕, 회진 시가지 일원)

○ 운영업체 : 장흥친환경(주) / 전문운영사 : (주)한미엔텍

○ 총사업비 : 30,626백만원

○ 사업규모 : 장흥 4,400톤㎥/일, 관산 600㎥/일, 대덕 800㎥/일, 회진 600㎥/일

□ 재정부담 현황

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	30,626	9,292	2,102	2,102	17,130
지 방 채
국 비
시 도 비
시군구비	30,626	9,292	2,102	2,102	17,130
기 타

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 월별 지급계획에 따라 사용료, 전기요금, 슬러지처리비, TMS운영비 등        관련 비용 지급