11

특수공시(핵심 지역숙원사업 또는 특수 유치사업)

추진부서	사 업 명	비고
재무과	◦ 장흥군 청사 신축
주민복지과	◦ 장흥군 보훈회관 건립
해양수산과	◦ 2020년 장흥군 어촌뉴딜300사업(노력항)
환경관리과	◦ 쓰레기 없는 깨끗한 장흥 만들기
건설도시과	◦ 정남진 장흥 랜드마크 조성(예양교)
건설도시과	◦ 우드랜드 진입도로 확포장 추진
스포츠산업단	◦ 대한민국 체육인재개발원 건립

장흥군 청사 신축

현 청사

현   황

구 분	본 관 동	별 관 동	의 회 동
건축년도	1977년 (43년 경과)	1965년 (55년 경과)	2003년 (17년 경과)
연 면 적	4,111㎡	539㎡	1,949㎡
안전등급	D등급	B등급	C등급

건립방향		▪ 직장어린이집, 모유수유시설, 여성휴게실 등 여성·아이들을 위한 편의시설과 전시실, 공연장, 북카페, 주민쉼터 등 문화복합청사이자 군 랜드마크로 건립

기대효과		▪ 군민과 직원들의 안전 보장, 장애인 및 어르신 등 교통약자의 청사 이용 편의 ▪ 직원들의 업무 능률을 향상시키고 최근 변화하는 공공청사 건립 방향(공간의 복합성, 주민 편의성, 디자인, 친환경성)과 부합한 시설로서 역할 담당

사 업 개 요

대지면적 : 10,563㎡(3,195평) / 현 청사 부지 신축

시설규모 : 연면적 14,200㎡(4,295평) / 지하 2층, 지상 7층

- 법적기준 : 9,891㎡(본청 8,385, 의회 1,506),  제외면적(공용) : 4,309㎡

사 업 비 : 397억원 / 기확보 359, 추가확보 38

《연도별 투자계획》

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2021년 까지	2022년	2023년이후
계	397	-	25	372
국 비	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-
군 비	397	-	25	372
자 담	-	-	-	-

사업진행 현황

「장흥군 청사신축 건립기금 조성 조례」제정 : 2016. 12월

건축물 정밀안전진단 실시               : 2018. 12월

장흥군 청사정비계획 수립용역           : 2019.  7월

청사 신축 타당성 조사 및 기본계획 착수 : 2019. 11월

청사 신축 관련 설문조사 실시(2,849명)   : 2019. 10. ~ 2020. 6월

군민공청회(2회) 및 읍면별 공청회 개최   : 2020.  5. ~ 2020. 6월

ARS 설문조사 실시(1,000명)              : 2020. 6. 19. ~ 6. 29.

청사 배치도

장흥군 보훈회관 건립

실 태		▪ 현. 보훈단체 사무실이 군민회관&안보회관 등 타 시설에 각 4개씩 입주해 있어 단체간 화합과 업무 추진 효율성 저해 ▪ 보훈단체의 오랜 숙원사업으로 단체 사무실 신축을 지속적으로 건의

추진방향		▪ 기반구축 : 보훈회관 운영 관련 조례 마련, 보훈단체 회원들의 사무 공간 마련 ▪ 복지사업 : 보훈 병원 진료 지원 및 국가유공자 지원 상담 등

기대효과		▪ 보훈회관 건립으로 국가유공자 등 보훈가족의 친목도모와 여가선용 및 복지 증진

사 업 개 요

위    치 : 장흥군 장흥읍 건산리 211-1

사업기간 : 2019 ~ 2022(공사기간 : 2022. 3. ~ 12.)

사업규모 : 부지 1,855㎡, 연면적 990㎡(지상 3층)

사 업 비 : 43.5억원(국비 5억원, 군비 38.5억원)

《연도별 투자계획》

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년 까지	2020년	2021년	2022년이후
계	43.5	8.5	2.5	2.5	30
국 비	5	-	2.5	2.5	-
도 비	-	-	-	-	-
군 비	38.5	8.5	-	-	30

사업진행 현황

2019년 9월 : 국가보훈처 보훈회관 건립사업 확정

2019년 9월 ~ 12월 : 지방재정투자심사 및 공유재산 심의회 등 절차 이행

2019년 11월 : 보훈회관 건립 부지 매입

2020년 9월 : 사업계획 변경(공유재산관리계획 승인)

건축면적 : 500㎡ → 990㎡

건축비용 : 2,500백만원 → 3,300백만원

2021년 2월 ~ 8월 : 군관리계획(공공청사) 결정(변경) 용역

2021년 3월 ~ 5월 : 사업 사전검토 및 건축기획 용역

2021년 7월 ~ 8월 : 건축설계 디자인 공모

위 치 도

현장사진

2020년 장흥군 어촌뉴딜300사업(노력항)

실 태		▪ 공통사업 : 접안시설 연장, 여객터미널 정비, 어선피항시설 ▪ 특화사업 : 노령분교 리모델링, 어구어망 보관시설, 경관정비 ▪ SW사업 / 사업지원 : SW사업, 설계/감리

추진방향		▪ 공통사업 - 폭풍 및 계절풍으로 인한 선박 파손 및 인명피해를 최소화 하기위해 동·서측 방파제를 연장하여 항내 정온도 확보 ▪ 특화사업 - 지역주민 및 어촌계원들의 정보교류와 모임 등을 위한 공간 및 휴게· 복지시설을 마련함으로써 편의를 중심으로 집회장소 마련 ▪ SW사업 - 워크숍 교육, 브랜드 개발 및 홍보 마케팅등의 역량강화 교육을 진행하여 노력마을만의 특색에 맞는 역량을 갖출 수 있도록 지속적 관심 필요

기대효과		▪ 어항 내 기본시설, 편익시설, 편의시설 정비·확충을 통한 어촌지역 혁신성장을 견인하여 어항주민 정주여건 개선 및 방문객 증대 기여

사 업 개 요

위    치 : 전라남도 장흥군 회진면 덕산리 노력도 일원

사업기간 : 2019 ~ 2021

사업규모 : 부지 1.83k㎡

사 업 비 : 88억원(국비 61.6억원, 도비 7.92억원, 군비 18.5억원)

《연도별 투자계획》

(단위 : 억원)

구 분	총사업비	2019년	2020년	2021년
계	88	30.8	39.6	17.6
국 비	61.6	21.56	27.72	12.32
도 비	7.92	2.56	3.56	1.8
군 비	18.5	6.68	8.32	3.5

사업진행 현황

2019. 04. 02	: 위·수탁 계약(한국어촌어항공단)

2019. 05. 13 : 기본계획 및 실시설계용역 착수

2019. 11. 05 : 제4차 기본계획 심의

2020. 01. 07 : 장흥군 어촌뉴딜300사업(노력항) 사업계획 수립·고시

2020. 01. 16 : 실시설계용역 착수

2020. 12. 02 : 생활SOC사업 1차 선발주(어구·어망 보관시설) 착공

2020. 12. 21 : 생활SOC사업 2차 선발주(어선피항시설 연장공사) 착공

2021. 06. 03 : 전남도 시행계획 사전 협의

2021. 06. 21 : 장흥군 어촌뉴딜300사업(노력항) 시행계획 고시

2021. 07. 19 : 잔여공사(노령분교 리모델링, 접안시설 등) 착공

위 치 도

조 감 도

쓰레기 없는 깨끗한 장흥 만들기

실 태		▪ 거점수거대 현황 : 25개소(장흥읍) ▪ 청소차량 : 25대 ▪ 장흥읍 시가지를 중심으로 쓰레기 무단투기 등 경관을 저해 및 악취유발로 군민들의 불편이 가중되고 있고, 청소차량 노후화로 쓰레기 수거 작업 시 환경실무원 안전대책 필요

추진방향		▪ 청소행정 현대화 지속 추진 ▪ 생활쓰레기 분리배출 거점수거대 읍면 확대 설치

기대효과		▪ 청소행정 현대화, 생활쓰레기 거점수거대 확대설치 등을 통해 쓰레기 없는 깨끗한 장흥 만들기에 기여하고, 영농폐비닐 수거장려금 지급으로 자원순환 체계 구축

사 업 개 요

위    치 : 장흥군 관내

사업기간 : 계속사업

사업내용 : 청소장비 현대화(청소차량 등), 거점수거대 확대 설치, 영농폐비닐 수거 보상금 지급

사업진행 현황

도로노면청소차(전기) 1대 구입

생활쓰레기 거점수거대 15개소 설치(장흥읍)

영농폐비닐 수거장려금 인상(A등급 160원/kg, B등급 140원/kg, C등급 120원/kg)

- 영농폐비닐 수거장려금 지급 현황

년도	수거량 (kg)	예산액(천원)			집행액(천원)			잔액 (천원)	kg당 단가
		계	국도비	군비	계	국도비	군비
합계	1,412,450	156,130	35,410	120,720	110,143	25,753	84,389	45,986
2018	465,700	30,430	10,270	20,160	28,014	9,328	18,686	2,416	50, 70
2019	484,650	61,200	12,240	48,960	38,772	7,754	31,017	22,428	80, 120
2020	462,100	64,500	12,900	51,600	43,357	8,671	34,686	21,142	120,140,160

향후 추진계획

청소차량(한국형 진개덤프 1대, 1톤 트럭 1대) 구입

- 내구연한 경과된 청소차량에 대해 연차적 교체

생활쓰레기 분리배출 거점수거대 읍면 확대 설치(15개소)

- 읍면 시가지, 불법투기지역을 대상으로 수요조사 후 확대 설치

위 치 도

사진대지

생활쓰레기 분리배출 거점수거대	도로노면 청소차

정남진 장흥 랜드마크 조성(예양교)

기대효과		▪ 토요시장 진입교량 가설을 통한 교통체계 개선과 안전사고 예방 ▪ 교량시설에 경관디자인 설치 반영으로 장흥관광 랜드마크 조성

사업개요

위    치 : 장흥읍 건산리 ~ 예양리 지내(탐진강 내)

총사업비 : 11,350백만원(국비7,000 군비4,350)

사업기간 : 2019. 05. ~ 2023. 12.

사업내용 : 교량신설 L=201m, B=13m / 접속도로개선 1식 / 경관디자인 1식

사업진행 현황

2019. 05. : 실시설계 착수

2019. 07. ~ 08. : 관계기관 협의(순천국토관리사무소, 익산청, 도로교통공단)

2019. 10. ~ 11. : 교량공법 제안공모 및 심의회 개최(HPC 강재 거더공법)

2020. 02. : 실시설계용역 중간보고회 개최(실과소 의견 청취)

2020. 03. ~ 04. : 사업구역 내 주변상가(6개소) 의견 청취

2020. 05. ~ 12. : 경관디자인 공모, 자문위원회 개최 후 최종설계안 확정

2021. 01. ~ 07. 최소경간장 관련 익산국토관리청 협의 및 실시설계 추진

2020. 08. : 특별교부세 5억원 확보

향후 추진계획

2021. 09. : 특허공법 선정 및 설계경제서 검토 용역추진

2020. 09. ~ 10. : 행정 인허가 협의(비관리청도로공사, 하천점용)

2020. 10. ~ 11. : 전라남도 건설기술심의위원회 심의

2020. 11. ~ 12. : 지역개발사업 구역 지정 및 실시계획승인(행정절차 완료)

2020. 12. 이후  : 사업 총괄 발주 및 1차년도 사업 시행

위치도 및 조감도

우드랜드 진입도로 확포장 추진

기대효과		▪ 년간 70만명의 관광객이 방문하는 거점 관광지로 진입도로 협소 ▪ 도로환경 개선을 통한 교통편익 증진 및 관광인프라 구축

사 업 개 요

위    치 : 장흥읍 우산리 우드랜드 진입도로 일원

총사업비 : 3,500백만원(국비100%)

사업기간 : 2019. 05. ~ 2022. 06.

사업내용 : 도로확포장 L=940m, B=17m

사업진행 현황

2020. 04. : 지역개발사업 실시계획 승인

2020. 06. : 총괄 및 1차분 사업 발주

2020. 07. : 건설폐기물 처리용역, 전기공사 총괄 발주

2020. 08. : 사업 착공에 따른 주민설명회 개최

2020. 12. : 1차분 기성검사 및 2차분 사업 발주

2021. 06. : 총괄 및 차수분 1회 변경 시행

향후 추진계획

2022. 01. : 3차분 발주

2022. 06. : 총괄 사업 준공

위 치 도

대한민국 체육인재개발원 건립

주요시설		▪ 교육동 : 지상4층 / 교육인원 200명 동시수용 ▪ 숙박동 : 지상4층 / 숙박인원 200명 동시수용 / 숙소, 편의시설, 체력단련실 등 ▪ 다목적체육관 : 지상 2층 / 핸드볼경기 활용 가능

추진방향		▪ 교육․연수를 통한 스포츠의 공정한 가치 확산과 스포츠 분야의 부조리 근절, 성적이나 결과보다 과정의 공정성을 중시하는 국민 눈높이에 맞는 스포츠 시스템 구축 ⇒ 교육대상 : 경기인299천명(선수,지도자,심판 등) 사회인324천명(행정가,일반스포츠인,청소년 등)

기대효과		▪ 장흥댐 생태공원 일원을 친환경적이고 지속 발전 가능한 문화·관광· 스포츠명소로 개발하여 지역경제 발전에 기여 ▪ 체육인 역량 강화교육, 자격증 취득과정, 양질의 지도자 교육 등 / 연간 11만명 수용

사 업 개 요

사업기간 : 2020. ~ 2023. / 4년간

위    치 : 부산면 지천리 137-1번지 일원 / 146,192㎡(44,223평)

사업규모 : 부지면적 53,125㎡, 연면적 11,400㎡

소요예산 : 313억원(국비 / 기금)

주요시설 : 교육동(지상4층), 숙박동(지상4층), 다목적체육관(지상2층) 등

사업진행 현황

교육센터 유치과정

유치 관련 기관 방문(문체부, 대한체육회 등 / 19회) : 2017.  8. ~

체육인교육센터 공모사업 유치 신청            : 2019.  4.  2.

1차 현장평가(7개 시군)                        : 2019.  4.  9.

2차 종합평가 및 예비후보지 선정(장흥, 완도)      : 2019.  4. 16.

최종 도 평가(1차)                             : 2020.  2.  4.

대한체육회 최종평가(장흥군 선정)              : 2020.  2. 11.

우리군 진행 현황

체육인교육센터 건립·운영을 위한 MOU 체결   : 2020.  7.  9.

군 관리계획 결정(변경)용역 추진              : 2020.  9.

「스포츠인 교육 백년대계」비전 선포식        : 2020. 10. 20.

- 명칭변경 : 체육인교육센터 → 대한민국 체육인재개발원

군 계획위원회 자문(원안의결)                 : 2021.  6. 16.

군관리계획 결정(변경)(안) 전라남도 입안 신청  : 2021.  6. 29.

사업추진 계획

전라남도 도시계획위원회 심의                 : 2021.  9.

국유지 매입 / 장흥군                           : 2021. 10.

- 한국자산공사 대부계약 체결 완료(´20. 10. 16.) / 159필지, 115,506㎡

군관리계획(변경) 결정 고시, 실시계획 인가신청 : 2021. 10.

실시계획 인가고시 및 착공(1단계 사업)        : 2021. 12.

2단계 사업 단계별 추진                      : 2022. ~

부산면 지천리 137-1번지 일원

조 감 도