별첨7

10-1-1 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2020년 어촌뉴딜300사업(우산항)

담당자

해양수산과 나정환(☎860-6021)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 통합하고 활성화하여 어촌에 새로운 활력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

○ 위 치 : 장흥군 관산읍 삼산리 1548-2번지(우산항) 일원

○ 규 모 : 방파제 연장 30m, 물양장 1,800㎡, 어구보관장, 다목적커뮤니티센터,               마을안길정비 및 경과개선 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,451백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,451	2,454	2,454	3,780	3,217
국 비	6,616	1,718	1,718	2,646	2,252
시 도 비	850	221	221	340	289
시군구비	1,985	515	515	794	676
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 12. : 기본계획 고시 완료

○ 2021.  7. : 생활SOC사업 시행계획 협의 완료(전남도)

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 공사 착공

○ 2022. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

2020년 어촌뉴딜300사업(대리항)

담당자

해양수산과 김종준(☎860-6023)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 통합하고 활성화하여 어촌에 새로운 활력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

○ 위 치 : 장흥군 회진면 대리 115-10번지(대리항) 일원

○ 규 모 : 방파제연장 80m, 방파제신설 80m, 방파제 보강 280m, 어항진입로 개선 442㎡,                 다목적회관 리모델링 526㎡, 마을안길 및 교차로 정비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,463백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,463	2,457	2,457	3,785	3,221
국 비	6,624	1,720	1,720	2,650	2,255
시 도 비	851	221	221	340	290
시군구비	1,987	516	516	795	676
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 12. : 기본계획 고시 완료

○ 2021.  3. : 생활SOC사업 시행계획 협의 완료(전남도)

○ 2021.  7. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

2020년 어촌뉴딜300사업(신상·신기항)

담당자

해양수산과 김종준(☎860-6023)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌·어항을 통합하고 활성화하여 어촌에 새로운 활력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.

○ 위 치 : 장흥군 회진면 신상리 15-18번지(신상·신기항) 일원

○ 규 모 : 선착장 연장 250m(2개소), 선양장 신설 1,000㎡, 어구보관창고 설치(2개소),                다목적회관 리모델링, 마을경관개선 사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,094백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	8,094	2,115	2,115	3,237	2,742
국 비	5,666	1,481	1,481	2,266	1,919
시 도 비	728	190	190	291	247
시군구비	1,700	444	444	680	576
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 12. : 기본계획 고시 완료

○ 2021.  3. : 생활SOC사업 시행계획 협의 완료(전남도)

○ 2021.  7. : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

약용작물산업화 지원센터 건립

담당자

농산과 오주옥(☎860-5971)

□ 사업목적 및 필요성

○ “약용작물 산업화 거점센터” 구축으로 지역 유망 약용작물재배 활성화로       농가소득 증대, 건강기능식품 등 제품 산업화로 고부가가치 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022(3년)

○ 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 삼산리 바이오식품산업단지 C22-1

○ 규 모 : 부지 5,000㎡, 건축면적 1,345㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	6,500	593.8	506.2	2,700	2,700
국 비	3,000	295.3	4.7	1,350	1,350
시 도 비	900	88.6	1.4.	405	405
시군구비	2,600	209.9	500.1	945	945
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7.7%)

○ 부지매입 5,000㎡ / 496.7백만원 / 장흥바이오산업단지 내

○ 건축기획용역 완료 / 9.5백만원 / 공공건축 심의중

□ 향후계획

○군 공공건축 심의회 승인 후 도 계약심사 의뢰

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

제13회 정남진 장흥 물축제

담당자

문화관광과 전희석

(☎061-860-5771)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1급수를 활용하여 장흥군의 청정이미지를 널리 알리고 관광객 유치로

지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 7. ~ 8. 개최 예정이었으나 코로나19로 인해 미개최

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,060백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	216		216
국 비	108		108	30	30
시 도 비
시군구비	108		108	1,100	2,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 코로나19로 인해 미개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 : 2020년 7~8월중 개최 예정

○ 변경 : 코로나19로 인하여 미개최 의결 (‘20. 6. 2.)

사업명

대한민국통합의학박람회

담당자

미래혁신과 서승우

(☎061-860-6261)

□ 사업목적 및 필요성

○ 의학 인프라 구축을 통한 의료관광 활성화 및 미래신성장 동력산업육성

○ 통합의학의 메카로 위상을 세움으로써 지역경제 활성화 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 10월 예정이었으나 코로나19로 인한 박람회 미개최

○ 위 치 : 장흥통합의학박람회장

○ 규 모 : 77,742㎡(23,516평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2021년 이후
계	19,316.132	9,300	16.132	미개최	10,000
국 비
시 도 비	9,658.066	4,650	8.066	-	5,000
시군구비	9,658.066	4,650	8.066	-	5,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 코로나19로 인한 박람회 미개최

□ 향후계획

○ 통합의학박람회장 기반조성 실시설계                  : ‘21 .9 ~ 11.

○ 통합의학박람회장 기반공사 추진                       : ‘21. 11. ~ ’22. 3.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 : 2020년 10월 중 박람회 개최 예정

○ 변경 : 코로나19로 인하여 박람회 미개최 의결 (‘20. 6. 16.)

사업명

전남 소방안전체험관 유치

담당자

재난안전과 이규한(☎860-6174)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전남 소방본부에서 장흥군에 건립 추진중인 전남 소방안전체험관의 원활한 추진을 위해 예정부지 매입, 관리계획 변경 등의 재정 및 행정적 지원 업무 수행

○ 전남 소방안전체험관 사업부지 제공으로 전라남도 소방본부·소방교육대와 연계한 소방행정 중심 도시 위상 제고

○ 우드랜드, 토요시장과 연계한 새로운 관광자원 창출로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020 ~ 2024(5개년)

○ 위    치 : 장흥읍 우산리 5 등 111필지(160,000㎡)

○ 건립규모 : 지상4/지하1층, 토지면적 100,000㎡(3만평), 연면적 6,000㎡ 내외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,779백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	13,779	-	5,066	3,992	4,721
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	13,779	-	5,066	3,992	4,721
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65.73%)

○ 전라남도 소방안전체험관 건립계획 수립 (전남소방본부)     : 2019. 10월

○ 전라남도 소방안전체험관 건립 계획안 제출 (전남소방본부⇒소방청) : 2019. 12월

○ 전라남도 소방안전체험관 부지매입(90억원) 추진          : 2020 ~ 2021

- 총부지 3만평중 2만평 취득 완료

□ 향후계획

○ `21년 2회 추경(30억) 및 `22년 본예산 확보(17억) 후 잔여 부지 매입 추진

사업명

회진시장 시설현대화사업

담당자

지역경제과 정병권(☎860-5903)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시장 점포가 강풍에 취약한 조립식 패널로 지어져 있어 재해에 취약하고,

건축이후 20여년이 경과하여 유지보수 한계에 도달함

○ 바다와 접하고 있는 강점을 살려 수산물 시장과 지역 농·축·특산물을 활용한

특성화 시장으로 조성함으로써 전통시장의 새로운 활로 개척 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2022년

○ 위 치 : 장흥군 회진면 회진중앙길 9-13 일원

○ 규 모 : 건축철거(600.9㎡) 후 재건축 1식(수산물센터, 비가림시설 설치)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000				3,000
국 비	1,800				1,800
시 도 비
시군구비	1,200				1,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 2021년 회진시장 시설현대화사업 신청     : ’20.  4. 22.

○ 2021년 회진시장 시설현대화사업 선정     : ’20. 8.

○ 2021년 회진시장 시설현대화사업 재원협의 : ’20. 8. ~ 12.

□ 향후계획

○ 회진시장 기본계획 및 실시설계 용역      : ’21. 2. ~ 10.

○ 회진시장 시설현대화사업 신축공사 추진   : ’21.10. ~ ’22. 12.

사업명

구 방송국 부지 매입

담당자

재무과 김한솔(☎860-5742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 구)방송국 부지 일원을 매입하여 광주지방법원 장흥지원 및 장흥지청        신축부지 최종 결정에 따른 국·공유재산 교환 상황 발생 시 신속히 대응하고       군에서 시행하는 각종 사업대상지로 활용하고자 함.

□ 사업개요

○ 위  치 : 장흥읍 건산리 7번지 등 10필지

○ 면  적 : 토지 26,175㎡, 건물 424379㎡

○ 사업량 : 건산리 7번지등 10필지 및 건물 1동 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,036백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,036	-	6,036	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	6,036	-	6,036	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 취득계획 수립 :  2020. 6. 11.

○ 공유재산심의회 의결 및 공유재산관리계획 승인안 의결 : 2020. 7.

○ 투자심사위원회 의결 : 2020. 9. 18.

○ 소유권 이전 : 2020. 11. 6.

□ 향후계획

○ 장흥지원 신축부지 확정 시 (2023년 예정) 국유재산 교환 예정

사업명

장흥 노력항(어촌정주어항) 개발사업

담당자

해양수산과 나정환(☎860-6021)

□ 사업목적 및 필요성

○ 여객선 운항 중단 후 침체된 노력항의 활성화를 위하여 기수립된 어촌정주어항 개발계획에 따른 어항개발 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 장흥군 회진면 덕산리 2107-36번지 일원

○ 규 모 : 물양장 L=140m, 방파제 160m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	26,300	-	-	4,000	22,300
지 방 채	-		-	-	-
민간자본	-		-	-	-
기 타	-		-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 6. : 공유수면 매립면허 및 실시계획 인가(전남도)

○ 2020. 7. : 예산에 따른 사업량 조정(차수분 발주) 검토

□ 향후계획

○ 2021.  9. : 공사착공(총괄 및 1차분 발주)

○ 2023. 12. : 공사 완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

수산물 콜드체인 시스템 구축

담당자

해양수산과 이성환(☎860-6011)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2015년 여객선 중단 이후 침체된 노력항 활성화를 위한 돌파구 마련

○ 전남 최초 고등어 수산물 유통 전진기지를 구축하여 지역경제 활성화 및       고용창출로 어민 소득 증대 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 12 ~ 2022. 4

○ 위 치 : 장흥군 회진면 노력항 일원

○ 규 모 : 급냉시설 1동(건축면적 1,295 , 급냉실8칸, 전기4,00KVA 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,670백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2022년 이후
계	8,670	800	4,020	2,750	0
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,650	-	825	825	-
시군구비	7,020	800	4,295	1,925	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 12. : 사업부지(노력항 제1주차장) 매입 / 3,249평(군비8억)

○ 2021.  7. : 급냉시설 실시설계 완료

□ 향후계획

○ 2021. 7. : 전남도 계약심사 완료

○ 2021. 8. : 급냉시설 건립공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 계획에 따른 사업규모, 총사업비, 사업기간 등 변경사항 없음