109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 장흥군에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)	부서
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
정남진 위인공원 조성 (재상정)	14,000	-	-	-	14,000	2027	2021	10%	문 화 관광과
수문항 어촌뉴딜 300 (신규, 공모)	8,995	-	1,799	3,598	3,598	2023	2021	10%	해 양 수산과
2021년 신재생에너지 융복합지원사업	3,126		2,416	710	-	2022	2021	100%	지 역 경제과
가축분뇨친환경 공동발효센터 시범설치	2,000	0	0	1,400	600	2023	2021	0%	축 산 사업소
장흥바이오식품 산업단지 내 체육시설 용지 매입	15,800	0	500	2,568	12,732	2026	2021	25%	지역 경제과
쌀 가공 Re-cycling 플랫폼구축사업	3,000	-	-	3,000	-	2022	2021	60%	농산과
소등섬 둘레길 조성사업	3,000	-	-	1,000	2,000	2023	2021	15%	문 화 관광과
장흥형 스마트 그린도시 조성	10,000	0	1,906	8,094	0	2022	2021	30%	미 래 혁신과
바이오메디컬 R&D기반 글로벌진출지원	9,000						2021		미래 혁신과
부산면 행정복지센터 신축	2,500		58	2,442		2022	2021	13.8%	재무과
회진면 행정복지센터 신축	2,500		141	2,359		2022	2021	22%	재무과
정남진장흥찹쌀 주산단지 활성화 사업	3,230	-	420	2,810	-	2022	2021	60%	농산과

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘21년말 기준으로 작성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

정남진 위인공원 조성사업

담당자

문화관광과 박승아(☎860-5782)

□ 사업목적 및 필요성

○ ‘문림의향’ 역사성과 상징성을 강조한 색다른 관광자원 발굴 필요

○ 토요시장, 우드랜드, 정남진 물축제, 물과학관 등 기존 관광인프라와 연계한 문화·역사 관광 자원 개발

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022~2027

○ 위    치 : 장흥읍 물과학관 일원

○ 규    모 : 63,916㎡

○ 사업내용 : 위인공원, 추모광장, 관리사무소, 시대별 테마정원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,000				14,000
국 비	5,200				5,200
시군구비	8,800				8,800
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 기본계획 및 타당성용역	: ’19. 11. ~ ’20.  5.

○ 중기지방재정계획 반영	: ’20. 11.

○ 지방재정투자 심의 완료[2021년 제1차(정기)]	: ’21.  3.

○ 2022년 예산 신청	: ’21.  7.

○ 2023년 예산 신청	: ’22.  7.

□ 향후계획

○ 단계별 사업 시행	: '23.  1.

- 군 관리계획 결정용역, 토지보상(공유재산 심의) 등 추진

사업명

수문항 어촌뉴딜300

담당자

해양수산과 백찬선(☎6022)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌‧어항을 연계‧통합하여 접근성 및 정주여건 개선, 수산‧관광        등 산업발전 및 어촌주민역량 강화 등을 통한 어촌지역의 활력 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 장흥군 안양면 수문항 일원

○ 규 모 : 물양장 설치 130m, 키조개복합커뮤니티센터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,995백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,995	-	1,799	3,598	3,598
국 비	6,297	-	1,259	2,519	2,519
시 도 비	809	-	162	323.5	323.5
시군구비	1,889	-	378	755.5	755.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 3.  : 위수탁 계약 체결(수탁자: 한국어촌어항공단)

○ 2021. 12. : 기본계획 수립 및 고시 완료

○ 2022. 8.  : 사전SOC 시행 협의 완료

□ 향후계획

○ 2022. 9.       : 행정절차(공유수면, 어항시설 점‧사용)완료

○ 2022. 10.      : 실시설계 완료

○ 2023. 1. ~ 12. : 시행계획 수립 완료 후 잔여공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

2021년 신재생에너지 융복합지원사업

담당자

지역경제과 신준호(☎860-5905)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지 보급을 통해 에너지 자립도 향상 및 공공요금 절감 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 2월 ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 일대

○ 규 모 : 태양광 235, 태양열 69개소 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,126백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,126		2,416	710
국 비	1,541		1,186	355
시 도 비	163		133	30
시군구비	989		759	230
지 방 채
민간자본	433		338	95
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 신재생에너지 324개소 설치완료 / 태양광 255개소 및 태양열 69개소

□ 향후계획

○ 한국에너지공단으로부터 설치확인[준공] 이후 사업 정산

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 및 사업비 변경

┍ 당초 : 태양광 255개소 1,200kw, 태양열 73개소 702.6㎡ / 3,174백만원

┕ 변경 : 태양광 255개소 1,192kw, 태양열 69개소 687㎡ / 3,126백만원

사업명

가축분뇨친환경 공동발효센터 시범설치

담당자

축산사업소 강지혜(☎860-6717)

□ 사업목적 및 필요성

○ 축산분뇨 처리방식을 개별 퇴비사 처리에서 일괄처리방식으로 변환하여

생활환경 보전 및 깨끗한 축산환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1.~ 2023. 02.

○ 위 치 : 회진면 덕산리 2113-2 일원

○ 규 모 : 시설 2,315㎡, 부지 7,500㎡ / 우분 일일 80톤 처리

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000	0	0	1,400	600
국 비	0	0	0
시 도 비	800	0	0	560	240
시군구비	1,000	0	0	700	300
지 방 채	0	0	0
민간자본	0	0	0
기 타	200	0	0	140	60

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ ‘21. 01. : 장흥군 경축 자원화 공공처리시설 설치 시범사업 확정

○ ‘21. 03. : 부지매입(등기이전) 완료  / 5필지(매입가 230백만원)

- 군 관리계획 조례 제20조의2제1항제3호 거리제한 저촉에 따른 인허가 지연

□ 향후계획

○ ‘22. 08. : 군 관리계획 조례 개정 (건설도시과)

- 거리제한 제외항목에 “농협조합” 추가해 개정 추진

○ ‘22. 09 : 착공

○ ‘23. 02 : 준공

사업명

장흥바이오식품산업단지 체육시설용지 매입

담당자

지역경제과 박승렬(☎860-5937)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥바이오식품산업단지 3단계 체육시설용지를 미래성장 동력부지로 활용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2026(6년간)

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 장흥읍 삼산리 산 38-2 외 217필지

○ 규 모 : 888,864㎡(268,881평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  15,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,800	-	500	2,568	12,732
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,800	-	500	2,568	12,732
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 체육시설(골프장) 용지 매매계약 체결            : ‘21. 12. 27.

○ 체육시설(골프장) 용지 계약금 지급              : ‘21. 12. 23.

○ 미래성장동력을 위한 실과소 활용계획 제출 요청 : ‘22. 3. 2.

○ 체육시설(골프장) 용지 1차 중도금 지급          : ‘22. 3. 11.

○ 토지 소유권이전(전남개발공사⇒장흥군)   　　　 : ‘22. 4. 21.

□ 향후계획

○ 체육시설(골프장) 용지 활용방안 검토 및 결정    : ‘22. 9.

○ 장흥군 공유재산심의회 심의                    : ‘22. 9.

○ 기본구상·타당성 및 개발계획 변경 용역 추진    : ‘22. 10.

○ 사업시행자 변경(전남개발공사 ⇒ 장흥군)        : ‘25. 4.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

쌀 가공 Re-Cycling 플랫폼 구축

담당자

농산과 김용범(☎860-5981)

□ 사업목적 및 필요성

○ 잉여농산물(쌀)을 활용한 생분해 멀칭필름 생산으로 고부가가치 신 성장

동력사업 육성 및 환경오염 문제 선제적 대응

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022.(2년간)

○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 해당리 670-1 / 장흥바이오식품단지 내

○ 규 모 : 부지 6,611㎡ / 1,731.88㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	-	-	3,000	-
국 비	-	-	-		-
시 도 비	1,000	-	-	1,000	-
시군구비	1,000	-	-	1,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	1,000	-	-	1,000	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 업무협약 체결 : `21. 6월

○ 도로점용 및 건축허가 : `22. 4월

○ 설계 및 일상감사 완료 : `22. 5월

○ 건축 및 기계장비 입찰 : `22. 7월

□ 향후계획

○ 사업 착공 : `22. 9월

○ 사업 준공 : `22. 12월

○ 시험가동 및 제품 생산 : `22. 12월

사업명

“걷고싶은 섬” 소등섬 둘레길 조성사업

담당자

문화관광과 신용철(☎860-5781)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 명소인 소등섬의 다양한 얼굴을 마을 주민 및 관광객이 걸어        다니면서 즐길 수 있도록 테마형 둘레길 조성

○ 진입로 내 소규모 상가 조성을 추진하여 마을 법인 구성 후 지역민이        소규모 음식점, 판매장 등 직접 운영하여 수익 창출 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2023.

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 용산면 상발리 산32번지 일원

○ 규 모 : 둘레길 조성 L = 1,800m, 주차장 1개소, 화장실 1개소 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000
국 비
시 도 비
시군구비	3,000			1,000	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 일반해역이용협의 용역 완료                                  : ’22. 5.

○ 기본 및 실시설계용역 완료                                   : ’22. 5.

○ 계약심사 및 일상감사 완료                                   : ’22. 5.

○ 총괄 및 1차분 계약의뢰                                      : ’22. 6.

○ 1차분 착공                                                  : ’22. 7.

□ 향후계획

○ 1차분 준공                                                  : ’22. 12.

○ 잔여분 발주                                                 : ’23. 1.

○ 잔여분 준공                                                 : ’23. 12.

사업명

장흥형 스마트 그린도시 사업

담당자

미래혁신과 백지은(☎860-6241)

□ 사업목적 및 필요성

○ 탐진강(장흥댐)을 활용한 수열에너지 도입으로 소도시형 그린 뉴딜 모델 개발

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022. (2년)

○ 위 치 : 장흥읍 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	-	1,906	8,094	-
국 비	6,000	-	1,488	4,512	-
시 도 비	600	-	49	551	-
시군구비	3,400	-	369	3,031	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 공기관 위탁(K-water)                          : □21. 5. ~ □22. 12.

○ 실시설계 용역 추진                           : □21. 9. ~ □22. 6.

-제로에너지 시설개선, 시범 실증센터, 수열 홍보관 등

○ 종보존 시설 구축 공사                        : □22. 4. ~ □22. 7.

○ 제로에너지 시설개선 공사 착공                : □22. 7.

□ 향후계획

○ 수열 시범 실증센터 공정별 공사 발주          : □22. 8월 중

○ 수열 홍보관 전시분야 협상에 의한 계약 체결   : □22. 8월 중

○ 수열 공급시설 설치 공사 발주                 : □22. 9월 중

사업명

바이오메디컬 R&D기반 글로벌진출지원

담당자

미래혁신과 박주현(☎860-6251)

□ 사업목적 및 필요성

○ 세계 바이오산업 시장 성장규모 대비 중소기업 자체 연구개발 어려움

○ 중소기업 해외수출지원 시스템 고도화로 국산 바이오소재 세계경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2023. (3년)

○ 위 치 : 천연자원연구센터 內

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,000	-	2,371	3,240	3,389
국 비	5,000	-	1,317	1,800	1,883
시 도 비	600	-	316	432	452
시군구비	3,400	-	738	1,008	1,054
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2021년 산업부 공모 신청                   : ˊ21. 1.

○ 사업 추진기관 선정                        : ˊ21. 3.

○ 전남도ㆍ협력시군 협약 체결 및 사업추진    : ˊ21. 4. ~

□ 향후계획

○ 기업기술지원(2~3차년도)                    : ˊ22. 1. ~ ˊ23. 10.

○ 비임상효력시험 시스템 장비구축(2~3차년도)  : ˊ22. 3. ~ ˊ23. 9.

○ 인프라활용 전문인력양성 프로그램 추진      : ˊ22. 1. ~ ˊ23. 9.

사업명

부산면 행정복지센터 신축사업

담당자

재무과 백형중

(☎860-5743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 행정복지센터 이전 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 12. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 부산면 구룡리 884-3

○ 규 모 : 행정복지센터신축(연면적660.82㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비			58	2,442
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  13.8 %)

○ 기본 및 실시설계완료                            : 2022. 5.

○ 농업진흥구역해제 및 군관리계획 실시설계인가완료 : 2022. 6. ~ 7.

○ 업체선정 및 착공 후 기초 토공사 시행중          : 2022. 7. ~ 8.

□ 향후계획

○ 기초토공사 및 주요 구조부 철근콘크리트공사     : 2022. 9. ~ 10.

○ 내외부 시설 및 마감공사                        : 2022. 10. ~ 12.

○ 장에인시설 본인증 및 준공                      : 2022. 12. ~ 2023. 2.

사업명

회진면 행정복지센터 신축사업

담당자

재무과 백형중

(☎860-5743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 행정복지센터 신축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 12. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 회진면 회진리 2140-3

○ 규 모 : 행정복지센터신축(연면적739.8㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,500 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비			141	2,359
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  22 %)

○ 기본 및 실시설계완료                            : 2022. 5.

○ 업체선정 및 착공 후 기초공사 시행중             : 2022. 8.

□ 향후계획

○ 주요 구조부 철근콘크리트공사                   : 2022. 8. ~ 9.

○ 내외부 시설 및 마감공사                        : 2022. 9. ~ 11.

○ 장에인시설 본인증 및 준공                      : 2022. 12. ~ 2023. 1.

사업명

정남진 장흥찹쌀 주산지 활성화사업

담당자

농산과 김지원(☎860-5963)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥찹쌀 고급 브랜드화를 통한 찹쌀재배농가 판매확대 및 농가 소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022.(2년간)

○ 위 치 : 장흥군 장동면 배산리 일원

○ 규 모 : 1개소 / 보조사업자 : 용두농협

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,230백만원(보조 80%, 자담 20%)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,230	-	420	2,810	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,584	-	272	2,312	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	646	-	148	498	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 1차 사업 완료 : 410백만원(보조 265, 자담 145)

- 브랜드 개발 등 10, 찹쌀 연구시설 구축 및 기계 장비(지게차) 구입 400

○ 2, 3차 사업 추진 : 2,820백만원(보조 2,320, 자담 500)

- 2차 사업: 저온보관시설 신축, 디자인 개발 등 / 960백만원(보조 823, 자담 137)

- 3차 사업: 찹쌀 도정시설 구축, 교육 컨설팅 등 / 1,860백만원(보조 1,497, 자담 363)

□ 향후계획

○ 2, 3차 사업 완료 후 사업비 집행 및 준공: 2022. 11월 한