[별지6] 2022년 개별 투자사업의 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 장흥군에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
이회진항 어촌뉴딜 300	9,476	1,421	1,421	3,411	4,644	2024.	2022. 1. 14.	51%
미세먼지 차단숲조성사업	3,000	-	-	170	2,830	2024	2022	50%
어린이 과학체험공간 확충지원 사업	2,154		1,037	917	2,000	2023	2022	83%
정남진역 진입도로 확포장사업	3,000	-	414	2,586	-	2024	2022	20%
진균류 바이오헬스 소재상용화 지원사업	21,591	6,162	1,805	12,186	7,600	2024	2022	42%
군민이 함께하는 여흥마을 조성	3,000		-	600	2,400	2024		50%
힐링문흥 가족친화 환경조성	3,000	-	-	400	2,600	2024	2022	0%
장흥바이오식품산업단지 입주기업 지원센터 신축	2,400	24	38	39	2,299	2024	2022	80% (설계)
수산물 저온위판장 건립사업	3,000	-	-	-	3,000	2024	2022	20%
문흥 빛의거리조성사업	4,000	-	-	4,000	-	2024	2022	10%
북부농업기계 임대사업소 신축	3,000	300	270	250	-	2024.3.	2022	8.3%
중흥촌 청년자립 학교 설립	2,200	-	-	18	2,182	2025	2022	20%
여흥 두드림 센터 조성사업	10,000	10,000	-	-	19	9,981	2025	2022
안양 수문권역 해상공원 설치사업	400,000	-	-	20,000	380,000	2024.	2022.12.30.	0%
장흥댐 관광자원화사업	5,800	-	-	2,000	3,800	2026	2022	10%
회령포 관광자원화 사업	3,600	-	-	1,600	2,000	2024	2022	10%
역사향기숲 테마공원 조성사업	10,000	975	442	5,760	2,823	2024년	2019년	25%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업의 추진현황 1

사업명

이회진항 어촌뉴딜 300사업

담당자

해양수산과 강창범(☎860-6023)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어항의 기반시설 및 어항기능시설의 확충필요

○ 해조류를 활용한 지역 활성화 및 매력도 증진 필요

○ 문화·관광자원의 활용 및 자원 연계성 강화필요

○ 인구 노령화 및 청장년층 감소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년(3개년)

○ 위 치 : 장흥군 회진면 회진리 94-11 일원 (이회진항)

○ 규 모 : 343,722㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,476백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,476	-	216	4,311	4,873
국 비	6,633	-	151	3,017	3,411
도 비	853	-	20	389	439
군 비	1,990	-	45	905	1,023

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 이회진항 실시설계(공통, 특화) 착수	: ’23.  9.

□ 향후계획

○ 특화사업(해조류 공동작업장) 착공 예정                    : ’24.  11.

○ 공통사업(방파제 정비 및 소형선 부두 확충) 착공 예정      : ’24.  12.

개별 투자심사 사업의 추진현황 2

사업명

미세먼지 차단숲조성사업

담당자

산림휴양과 염세경(☎860-6092)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산단에서 발생하는 분진·소음·악취를 저감 해주는 차단숲 벨트를 조성하여 월평마을 등 지역주민의 삶의 질 향상과 쉼터 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2024. (2년간)

○ 위 치 : 장흥읍 삼산리 762 장흥바이오식품산업단지 일원

○ 규 모 :  3ha / 완충·연결녹지

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	-	-	170	2,830
국 비	1,500	-	-	85	1,415
군 비	1,500	-	-	85	1,415

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 사업대상지 구획 및 협의 (경제산업과)   : `23. 1. ~ 2.

- 2022년 : 2ha / 국도2호선 가로변, 제암산진입도로 (다솔~신기마을)

- 2023년 : 3ha / 장흥산단 완충녹지구역 (월평마을 주민 희망)

○ 계약심사 (군) 및 일상감사, 예산 확보   : ’23. 2. ~ 3.

- 본예산 확보(150백만원), 미확보(20백만원 / 1회추경)

○ 기본계획 및 실시설계 용역 시행        : ’23. 4. ~ 10.

○ 용역 보고회 개최 (주민설명회, 도자문)  : ’23. 6. ~ 9.

○ 행정절차 협의 및 이행                 : ’23. 10. ~ 12.

□ 향후계획

○ 미세먼지 차단숲 확대 조성 시행        : ’24. 1. ~ 12.

개별 투자심사 사업의 추진현황 3

사업명

어린이 과학체험공간 확충 지원사업

담당자

문화관광실 김예진(☎860-5797)

□ 사업목적 및 필요성

○장흥의 청정자연ㆍ문화ㆍ관광자원을 활용한 융·복합문화체험시설 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 4. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 장흥군 우드랜드길 142, 임올대

○ 규 모 : 건물 연면적 958.57㎡ (전시면적 564.75㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,154백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,154	-	1,037	917	200
국 비	1,000	-	500	500
군 비	1,154	-	537	417	200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

○ 전시콘텐츠 기본방향 설정 및 실시설계 완료            : ’23. 3. 31.

○ 어린이과학관 전시시설 전시물 제작 및 도장공사 진행   : ’23. 6월~

□ 향후계획

○ 어린이과학관 전시시설 설계 및 제작·설치 용역 완료     : ’23. 8. 28.

○ 기간제 인력 채용 및 교육                              : ’23. 9.

○ 정남진 어린이 체험과학관 개관                         : ’23. 9.

□ 사업변경 내역

○ 편성목 변경으로 인한 사업변경 (’22. 11.)

-편성목 사무관리비, 감리비를 시설비로 변경 사용

○ 사업비 증액으로 인한 사업변경 (’23. 5.)

-당초 2,000백만원 변경 2,154백만원 (시설비부분 군비 증)

개별 투자심사 사업의 추진현황 4

사업명

정남진역 진입도로 확포장사업

담당자

건설도시과 이기준(☎860-6131)

□ 사업목적 및 필요성

○ 정남진역 신설 및 국도2호선․23호선 연결로 인하여 장래 교통량 및

물동량 급증 등 발전 가능성이 높은 곳으로 교통인프라 확충

○ 기존도로를 4차선으로 확장하여 교통체증 해소 및 도시발전을 도모

○ 공사 직접시행 시 재정 절감(15억원) / 철도공단 시행 시 간접비 15억원 추가 소요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5. 16. ~ 2024. 4. 15.

○ 위 치 : 장흥군 군민회관 ～ 정남진역

○ 규 모 : 도로확포장(4차선) L=683.43m, B=20.5~21.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	-	414	25,586	-
군 비	2,000	-	414	1,586	-
기 타	1,000	-	-	1,000	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2022. 5. : 공사 착공

○ 2023. 8. : 토공 성토작업 및 4차로 부지조성

□ 향후계획

○ 2024. 4. : 공사 준공 및 4차로 개통

□ 사업변경 내역

○ 해 당 없 음

개별 투자심사 사업의 추진현황 5

사업명

진균류 바이오·헬스 소재 상용화 지원사업

담당자

농업기술센터 김주미(☎860-6544)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 유일 진균류 자원 대량생산·가공 기반시설을 구축하여 기능성 소재

산업화를 통해 지역 산업 거점 확보 및 자립화율 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 4. 1. ~ 2024. 12. 31. (2년 9개월)

○ 위 치 : 장흥바이오식품산업단지(삼산리 752-8)

○ 규 모 : 건축(3,593㎡), 대지(9,917㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,591백만원 (국 9,591, 도 3,600, 군 8,400)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액			향후 소요액
		기투자	2022년	2023(~8월)	2023년(8월 이후)	2024년 이후
계	21,591	6,162	1,805	2,251	9,935	7,600
국 비	9,591	2,562	341	1,044	4,806	3,400
시 도 비	3,600	1,080	439	362	1,539	1,260
시군구비	8,400	2,520	1,025	845	3,590	2,940

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 42%)

○ 진균류 바이오·헬스 소재 상용화 지원센터 장비‧장치 구축

- 1차년도 : 구축 완료 / 2차년도 심의 완료 및 구매계약 진행 / 3차년도 상시심의 완료

○ 배양 생산·표준화·품질관리 등 신규 장비 (39종 85대) 구축

※ (도입완료) 11종 20대 / (진행중) 28종 65대 장비심의 완료 → 조달구매

○ 진균류 바이오·헬스 소재 상용화 지원센터 실시설계 추진(95%)

□ 향후계획

○ 지원센터 (3,375㎡) 건축 완공 (착공 : ’23. 11월 예정) : ’24. 9월

○ 시험생산 및 GMP인증 (식약처) 준비        : ’24. 10 ~ 12월

□ 사업변경 내역

○ 실시설계 결과 공사비 증액 필요 (도 7.5, 군 17.5)

- 예정 공사비 (억원) : 65 (계획) → 140 (설계) → 110 (조정/1차) → 90 (조정 중/2차)

※ 전라남도 예산 요청 협의 중

개별 투자심사 사업 추진현황 6

사업명

군민이 함께하는 여흥마을 조성

담당자

총무과 남희식(☎860-5602)

□ 사업목적 및 필요성

○ 폐교 위기의 지역학교 유지를 위해 농산어촌 유학생 유치를 위한 유학생 가구 거주 플랫폼 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2024년

○ 위 치 : 전남 장흥군 장평면 임리 341

○ 규 모 : 11동 (모듈러주택 10세대, 커뮤니티센터 1동) ※ 연면적 970㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	-	-	600	2,400
시 도 비	1,200	-	-	150	960
시군구비	1,800	-	-	450	1,440

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 건축물 철거 및 폐기물 처리완료

○ 건축설계공모 공고완료

□ 향후계획

○ 건축설계공모 심사 및 실시설계업체 계약

○ 건축물 신축공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황 7

사업명

힐링문흥 가족친화공간 조성

담당자

문화관광실 박홍남(☎860-5763)

□ 사업목적 및 필요성

○ (옛)장흥교도소 주벽외부 공간을 활용한 가족친화공간 조성을 통해 커뮤니티공간 조성 및 주민 휴게공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2023. (2년간)

○ 위 치 : 장흥읍 원도리 191번지 일원

○ 규 모 : 산책로 및 조경 등 공원조성, 건축물 리모델링(5동)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	-	-	400	2,600
군 비 (지방소멸 대응기금)	3,000	-	-	400	2,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ (옛)장흥교도소 부지 경계복원․경계 측량 : 23. 4월

○ 건축기획 용역 완료 : 23. 10월

□ 향후계획

○ 공공건축 심의 및 일반 설계공모 : 23. 9월 ~ 11월

○ 계약 및 공사 착공 : 23. 12월

개별 투자심사 사업 추진현황 8

사업명

장흥바이오식품산업단지 입주기업 지원센터 신축

담당자

경제산업과 김정한(☎860-5938)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 기업 지원 역할 및 근로자 생활편의 등 산단 내 구심점 역할을 할 수 있는 복합 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 10월 ~ 2024. 7월 (2년간)

○ 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 해당리 651-1

○ 규 모 : 연면적 약 492㎡ (149평) / 지상 1층 규모

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,400	24	38	39	2,299
군 비	2,400	24	38	39	2,299

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 기본 및 실시설계 / 80%)

○ 지원센터 건립 계획 간담회                           : 2022. 3.

○ 자체 지방재정 투자심사                              : 2022. 11.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 완료                               : 2023. 10.

○ 지원센터 착공                                       : 2023. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 연면적 450㎡ / 지상1층 → (변경) 연면적 492㎡ / 지상1층

총사업비 : (당초) 2,100백만원 → (변경) 2,400백만원

사업기간 : 2022. 10. ~ 2023. 12. → 2022. 10. ~ 2024. 7.

개별 투자심사 사업 추진현황 9

사업명

수산물 저온위판장 건립사업

담당자

해양수산과 이성환(☎860-6012)

□ 사업목적 및 필요성

○ 위판장 현대화 모델 구축을 통한 수익구조 다변화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 7. ~ 2024. 6.(1년간)

○ 위 치 : 장흥군 회진면 노력도1길 465 장흥노력항 이루언

○ 규 모 : 수산물 저온위판장 신규 건립 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	-	-	-	3,000
국 비	1,500	-	-	-	1500
도 비	180	-	-	-	180
군 비	720	-	-	-	720
민간자본	600	-	-	-	600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사업자 확정 및 교부신청서 제출 요청                 : ’23. 8. 18.

□ 향후계획

○ 보조금 교부결정 통보                                : ’23. 8월 중

○ 사업 준공 및 정산                                   : ’24. 6월 중

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 10

사업명

문흥 빛의 거리 조성사업

담당자

건설도시과 박덕영(☎860-6143)

□ 사업목적 및 필요성

○ 토요시장과 탐진강변 일원에 경관조명과 경관시설을 설치하여 아름답고       특색있는 빛의 거리 조성으로 지역 상권을 활성화하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 :  2023. ~ 2024.

○ 위 치 : 장흥읍(토요시장, 탐진강변, 정남진도서관~군민회관 일원)

○ 규 모 : 문흥 빛의 거리 조성사업 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	-	-	4,000	-
군 비 (지방소멸대응기금)	4,000	-	-	4,000	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 마스터플랜 용역 추진 / 19,316천원                  : ‘23. 4. ~ 10.

○ 관계부서 협의                                     : ‘23. 7. ~ 8.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계 용역 추진 / 174백만원           : ’23. 9. ~ 12.

○ 사업 총괄 발주 및 사업 시행                       : ‘23. 12. ~ ‘24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황 11

사업명

북부농업기계 임대사업소 신축

담당자

농업기술센터 이계련(☎860-6561)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥 본점과 관산읍 남부임대사업소 운영에 이어, 북부지역 농업기계 임대사업소 설치로 농업기계 임대사업의 효율적인 운영체계 구축

○ 해당지역 농업인들의 농업기계 임대사업소 접근성을 개선하고, 농번기 상용 농업기계의 수요를 분산함으로써 적기영농 실현과 농업기계화를 촉진하고 농업생산비 절감을 통한 농가 소득증대에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.2.~2024.3.

○ 위 치 : 장동면 조양리 873-1번지 일원

○ 규 모 : 1개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	300	2,700	250	-
국 비	450	45	1,350	-	-
도 비	90	9	270	-	-
군 비	2,460	246	1,080	250	-

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 10%)

○ 사업계획 수립 : 2021. 6.

○ 사업부지 선정 및 매입 : 2022. 4.

○ 선호기종 설문조사 : 2022. 10.

○ 건축기획 용역 및 공공건축 심의 : 2023. 2.

○ 기본 및 실시설계 용역 : 2023. 3. ~ 6.

○ 농업기계 구입 : 2023. 1. ~ 10월

○ 전남도 계약심사 완료 : 2023. 7.

○ 건축협의 요청 및 계약의뢰 : 2023. 8.

□ 향후계획

○ 건축공사 등 추진 : 2023. 9. ~2024. 2.

○ 준공식 및 임대사업 개시 : 2024. 3.

개별 투자심사 사업 추진현황 12

사업명

중흥촌 청년자립학교 설립

담당자

농촌활력사업소 김지후(☎860-6643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자본과 기술이 없는 청년귀농 희망자들에게 안정적인 생활환경과 농업 프로그램을 지원하여 청년인구 유입을 유도

○ 새로운 청년 커뮤니티 활성화를 위해 취미, 여가, 창업, 축제, 생활지원 기능을 제공하는 공간 구성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2025.

○ 위 치 : 장흥군 용산면 운주리 일원

○ 규 모 : 청년복지센터 설립 1식(건축 연면적 576㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,200	-	-	18	2,182
군 비 (지방소멸대응기금)	2,200	-	-	18	2,182

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 수립 완료         : ’23. 7.

□ 향후계획

○ 사전공공건축 심의 추진     : ’23. 8. ~ 9.

○ 실시계획 수립 추진         : ’23. 9. ~ ’24. 8.

○ 공사 발주 및 준공          : ’24. 9. ~ ’25. 8.

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황 13

사업명

장흥군 여흥(與興) 두드림센터 조성사업

담당자

노인아동과 김훈(☎860-5884)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 세대가 어울릴 수 있는 복합 커뮤니티센터 조성을 통해 세대간        소통·교류 확대, 가족 및 문화 공간 조성 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. ~ 2025. 6. (3년)

○ 위 치 : 장흥읍 원도리 191번지 (구 장흥교도소)

○ 규 모 : 부지면적 2,600㎡ / 건축면적 455㎡(지상 4층, 지하 1층), 연면적 2,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원 (광역기금 6,000, 기초기금 3,000, 군비 1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	-	-	19	9,981
국 비	3,000	-	-	6	2,994
시 도 비	6,000	-	-	11	5,989
시군구비	1,000	-	-	2	998

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 사업 계획(안) 수립                              : '22. 09.

○ 중기지방재정계획 반영, 도 투자심사 완료, 공유재산 승인  : '22. 09. ~ '22. 12.

○ 사업 부지 내 도로 용도 폐지, 건축물대장 현행화  : '23. 04. ~ '23. 07.

○ 건축기획 용역 (사업계획 사전검토 포함)           : '23. 08. ~ '23. 11.

□ 향후계획

○ 설계공모 발주, 기본설계 및 실시설계             : '23. 12. ~ '24. 05.

○ 공사발주 및 시공                               : '24. 06. ~ '25. 05.

○ 준공                                           : '25. 06.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : (변경 전) 2022. ~ 2023. / (변경 후) 2022. ~ 2025.

○ 사업규모 : (변경 전) 부지면적 : 5,400㎡, 건축연면적 2,282㎡

(변경 후) 부지면적 : 2,600㎡, 건축연면적 2,000㎡

개별 투자심사 사업 추진현황 14

사업명

안양 수문권역 해상공원 설치사업

담당자

해양수산과 백라인(☎860-6021)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수문해수욕장을 중심으로 한 관광객 수요에 대응하기 위해 해양자원을 연계한 해양관광자원 시설조성으로 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2025(3개년)

○ 위 치 : 전남 장흥군 안양면 수문리 142-20번지(수문해수욕장) 전면해상

○ 규 모 : 면적 5,000㎡(도교, 조형물, 포토존, 휴게시설, 조명 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	-	-	200	3,800
도 비	2,000	-	-	100	1,900
군 비	2,000	-	-	100	1,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

❍ 타당성 조사 및 투자심사 완료	:’22. 12.

□ 향후계획

❍ 실시설계 및 해역이용협의 완료	: ’24.  3.

❍ 해상공원 설치사업 착공 예정	: ’24.  4. ~

개별 투자심사 사업 추진현황 15

사업명

장흥댐 관광자원화사업

담당자

문화관광실 신진호(☎860-5784)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥댐 천혜의 자연경관을 역사·문화·예술자원과 연계하여 대한민국

대표 생태관광 여행지 수변문화공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ~ 2026. (4년간)

○ 위 치 : 장흥군 유치면 장흥댐 일원

○ 규 모 : 생태탐방로 4.2km, 쉼터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800	-	-	2,000	3,800
국 비	2,900	-	-	1,000	1,900
군 비	2,900	-	-	1,000	1,900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본계획수립	: ’22.  1. ~ 10.

○ 관계기관 협의 (영산강유역환경청, 수자원공사)  : ’22.  9.

○ 2023년 신규사업 확정 / 전라남도	: ’22. 11.

○ 중기지방재정계획 반영, 투자심사 완료	: ’22. 12.

○ 실시설계 추진 중                            : ’23.  4. ~ 9.

□ 향후계획

○ 도 행정협의 및 계약심사 등	: ’23. 10.

○ 총괄 및 1차년도 사업 추진	: ’23. 12. ~

개별 투자심사 사업 추진현황 16

사업명

회령포 관광자원화 사업

담당자

문화관광실 신진호(☎860-5784)

□ 사업목적 및 필요성

○ 남해안 관광벨트의 생태친화적 지리요건과 이순신 관련 역사문화자원 활용 가능

○ 회령포 문화축제와 연계한 관광자원 및 기반시설 조성으로 지역관광 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2024. (3년간)

○ 위 치 : 장흥군 회진면 회진항 일원

○ 규 모 : 회령포 상징조형물 설치, 공원 (광장) 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,600	-	-	1,600	2,000
국 비	1,800	-	-	800	1,000
군 비	1,800	-	-	800	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 기본 및 실시설계용역 과업 착수	: ’22.  3.

○ 주민, 관련기관 의견 수렴 (농어촌공사, 여수해양청)	: ’22.  5. ~  8.

○ 용역 중간보고회 개최	: ’22.  9.

○ 부지이용계획 변경 협의 및 주민 의견 수렴	: ’22.  9. ~ 11.

○ 주민 및 추진위원회 의견 수렴 (부지이용계획 변경 등)	: ’23.  2. ~  4.

○ 부지이용계획 변경 최종 협의 (여수해양청)               : ’23.  5.

○ 부지이용계획 변경 요청 (여수해양청)	: ’23.  7.

□ 향후계획

○ 기본계획 수립 완료	: ’23.  9.

○ 실시설계 추진	: ’23. 10.

○ 사업 착공	: ’24.  1. ~

개별 투자심사 사업 추진현황 17

사업명

역사 향기숲 테마공원 조성

담당자

산림휴양과 김복기(☎860-6090)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후화된 예양공원을 재창출하여 지역민과 토요시장을 찾는 관광객들에게

편익 제공 및 지역 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024.(5년간)

○ 위 치 : 장흥읍 예양근린공원 일원

○ 규 모 : 7.0ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	975	442	5,760	2,823
도 비	5,000	487.5	221	2,880	1,411.5
군 비	5,000	487.5	221	2,880	1,411.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25 %)

○ 전남도 계약심사 (건축)               : `23. 1.

○ 토목․조경분야 사업추진             : `23. 1. ~ 8.

- 총괄 4,381백만원 / 1차분 2,423백만원

○ 통신, 전기분야 사업추진              : ’23. 4.

- 919백만원 (전기 677, 통신 242)

○ 건축분야  사업추진                   : ’23. 6. ~ 9.

- 총 괄 2,114백만원 (건축 1,848 전기 159, 통신 98, BF인증 9)

- 1차분 1,055백만원 (건축 900 전기  86, 통신 60, BF인증 9)

○ 감리 (토목, 전기, 통신)                : ’23. 2. ~  ’24. 4.

□ 향후계획

○ 2차 (토목, 조경), 2차(건축)        : ’24. 1.

○ 숲속공방운영 (경제산업과)        : ’24. 10. ~ ’25. 12.

○ 주민주도형 문화축제 (문화관광실) : ’24. 10. ~ ’25. 12.