11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 군에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사 업 명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
대한민국통합의학 박람회(2011)	1,000	1,000	-	-	2011	2011	100
대한민국통합의학 박람회(2012)	1,200	1,200	-	-	2012	2011	100
창업보육센터 건립	3,890	3,240	650	-	2013	2012	100
통합의료센터 건립	25,000	351	3,870	20,779	2015	2011	10
장평 제2농공단지 조성사업	3,500	284	3,216	-	2014	2011	15
억불산 난대 자생 식물원 조성사업	2,600	900	800	900	2014	2012	50
관산지구 소규모 수도시설 개량사업	5,162	2,777	1,185	1,200	2015	2010	63
안양 면단위 공공 하수처리장 설치	3,106	1,137	1,969	-	2013	2010	80
안양 하수관거 정비사업	6,200	-	714	5,486	2015	2010	-
대덕읍 전통시장 현대화사업	2,860	0	1,430	1,430	2014	2012	10
정남진 물과학관 건립사업	6,070	6,070	-	-	2012	2010	100
매생이 가공공장 지원사업	5,000	3,333	1,667	0	2013	2010	67
청소년수련원 건립	6,000	2,925	3,075	0	2013	2010	95
대덕읍 전통시장 현대화 사업	2,860	0	1,430	1,430	2014	2012	10
고읍천 생태하천 복원사업	4,200	-	697	3,503	2015	2012	-

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	대한민국통합의학박람회	담당자	기업지원과 김봉열(☎860-0874)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 우리지역의 독특한 한방, 생약자원을 전략화하고 고령화 사회의 대두 및 웰빙시대를 맞이하여 건강에 대한 관심집중으로 생약초 한방특구 활성화와 지역경제 활성화를 위하고 ○ 양․한의학적 의료지식과 검증된 대체의학의 치료기법이 융합하여 환자 중심의 의료서비스인 통합의학(IM : Integrative Medicine)에 대한 정보 교류 및 대중화로 의료 관광 활성화 도모 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2011.10.28～11. 6 / 10일간, 2012.10.24～10. 30 / 6일간 ○ 위 치 : 장흥군 관산읍 천관산일원 ○ 대 행 사 : (주)현대드림투어(2011), (주)중앙일보문화사업(2012) ○ 사업규모 : 통합의학주제관 운영, 전시 및 체험프로그램 운영 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 - 2011년 : 1,000백만원(도비 500, 군비 500) - 2012년 : 1,200백만원(도비 600, 군비 600) ○ 지금까지 집행액 : 전액 집행 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 대한민국 통합의학박람회 기본계획 수립 : 2월 ○ 박람회 조직위원회 행사 추진계획 확정 : 4월 ○ 박람회 대행사 선정 및 세부사항 추진 : 4월 ○ 추진위원회 및 T․F 구성 : 6월 ○ 참여 병원(업체) 및 세부 프로그램 확정 : 7월 ○ 박람회 개최 : '11. 10. 28 ~ 11. 6 / '12. 10. 24 ~ 10. 30 □ 향후계획 ○ 해당없음 □ 사업변경 내역 ○ 해당없음

사업명	창업보육센터 건립사업	담당자	기업지원과 김해중(☎860-0787)
□ 필요성 및 기대효과 ◦ 기업 맞춤형 창업보육공간 제공으로 고부가가치형 건강기능식품 및 천연물의약품 소재분야 중소기업 창업 육성 ◦ 지역 특산자원의 고부가가치 산업화를 위한 바이오산업 관련 기업유치 기반 마련, 산단 조기분양 등 지역내 고용창출 도모 ◦ 건강기능식품 및 천연물 의약품 클러스터 조성을 통한 졸업기업의 신규투자 유도로 지역경제 활성화 기대 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012. ～ 2013 ○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 장흥 바이오식품산업단지 內 ○ 시 행 사 : 전라남도천연자원연구원 ○ 사업규모 : 부지 5,000㎡, 건축면적 2,943㎡(지상 3층) ⇒ 보육실(40개실), 실험실, 행정실 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,890백만원(국비 1,310, 도비 1,000, 군비 1,580) ○ 지금까지 집행액 : 3,890백만원 - 2012년 : 3,240백만원(국비 660, 도비 1,000, 군비 1,580) - 2013년 : 650백만원(국비 650) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) □ 향후계획 ○ 입주기업 모집 및 운영 : ‘13. 08 ～ □ 사업변경 내역 ○ 해당없음

사업명	통합의료센터 건립	담당자	기업지원과 김근형 (☎860-0387)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 환자 중심의 의료서비스 제공을 위해서 양․한방, 보완대체의료 등 다양한 의료를 하나로 융합, 서비스하는 통합의료 인프라 구축 필요 ○ 노인성 만성질환, 환경성질환 등 효율적 의료비용 관리와 의료서비스가 결합된 새로운 의료서비스 창출로 국내 의료 서비스 산업 경쟁력 강화 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012 ~ 2015년 ○ 위 치 : 장흥군 안양면 비동리 로하스타운내 ○ 사업규모 : 건축연면적 A=6,610㎡(지상3층, 지하1층) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 25,000백만원(국비17,500, 도비 1,900, 군비 1,900, 민자 3,700) ○ 지금까지 집행액 : 351백만원(국비 351 / 2012년) ○ 향후 소요액 : 24,649백만원(국비 17,149, 도비 1,900, 군비 1,900, 민자 3,700) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ○ 기본계획수립 용역 추진 : '12. 4. 9 ~ 11. 14. ○ 통합의료센터 관련 총사업비 조정 : '13. 1월 ~ '13. 7월 ○ 기본 및 실시설계용역 전남도 계약심사 : '13. 7. 25 ~ 7. 30 ○ 기본 및 실시설계용역 긴급 계약 추진 : '13. 8월 ~ '13. 9월 □ 향후계획 ○ 기본 및 실시설계용역 추진 : '13. 9월 ~ '13. 4월 ○ 공사 진행 및 준공 : '14. 5월 ~ ’15. 11월 ○ 통합의료센터 운영병원 선정 : '14. 6월한 ○ 의료장비 및 기자재 구매 : '15. 6월 ~ ’15. 11월 ○ 통합의료센터 개원준비 : '15. 6월 ~ ’15. 11월

사업명

통합의료센터 건립

담당자

기업지원과 김근형(☎ 860-0387)

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 관리지침 제 14조 2항에 의거 기본계획수립으로 기획재정부

장관과 사업규모, 총사업비, 사업기간 협의

구분	사업규모	총사업비(억원)					비고
		계	국	도	군	민자
당초	건축연면적 A=6,610㎡ (지상3,지하1)	250	175	19	19	37
변경	건축연면적 A=11,480㎡ (지상2,지하1)	246	172	37	37	-

사업명	억불산 난대 자생식물원 조성사업	담당자	환경산림과 김태형(☎860-0423)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 난대자생식물 위주의 특성화된 식물원을 조성하여 탐방객들의 다양한 산림체험 학습공간 제공은 물론 지역경제 활성화 도모 ○ 정남진 억불산 편백나무 숲과 목재 문화를 포함한 새로운 테라피 벨리 클러스터 구축 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012 ~ 2014년(3년간) ○ 위 치 : 전남 장흥군․읍 우산리 산20-1번지외 1 ○ 시 공 사 : 경성건설(주) / 전남 장성군․읍 영천리 1505-1 ○ 사업규모 : 4.2ha □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,600백만원(국비 750, 시도비 150, 시군구비 1,700) ○ 지금까지 집행액 : 900백만원 ○ 향후 소요액 : 1,700백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : %) ○ 1차 공사 완료 : 2012. 6. 28 ~ 2012. 12. 23 - 계류공사, 관리도로 및 산책로 개설, 부지조성 등 ○ 2차 공사 추진중 : 2013. 3. 18 ~ 2013. 12. 12 - 수생비오톱, 미로공원, 유리온실, 전망대 설치 등 □ 향후계획 ○ 3차 공사 : 2014. 1. ~ 2014. 12월 - 홍가시정원, 허브정원, 조경식재, 포장공사 등

사업명

관산지구 소규모 수도시설개량

담당자

상하수도사업소 이명록(☎860-0521)

□ 필요성 및 기대효과

○ 관산읍 해안지역의 지하수 고갈로 인한 짠물 유입으로 주민생활 및 위생환경에 불편을 초래하고 있는 실정으로 소규모 수도시설 개량을 통한 주민 불편해소 및 위생환경 개선에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012. 1. 11 ～ 2015. 1. 9

○ 위    치 : 장흥읍 방촌리 호당외 해안가 마을

○ 사업규모

- 배수지 1,200㎥, 가압장 1개소, 송수관(D

- 배수관로(D75 ～ D300㎜) 8.1㎞, 급수관로(D25 ～ D75㎜) 7.5㎞

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,162백만원(국비3,613,  군비1,549)

○ 지금까지 집행액 : 3,551백만원

구 분	예 산 액(백만원)			집 행 액	비 고
	계	국비	군비
계	3,962	2,773	1,189	3,551
2011	1,313	919	394	1,313
2012	1,464	1,025	439	1,464
2013	1,185	829	356	774

○ 향후 소요액 : 1,200백만원(국비840,  군비360)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63 %)

○ 송배수관로 매설완료 L=15.3km

○ 2014년 배수지(1,200㎥) 설치공사 추진하여 2015. 1. 9일까지 완료

□ 향후계획

○ 관산지구 소규모 수도시설 개량을 통한 지방상수도 급수지역 확대

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 ┏ 당초 : 관정개발 26개소, 송배수관로 34.5km

┗ 변경 : 배수지 1개소, 가압장 1개소, 송배수관17.3km

○ 총사업비 ┏ 당초 : 5,900백만원(국비4,100  군비1,800)

┗ 변경 : 5,162백만원(국비3,613  군비1,549)

○ 사업기간 ┏ 당초 : 2011. 1 ～ 2012. 12. 31

┗ 변경 : 2012. 1 ～ 2015. 1. 9

사업명	안양면단위 공공하수처리장 설치	담당자	상하수도사업소 위용관(☎860-0747)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 공공하수처리장 미설치로 인한 하천 수질오염 악화 및 마을 환경 저해 ○ 하수도 미정비로 인한 우수기 재해발생으로 인한 주민들의 재산 피해발생 ○ 주민들의 마을환경 개선 및 우수의 신속한 배제를 통한 사전재해예방 □ 사업개요 ○ 기 간 : ‘12.06 ~ ’13.12 ○ 위 치 : 안양면 운흥리 ○ 시 공 사 : 백산건설 ○ 사업규모 : 하수처리시설 270톤/일 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,106백만원(국비 2,174, 도비 43, 군비 889) ○ 지금까지 집행액 : 3,106백만원(연도별, 재원별 등) - 2011년 : 194백만원(국비 136, 도비 6, 군비 52) - 2012년 : 943백만원(국비 660, 도비 37, 군비 246) - 2013년 : 1,969백만원(국비 1,378, 도비 - , 군비 591) ○ 향후 소요액 : 1,182백만원(연도별, 재원별 등) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%) ○ 건축공 완료 및 부대시설 조성 □ 향후계획 ○ 2013. 12월 : 시운전 및 합동(군, 시공사, 운영사)점검

사업명	안양 하수관거 정비사업	담당자	상하수도사업소 위용관(☎860-0747)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 하수도 미정비로 인한 우수기 재해발생으로 인한 주민들의 재산 피해발생 ○ 주민들의 마을환경 개선 및 우수의 신속한 배제를 통한 사전재해예방 □ 사업개요 ○ 기 간 : ‘13. 9 ~ ’15. 12 ○ 위 치 : 안양면 일원 ○ 사업규모 : 하수관거 14.0㎞ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 6,200백만원(국비 4,340, 도비 - , 군비 1,860) ○ 지금까지 집행액 : 714백만원(연도별, 재원별 등) - 2013년 : 714백만원(국비 500, 도비 - , 군비 215) ○ 향후 소요액 : 5,486백만원(연도별, 재원별 등) - 2014년 : 2,000백만원(국비 1,400, 도비 - , 군비 600) - 2015년 : 3,486백만원(국비 2,440, 도비 - , 군비 1,086) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : - %) ○ 실시설계완료 □ 향후계획 ○ 2013. 9월 : 재원협의 및 인가요청 ○ 2014. 10월 : 공사착공

사업명

대덕읍 전통시장 현대화사업

담당자

지역경제마케팅과 문선화(☎860-0328)

□ 필요성 및 기대효과

○ 전통시장 시설현대화 사업으로 시장 환경개선과 고객 편의 제공으로

입점상가의 매출 극대화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013년 ～ 2014년

○ 위    치 : 장흥군 대덕읍 신월리 111번지

○ 사업규모 : 시장 재건축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,367백만원(국비 2,355, 시군구비 1,012)

○ 지금까지 집행액 : 73백만원

구 분	계	2013년	비고
계	73	73
광 특	51	51
지 방 비	22	22

○ 향후 소요액 : 3,294백만원

구 분	계	2013년	2014년	비고
계	3,294	1,357	1,937
광 특	2,304	949	1,355
지 방 비	990	408	582

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역 50%)

○ 기본 계획                          : ‘12. 7월

○ 설계 용역                          : ‘13. 4월 ~ 10월

○ 시설현대화 우수시장 선진지 견학    : ‘13. 7월

□ 향후계획

○ 임시 시장 설치 및 이주             : ‘13. 11월한

○ 공사 시행                          : ‘13. 11월 ~ ’14. 10월

○ 시장 이주 및 주변정비(명칭공모 등) : ‘14. 11월한

○ 시장 개장                          : ‘14. 12월한

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 2,860백만원 ⇒ 3,367백만원(증 507백만원) / 편의시설 등 추가 확충

사업명	제6회 대한민국 정남진물축제	담당자	문화관광과 박일표(☎860-0828)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 호수, 강, 바다가 고루 분포되어 있는 지역의 이점을 활용하여 특색있고 차별화된 여름 축제 개발로 관광자원화 및 지역경제활성화 기여 ○ 군민의 오랜 숙원 및 여론에 따라 물을 주제로 하는 지역 대표 축제 육성 과 함께 문화체육관광부 『2013 문화관광유망축제』에 선정되는 등 대내외 지역 브랜드 가치 제고로 글로벌 관광시대에 경쟁력 확보 □ 사업개요 ○ 기간 : 2013. 7. 26 ~ 8. 1(7일간) ○ 위치 : 탐진강 및 우드랜드 일원 ○ 시행주체 : 장흥군, 물축제추진위원회 ○ 사업규모 : 물축제 추진(생태체험, 전시, 교육, 놀이 등) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 1,400백만원(국비 - , 시도비 - , 군비 1,400) ○ 지금까지 집행액 : 4,180백만원 - 2010 1,400백만원(군비) 2011 1,380백만원(군비) 2012 1,400백만원(군비) ○ 향후 소요액 : 1,400백만원(2014년) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%) ○ 제6회 정남진물축제 개최 - 기 간 : ´13. 7. 26(금) ~ 8. 1(목) / 7일간 - 장 소 : 탐진강변, 편백숲우드랜드 일원

사업명	제52회 전라남도체육대회 개최	담당자	문화관광과 김웅기(☎860-0255)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 전라남도민의 화합과 결속을 다지고 전남체육 발전에 기여 ○ 대규모 체육행사 추진으로 장흥군 위상 제고 및 지역경제 활성화 도모 □ 사업개요 ○ 기간 : 2013. 1. ~ 5. ○ 위치 : 장흥군 일원 ○ 시행주체 : 전라남도, 전라남도체육회 ○ 사업규모 : 제52회 전라남도체육대회(개폐회식, 문화예술공연, 경기진행 등) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 1,300백만원(국비 -, 시도비 250, 군비 1,050) ○ 지금까지 집행액 : 1,300백만원(국비 -, 시도비 250, 군비 1,050)/2013년 ○ 향후 소요액 : - 백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %) ○ 제52회 전라남도체육대회 개최 - 기 간 : ´13. 5. 7(화) ~ 5. 10(금) / 4일간 - 장 소 : 장흥공설운동장 등 - 참가규모 : 22종목 6,200여명

사업명

정남진 물 과학관 건립사업

담당자

총무과 정혜영(☎860-0871)

□ 필요성 및 기대효과

○ 일상생활에서 없어서는 안 될 상시 필요자원중의 하나인 물을 활용하여 과학적

접근을 통해 상시 교육 기회 제공

□ 사업개요

○ 기간 : 2009년  9월 ~ 2013년 1월  ○ 위치 : 전남 장흥군 장흥읍 행원강변길20    ○ 시공사 : (주)세림건설

○ 사업규모 : 건축면적 1,614.88㎡ / 부지면적 5,030㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,070백만원(국비 1,000,  시군비 5,070)

○ 지금까지 집행액 : 6,070백만원(연도별, 재원별 등)

										(만원)
사업비 투자계획 (억원)	선정년도(’10)		2차년도(’11)		3차년도(’12)		4차년도(’13)		총계
	기금	지방비	기금	지방비	기금	지방비	기금	지방비	기금	지방비
	30,000	7,000	30,000	300,000	40,000	100,000	-	100,000	100,000	507,000
집행실적	30,000	7,000	30,000	304,000	40,000	20,000	-	176,000	100,000	507,000
(집행율)	100%	100%	100%	101%	100%	20%	-	176%	100%	100%

○ 향후 소요액 : 0백만원(사업완료)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 물 과학관 건립 : 2009년  9월 ~ 2013년 1월 사업완료

□ 향후계획

○ 해당 없음(사업 완료)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명	매생이 가공공장 지원사업	담당자	해양수산과 김국진(☎860-0414)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 초콜렛 제품에 분말형태의 매생이 성분을 첨가한 2차 가공제품을 생산하여 부가가치를 높임으로써 매생이의 판로기반 확보와 고용창출 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2010.3. ~ 2013.12. ○ 위 치 : 장흥군 부산면 호계리 200-12번지 ○ 사업규모 : 1식 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 5,000백만원(국비 1,500, 군비 1,500, 자담 2,000) ○ 지금까지 집행액 : 3,333백만원(2010년) ○ 향후 소요액 : 1,667백만원(2013년) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67%) ○ 매생이 가공공장 지원사업 1차사업 완료 □ 향후계획 ○ 매생이 가공공장 지원사업 2차사업 2013. 12월중 준공예정 □ 사업변경 내역 ○ 해당없음

사업명	장흥군 청소년수련원 건립공사	담당자	주민복지과 김정화(☎860-0514)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 청소년들에게 창의적 체험활동 문화공간을 제공하여 청소년들의 다양한 문화적 욕구충족, 올바른 가치관 정립, 건전한 여가활동과 정서함양 등의 건전한 청소년 육성 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012. 3 ～2013. 9 ○ 위 치 : 장흥군 장흥읍 우드랜드길 200-60 ○ 시 공 사 : (주) 중해건설 강삼규 ○ 사업규모 : 2개동(생활관 3층, 식당동 2층), 연면적 2,718㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,100백만원(국비 3,600 군비 500) ○ 지금까지 집행액 : 5,709백만원(국비 4,624 군비 1,085) ○ 향후 소요액 : 291백만원(국비 216, 군비 75) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%) ○ 건물 내부 공사 완료 ○ 건물 외부 토목 공사 및 주변 정비 □ 향후계획 ○ 외부 조경 식재 및 간판 설치 ○ 가구, 이불, 기자재, 식당 비품 구입 □ 사업변경 내역 ○ 사업비 변경 : 6,000백만원(국비 4,840, 군비 1,160)

사업명

대덕읍 전통시장 현대화사업

담당자

지역경제마케팅과 문선화(☎860-0328)

□ 필요성 및 기대효과

○ 전통시장 시설현대화 사업으로 시장 환경개선과 고객 편의 제공으로

입점상가의 매출 극대화 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013년 ～ 2014년

○ 위    치 : 장흥군 대덕읍 신월리 111번지

○ 사업규모 : 시장 재건축 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,367백만원(국비 2,355, 시군구비 1,012)

○ 지금까지 집행액 : 73백만원

구 분	계	2013년	비고
계	73	73
광 특	51	51
지 방 비	22	22

○ 향후 소요액 : 3,294백만원

구 분	계	2013년	2014년	비고
계	3,294	1,357	1,937
광 특	2,304	949	1,355
지 방 비	990	408	582

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역 50%)

○ 기본 계획                          : ‘12. 7월

○ 설계 용역                          : ‘13. 4월 ~ 10월

○ 시설현대화 우수시장 선진지 견학    : ‘13. 7월

□ 향후계획

○ 임시 시장 설치 및 이주             : ‘13. 11월한

○ 공사 시행                          : ‘13. 11월 ~ ’14. 10월

○ 시장 이주 및 주변정비(명칭공모 등) : ‘14. 11월한

○ 시장 개장                          : ‘14. 12월한

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 2,860백만원 ⇒ 3,367백만원(증 507백만원) / 편의시설 등 추가 확충

사업명	고읍천 생태하천 복원사업	담당자	지역경제마케팅과 이기준(☎860-0498)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 치수위주의 하천정비로 인해 훼손된 하천 환경을 자영상태에 가깝게 복원하여 수질 개선 및 수생태환경 개선 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년 ○ 위 치 : 관산읍 죽교리 250-1 일원 ○ 사업규모 : 자연정화습지조성 28,000㎡, 퇴적토 준설 22,000㎥, 평여울조성 250m, 수초재배섬 3개소, 부대공 1식 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,200백만원(국비 2,940 군비 1,260) ○ 지금까지 집행액 : 0백만원(연도별, 재원별 등) ○ 향후 소요액 : 4,200백만원(연도별, 재원별 등) □ 추진상황 ○ 군관리계획 변경결정 완료 ○ 실시설계 90% 완료 ○ 사전재해영향평가 80% 완료 □ 향후계획 ○ 2013. 9월 실시설계 완료 및 사업발주 ○ 2015. 12월 사업완료 계획 □ 사업변경 내역 ○ 사업규모 변경 - 당초 : 자연정화습지조성 28,000㎡, 퇴적토 준설 22,000㎥, 평여울조성 250m, 수초재배섬 3개소, 부대공 1식 - 변경 : 생태습지 조성 28,865㎡, 호안사면정비 2,343㎡, 평여울조성 250m, 부대공 1식