9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 장흥군에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율 (%)
안양 하수관거 정비사업	8,084	1,424	3,330	3,330	2017	2010	82%
통합의료센터 건립사업	29,551	3,753	12,225	5,425	2016	2011	75%
대덕읍 전통시장 시설 현대화 사업	4,646	1,794	2,745	107	2015	2012	99%
고읍천 생태하천 복원사업	2,978	2,378	200	400	2016	2012	99%
장평면하수처리장 및 관거 정비	7,377	714	1,999	4,664	2018	2012	25%
장흥군 공공형 승마장 조성사업	4,482	2,082	-	2,400	2017	2013	50%
2016 장흥국제통합 의학 박람회	24,700	300	5,153	19,247	2016	2014	97%
용산용인 농어촌마을 하수도 정비사업	2,800		429	2,371	2018	2014	설계중
부산유량농어촌마을 하수도 정비	6,182			6,182	2018	2014	설계중
도시가스 공급	10,640		3,880	6,760	2019	2014	80%
정남진권 푸른숲 조성사업	6,000		1,500	4,500	2017	2015	50%
대한민국 통합의학박람회	1,388		1,388		2016	2015	100%

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

안양면 하수관거 정비사업

담당자

수도사업소

황 수 현(860-0747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거 정비체계를 구축하여 방류수역의 수질보전 및 공중보건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년

○ 위 치 : 안양면 기산리 외 13개 마을

○ 규 모 : 하수관거 L=21.3km, 배수설비 589가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,084백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,084	287	1,137	3,330	3,330
국 비	5,659	201	796	2,331	2,331
시 도 비
시군구비	2,425	86	341	999	999
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   82%)

○ 2013. 7. ~ 2014. 6. : 기본 및 실시설계 용역 행정협의

○ 2014. 6. ~ 2015. 6. : 하수관거 정비사업 1차분 추진

○ 2015. 4. ~ 2015. 12. : 하수관거 정비사업 2차분 추진

○ 2016. 1. ~ 2017. 6. : 하수관거 정비사업 3차분 추진(마무리)

□ 향후계획

○ 안양면 하수관거 정비사업 3차분 추진중

□ 사업변경 내역 : 안양면 목단마을 추가반영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥군통합의학센터 건립공사

담당자

기업지원과

김 광 민(860-0387)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환자 중심의 의료서비스 제공을 위해서 양․한방, 보완대체의료 등 다양한 의료를

하나로 융합, 서비스하는 통합의료 인프라 구축 필요

○ 노인성 만성질환, 환경성질환 등 효율적 의료비용 관리와 의료서비스가 결합된

새로운 의료서비스 창출로 국내 의료 서비스 산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012 ~ 2016(공사기간 : 2015. 3. 10. ~ 2016. 11. 30.)

○ 위 치 : 장흥군 안양면 로하스타운내(비동리 산94-1, 기산리 산47-1)

○ 규 모 : 부지 18,494㎡, 연면적 9,203㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,551백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도
계	29,551	3,753	8,148	12,225	5,425
국 비	20,685	2,627	5,704	8,557	3,797
도 비	4,433	527	1,222	1,870	814
군 비	4,433	599	1,222	1,798	814

□ 추진상황

○ 분야별 계약체결 완료(기반조성‘14. 12월, 건축 등 ’15. 3월, 감리 ’15. 4월)

○ 분야별 공정률

- 통합의학센터 기반조성공사 : 75%(옹벽설치 완료, 주차장 및 조경 시공중)

- 통합의학센터 건립공사 : 72%(구조물 골조 완료, 건물내부 칸막이 시공중)

□ 향후계획

○ 건물내부 마감 및 주차장 설치 : 2016. 9. ~ 10월중

○ 기계설비 및 통신, 전기 등 시운전 : 2016. 11월중

○ 공사준공 예정 : 2016. 11. 30.

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

대덕읍 전통시장 현대화사업

담당자

경제정책과

김 남 희(860-0339)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대덕읍 전통시장 장옥 재건축 및 노후시설 환경개선으로 고객편의

제공 및 지역경제활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013. 3월 ~ 2015. 12월

○ 위 치 : 전라남도 장흥군 대덕읍 신월리 111번지 지내

○ 규 모 : 재건축 (부지 5,894㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,646백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,646	1,430	364	2,745	107
국 비	3,252	1,001	255	1,923	73
시 도 비
시군구비	1,394	429	109	822	34
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 2015.12월 : 대덕읍 전통시장(재건축) 준공

○ 2016. 8월 : 대덕읍 전통시장 간판설치사업 준공

□ 향후계획

○ 대덕읍 전통시장 장옥2층 환풍기 시설정비

○ 2016.11월(한) 대덕읍 전통시장 도로정비공사 완공추진

□ 사업변경 내역 :

- 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

고읍천 생태하천 복원 사업

담당자

경제정책과

오 병 일(860-0496)

□ 사업목적 및 필요성

○ 자연형 저수호안을 조성하여 수질정화 능력 향상과 수질개선

○ 어·패류 등 동식물의 서식처 제공으로 자연생태계 및 하천복원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2016년

○ 위 치 : 장흥군 관산읍 죽교리 고읍천

○ 규 모 : 생태습지공원 28,865㎡, 기타

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,978백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,978		2,378	200	400
국 비	2,085		1,665	140	280
시 도 비
시군구비	893		713	60	120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ 생태습지 조성

○ 조경공 및 산책로 설치 완료

○ 안내판 설치 완료 등

□ 향후계획

○ 잔디 관리

□ 사업변경 내역 : 줄떼를 씨뿌리기로 변경, 조경수 식재 등

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장평 면단위 하수처리시설 설치사업

담당자

수도사업소

황 수 현(860-0747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우․오수 합류식 하수관거 및 노후관거 정비를 통한 생활환경 개선 및  공공수역

의 수질보전을 도모할 뿐만 아니라 우수를 신속히 배제함으로써 상습 침수지역의

재해를 방지코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2018년

○ 위 치 : 장평면 장동면 일원(10개 마을)

○ 규 모 : 하수처리시설 210톤/일, 하수관거 L=13.8km, 배수설비 479가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,377백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,377		714	1,999	4,664
국 비	5,164		500	1,399	3,265
시 도 비	221		21	60	140
시군구비	1,992		193	540	1,259
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   82%)

○ 2014. 1. ~ 2015. 1. : 기본 및 실시설계 용역

○ 2015. 1. ~ 2015. 3. : 하수도정비 기본계획 부분변경

○ 2015. 1. ~ 2015. 8. : 지원협의 및 인가신청

○ 2015. 10. ~ 2018. 10. : 총괄 사업 추진중

□ 향후계획

○ 2017. 1. ~ 2018. 10. : 3,4차분 사업추진

○ 2018. 10. ~ 2018. 12. : 하수처리장 시험운영 및 사업 완료

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥군 공공형승마장

(승마체육공원)조성사업

담당자

농업축산과

장 선 영(860-0395)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새로운 성장 동력인 말산업과 연계한 승마인구의 저변 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2017년

○ 위 치 : 장흥군 안양면 기산리 일원

○ 규 모 : 부지 28,907㎡, 시설 3,687㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,482백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,482	120	1,962	-	2,400
국 비	1,850	60	590	-	1,200
시 도 비	130	12	118	-	-
시군구비	2,502	48	1,254	-	1,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1단계 사업완료(기초공사, 실내승마장, 실외승마장)

○ 지역개발사업구역(구. 개발촉진지구)에 따른 개발계획 변경승인 필요(용역중)

○ 제4차 투자심사의뢰서 제출(전남도) / 사업비 증액에 따른 재심사

□ 향후계획

○ 2단계 사업추진(클럽하우스, 축사, 부대시설)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

2016 장흥국제통합의학박람회

담당자

기업지원과

주 성 환(860-0874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서양의학․한의학․검증된 보완대체요법을 융합한 One-stop 통합의료 서비스

체험을 통해 “환자 중심의 통합의료”에 대한 이해 증진

○ 통합의료 확대를 통한 질병 예방기능 강화, 의료비 절감 및 국민건강 증진

도모 효과에 대한 공감대 확산

○ 성공적인 박람회 개최를 통해 통합의료 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014 ~ 2016년

- 행사기간 : 2016. 9. 29. ~ 10. 31.

○ 위 치 : 장흥군 안양면 비동리 일원

○ 규 모 : 기반시설조성  주제관 및 전시관 11개소 / 컨벤션 및 홍보유치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도 이후
계	24,700	300	5,153.4	19,246.6
국 비	5,700		1,400	4,300
시 도 비	4,300		653.4	3,646.6
시군구비	11,200	300	3,100	7,800
지 방 채
민간자본
기 타	3,500			3,500

□ 추진상황

○ 박람회장 기반시설 조성(77,227㎡) / 공정률 91%

○ 상설주제관 건립사업(지상2층, 2,937㎡) / 공정률 97%

○ 대행사 운영 및 주제관, 산업·체험관 구성 등

□ 향후계획

○ 2016 장흥국제통합의학박람회 개최 : 2016. 9. 29. ~ 10. 31.

○ 관람객 유치를 위한 컨벤션 홀 운영

○ 관람객 중심 이벤트 및 체험행사 운영 등

□ 사업변경 내역

○ 사업비 증액 : (당초)190억 → (변경)247억

- 건설단가 상승 등으로 인한 시설비 증가

- 국내외 기관 전문가 유치, 자체사업 등 추가운영

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

용산 용인 농어촌마을하수도 정비사업

담당자

수도사업소

황 수 현(860-0747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용산면 용인마을은 남해에 인접해 있는 마을로서 1996년도 시공되어

하수처리장 및 하수관거 노후도가 심해 개량이 절실함.

○ 용인, 접정, 인암마을 하수관거 정비로 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년

○ 위 치 : 용산면 용인, 접정리, 인암리

○ 규 모 : 하수처리시설 75톤, 하수관거 L=6.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,800			429	2,371
국 비	1,960			300	1,660
시 도 비
시군구비	840			129	711
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역 중)

○ 2015. 3. : 기본 및 실시설계 용역

○ 2015. 8. : 하수관로 계획 및 처리장 부지 선정

○ 2015. 9. ~ 12. : 장흥군 하수도정비 기본계획(부분) 변경

○ 2016. 6. : 하수도정비 기본계획(부분) 변경 완료

□ 향후계획

○ 2016. 9. : 기본 및 실시설계 완료

○ 2016. 10. ~ 2018. 12. : 총괄 사업 추진

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

부산 유량 농어촌마을하수도 정비사업

담당자

수도사업소

황 수 현(860-0747)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥군 탐진강 상류지역에 위치한 부산면 소재지의 생활하수를 통합

처리로 탐진강(국가하천) 수질환경 보전 및 악취발생으로 주민생활 환경

개선으로 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 부산면 유량, 양촌, 용동, 용두마을

○ 규 모 : 하수처리시설 160톤/일, 하수관거 l=9.25km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,182				6,182
국 비	4,327				4,327
시 도 비
시군구비	1,855				1,855
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역 중)

○ 2016. 3. ~ 4. : 실시설계용역 PQ(사업수행능력평가)

○ 2016. 5. : 실시설계용역 추진

□ 향후계획

○ 2016. 11. : 재원협의 및 설치인가

○ 2016. 12. ~ 2018. 10. : 총괄 사업 추진

□ 사업변경 내역 : 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장흥군 도시가스(LNG)공급사업

담당자

기업지원과

최 근 영(860-0353)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시가스 공급권역중 경제성, 사업비 부족 등의 사유로 도시가스를

공급받지 못하는 지역의 가스공급 조기 추진과 보급을 확대하기 위함

○ 친환경적인 도시가스(LNG) 공급으로 환경을 개선하고 안전한 공급을

통한 주민편익 증대

□ 사업개요

○ 사 업 자 : (주)해양도시가스 / GS칼텍스 자회사

○ 위    치 : 장흥군 장흥읍 일원(건산리, 예양리, 상리)

○ 사업규모 : 관로연장 25.1km(중압 13.3, 저압 11.8)

- 정압기 : 5개소(지구정압기 1,  지역정압기 4)

○ 공급세대 : 3,355세대 / ‘15년 1,857, ‘16년 834, ‘17년 599, ’18~‘19년 65

○ 사업년도 : 2015 ~ 2019년(5년간)

○ 사 업 비 : 10,787백만원 /도비400, 군비4,638, 해양5,749

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,787백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		‘15연도	‘16연도	‘17연도	‘18연도
계	5,038	1,850	1,800	1,388	-
도 비	400	150	100	150	-
군 비	4,638	1,700	1,700	1,238	-

□ 추진상황

○ 2010 지식경제부 ‘제10차 도시가스 수급계획’ 확정 발표 (‘10. 12월)

○ 2011. 11월 공급대상지역(장흥군 제9권역) 전라남도 확정 고시 (‘11. 11월)

○ 도시가스 공급사업 추진 업무협약 체결 :‘12.  6월

→ 전라남도, 군, 한국가스공사, 사업자((주)해양도시가스)

○ 도시가스공급 배관건설 실시설계(용역) :‘14. 10월

○ 도시가스 공급 배관공사 착공 :‘15. 5. 6

○ 도시가스 배관공사 추진실적 : L= 19㎞ / 중압 7㎞, 저압 12㎞

□ 향후계획

○ 2016년도 중압 및 저압 배관공사 지속 추진

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

정남진권 푸른숲 조성사업

담당자

환경산림과

장 미(860-403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장흥 삼산간척지 방조제 해안방풍림조성으로 간척지 내륙기후조절, 마을 생태 숲 기능,

정남진권 녹지관광 네트워크 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년(4년간)

○ 위 치 : 장흥군 관산읍 신동리 등(정남진 일원)

○ 규 모 : 300ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,000			1,500	4,500
국 비	3,000	-	-	750	2,250
시 도 비	3,000			750	2,250
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본계획 및 실시설계(국내 사례조사, 토양분석 등) : ’15년

○ 간척지 식재공법, 수종선정 등 전문가 자문위원회 개최(4회)

※ ’15년 추진실적 : 75ha/15억,  해송외 12종 30천본

’16년 추진실적 : 80ha/16억,  후박나무외 7종 9천본

☞ 식재수종 : 해송, 후박, 먼나무, 아왜나무, 구실잣밤, 가시나무, 홍가시, 개나리, 벚나무, 애기동백

□ 향후계획

○ 간척지 유휴토지에 방풍림, 환경숲, 마을숲 조성 사업추진 :  ’17년~’18년

□ 사업변경 내역 :

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

대한민국통합의학박람회

담당자

기업지원과

주 성 환(860-0874)

□ 사업목적 및 필요성

○ 통합의학 선점 및 통합의료서비스, 연구, 제약, 의료관광 활성화 등 연관 산업

육성을 통한 지역발전 도모

○ 양․한의학적 의료지식과 검증된 대체의학의 치료기법이 융합하여 환자 중심의

의료서비스인 통합의학(IM : Integrative Medicine)에 대한 정보교류 및

대중화로 의료 관광 활성화 도모

□ 사업개요

○ 행사기간 : 2015. 7. 31. ~ 8. 6.

○ 위    치 : 장흥군 장흥읍 청소년 수련관 일원

○ 규    모 : 43개기관 참가(국제 4개국 6개소 포함)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,338백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도 이후
계	1,338		1,338
국 비
시 도 비	669		669
시군구비	669		669
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 박람회 개최 : 7.31. ~ 8. 6.(7일간)

○ 참가기관 단체 : 43개소

- 국제 기관‧단체 : 4개국(인도, 중국, 일본, 독일), 6개소

- 국내 양방‧한방 의료기관 : 8개소

- 대학‧협회‧단체 : 11개소(대학 5, 협회‧단체 등 6)

- 기타 : 18개소(보건소 15, 지역 성공기업 3)

○ 총관람객수 : 252천명 / 검진체험자 59천명

□ 향후계획

○ 2016 장흥국제통합의학박람회 개최 : 2016. 9. 29. ~ 10. 31.